2000. 12.

『2000 主要業務施行計劃』

下半期 審査分析  結果

企 劃 情 報 室

目      次

Ⅰ. 下半期 評價 推進槪要

Ⅱ. 綜 合 評 價

Ⅲ. 審査評價 結果

□ 실국별 추진상황

□ 사업비 집행상황

Ⅳ. 問題點 및 對策

Ⅴ. 評價結果 措置事項

Ⅰ. 下半期 評價 推進槪要

<평가 대상>

□『2000년도 주요업무시행계획』상 추진과제  456건

- 중점관리사업(기획관실종합관리) 100,  일반관리사업(실국자체관리) 356

□ 실·국·본부별로는

- 기획정보실 45,   자치문화국 103,   농림수산국 73,

경제통상국 48,   복지환경국  41,   건설교통국 39,

소방안전본부 19,   공 보 관 실   5,    감 사 관 실  3,

여성정책관실 17,   총  무  과   5

- 농업기술원 13,   공무원교육원  13,     보건환경연구원  9,

청 양 대 학  4,   종합건설사업소   6,    백제권사업소   5,

꽃박조직위  8

□ 재원별로는

- 예산 사업 296건(65%),    비예산 사업 160건(35%)

□ 착수 시기별로는

- 2000년 착수 350건(76.8%),  2000이전 착수 106건(23.2%)

□ 목표달성 시기별로는

- 2000년 완료 344건(75.5%),  2000년이후 완료 112건(24.5%)

<평가 방법>

□ 1차평가 : 실·국·본부별로 자체평가

□ 2차평가 : 1차평가결과를 토대로 기획관실에서 종합평가

Ⅱ. 綜合 評價

□ 금년도를『21세기 위대한 충남시대』의 원년으로 삼아 이를 가시화 해나가기 위해 ① 수요자 중심의「인본행정」강화 ②「지식기반 경제체제」의 구축 ③ 정체성있는「충남 신지방문화」의 창조 ④ 청소년을「21세기 신지식인」으로 육성 ⑤ 개혁과 경쟁의「신경영행정체제」확립 등 □ 5대 역점시책을 설정하고 관련시책을 역동적으로 추진 □ 주요 시책·사업의 추진상황 분석결과
□ 총 456건 중	완료 260		정상추진 166		부진 24		보류 6
등으로 대체적으로 좋은 성과를 거둔 것으로 나타남 □ 이중 괄목할만한 성과를 거둔 사업을 보면 □ 전국행정기관중 최초로 Single PPM 인증획득(2000. 10. 17) ※ ISO 9001 인증(2000. 6. 24) □ 단보당「쌀생산 4년연속 전국 1위」달성 □ 충남무역사상 최대흑자 달성(63억불, 전국 102억불의 62%) □ 안면도 관광지 개발 10억불 외자 유치 등 □ 어느 해보다도 한차원 높은 道政시책 추진속에 地域發展 기반을 튼튼히 다져온 것으로 평가

□ 그러나, 일부 시책·사업에 있어서는

① 경제난으로 인한 민간부문 참여 저조

- 석문국가산업단지 조성,  아산만권 배후 신시가지 개발

② 예산 확보·집행 지연

- 백제문화권 종합개발,  전통 문화유적 보수·정비

③ 사업계획 변경·보류

- 부여 국제예술단지 조성,  계룡산 민속박물관 건립

명천지구 택지개발사업,   오수 및 축산폐수 관리

④ 민원처리·행정절차 이행 지연

-「백제 역사재현촌」기반조성공사,  축산물종합처리장 건립 등

□ 추진이 다소 미흡한 것으로 나타나 사업계획 재조정 등

적극적인 보완·개선대책의 마련 추진이 필요

□ 앞으로,  심사평가 결과를 토대로

□ 미흡·부진사업에 대하여는 조속한 정상추진방안을 강구,

적극적으로 추진해 나가도록 하고

□ 정상추진사업에 대하여는 연초 목표한대로 성과를 거수할

수 있도록 알차게 마무리

□『4천만이 살고싶은 충남건설』을 한층 가시화

Ⅲ. 審査評價 結果

□ 室局別 推進狀況

<總   括>

구 분	계	완 료		정상추진		미흡·부진		보류·취소
			%		%		%		%
계	456	260	57.0	166	36.4	24	5.3	6	1.3
기 획 정 보 실	45	27	60	15	34	2	4	1	2
자 치 문 화 국	103	64	62	32	31	5	5	2	2
농 림 수 산 국	73	27	37	40	55	6	8
경 제 통 상 국	48	33	69	13	27	2	4
복 지 환 경 국	41	31	76	7	17	2	5	1	2
건 설 교 통 국	39	12	31	23	59	3	8	1	2
소방안전본부	19	12	63	7	37
공 보 관 실	5	4	80	1	20
감 사 관 실	3	3	100
여성정책관실	17	6	35	10	59	1	6
총 무 과	5	5	100
농 업 기 술 원	13	9	69	4	31
공무원교육원	13	13	100
보건환경연구원	9	9	100
청 양 대 학	4	4	100
종합건설사업소	6	1	17	4	66			1	17
백제문화권개발사업소	5			2	40	3	60
꽃박람회조직위원회	8			8	100

성과가 우수한 사업

① 행정기관중 전국최초로 Single PPM 인증 획득(2000. 10. 17)

※ ISO 9001(행정품질시스템) 인증(2000. 6. 24)

② 안면도 관광지 개발 10억불 외자유치협약 체결

③ 난치병치료후원기금 설치 - 2004년까지 20억원 목표(금년 5억원)

④ 공공부문 개혁박람회 우수사례 선정(행정품질혁신)

⑤ 우리 오페라사상 최초로「이순신」로마 공연(12. 7)

						<전국단위 시책평가결과>
	1위(7개)			□10a당 쌀생산량(4년연속)				□지역경제진흥시책평가
				□2000을지연습평가				□제7회 전국청소년예술제
				□건축행정 건실화사업				□도로 유지보수
					□공무원 청렴도 평가(경실련)
	2위(7개)			□지방행정연수대회				□도서·오지개발
				□쌀생산대책 종합평가				□임도 신설사업
				□지방도로 추진실적				□농촌 진흥사업
				□교수요원 연찬대회
	3위(7개)			□제1회 전국연극제				□제3회 전국무용제
				□축산업무 종합평가				□인공어초 시설사업
				□공공근로사업 추진				□전국소방기능경연대회
				□공무원 교육훈련발전 연구대회

<未洽·不振事業>

기획정보실				2건

□ 총 45개 시책·사업중  부진사업 2건(4%), 보류 1건(2%)

□ 부진 사유는

- 사업계획 변경(1건), 용역비 확보지연(1건)에 따른 것으로 분석

①「청양대학」자립기반 조성(기획관실)

□ 기숙사용 임대아파트 건립은,  6월중 주공과 임대계약을 체결,

계약금 2.6억원 지급 완료

□ 학사촌 개발사업은,  토지구획정리사업으로 추진키로 하고

`99년 진입도로 공사비로 道費 10억원을 지원하였으나

- 청양군수가 감보율 과다로 사업시행이 불가하다며

면적 확대와 진입도로·학사촌 위치 변경을 건의

→ 4월중 실무추진협의회를 개최, 사업계획 변경 결정

※ 감보율 최소화(82%→48%), 사업면적 확대(19천평→30천평)

□ 현재,  사업계획 변경에 따른 실시설계 용역중

∀ 용역완료후 사업계획 승인과 사업시행 인가를 거쳐

공공시설용지 매입 및 구획정리사업 착공 예정

②「백제의 집」건립 추진(정책담당관실)

□ 기본계획 수립 용역비(1억원)를 1회 추경시(10월중) 확보하여

절대공기 부족으로 사업추진 지연

자치문화국				5건

□ 총 103개 시책·사업중  부진 5건(5%), 보류 2건(2%)

□ 부진사유는 주로 국·도비 등 사업비 확보지연으로 인해

절대 공기가 부족함에 따른 것으로 분석

① 전통문화유적 보수·정비사업(문화관광과)

□ 국비 예산의 확정 지연(3월)과 함께 이와 연계돼야 하는

道 추경 지연(10월)으로 절대공기 부족현상 초래

∀ 총 151건의 문화유적 정비사업을 추진, 현재 72% 달성

② 백제문화권 문화유적 정비(문화관광과)→□번과 내용 동일

③ 계룡산 천황봉 산제단 복원 정비(문화관광과)

□ 한국통신공사의 사업비 미확보로 사업추진이 지연되었으나

- 12월중 총 27억원의 사업비를 확보, 철거공사 착공

∀ 현재까지 구조물 3동 철거 완료, 16건은 2002년까지 완료

④ 관광지내 공중화장실 국제표준화(문화관광과)

□ 당초 6동에서 중앙 사업물량(15동)이 추가됨에 따라 지방비 확보지연

∀ 총 21동중  신축 1동, 보수 5동, 공사중 15동

⑤ 지방체육시설 확충(체육청소년과)

□ 6개 시군에서 운동장, 실내체육관 등을 건설계획이었으나

시군의 사업비 확보 부진으로 저조

∀ 홍성 종합운동장 보강만 완료되고 나머지는 설계 또는 공사중

농림수산국				6건

□ 총 73개 시책·사업중  부진사업 6건(8%)

□ 부진 사유는, 구제역으로 인한 추진여건 악화 2건,

사업계획 변경 3건, 행정절차 지연 1건 등으로 분석

① 농수산물 수출증진(농정유통과)

□ 농산물 수출 간접지원 : 국비(9.5억원) 미확보로 사업 취소

□ 물류센터 수출 : 구제역 발생으로 돈육수출 저조

※ 계획 50억원,  실적 9.2억원

② 금산 국제인삼물류센터 건립(농정유통과)

□ 물류센터 건립 기공승락서 징구 : 78필지중 63필지 징구 완료

※ 보상가 이의 제기 및 행불자 등으로 징구 지연

□ 종합운영계획수립과 관련 현실성 있는 사업 모델을 모색하고자

용역기간 연장(당초 11월말 → 12월말)

③ 축산물 종합처리장 건립(축산과)

□ 부지정리는 완료된 상태이나,  그동안 대표이사 사임 및

이사간 갈등 등으로 사업추진이 지연

□ 현재 참여기관 지분확정 및 사업시행자 선정을 완료하고,        건축공사 착공(11월말)

·참여기관지분 - 홍성군(48.9%)／홍성군축협(20%)／생산자단체(31.1%)

·사업시행자 - (주)푸른육원

④ 어촌 개발(해양수산과)

□ 어촌종합개발 (태안·보령)	→		해안도로 개설 등 11개 사업중 10건 완료, 1건 추진중
□ 어촌휴양단지 조성 (당진군 신평면)					→		시설예정지의 국토이용계획 변경 (준농림지→상업지역)으로 사업추진 지연
□ 어업인회관 건립		→		시설예정지(대천항 매립지) 이용계획 수립이 늦어져 사업추진 지연
□ 활어위판장 시설		→		시설예정지(태안 몽대포항) 이용계획 수립이 늦어져 사업추진 지연
□ 냉동·냉장시설 설치 (보령시 신흑동)						→		市費(6억원) 미확보로 사업 취소

⑤ 돼지 수출 전업농 육성(축산과)

□ 수출 전업농가 교육은 완료(1,006명)되었으나

□ 對日 돈육수출은 구제역 발생으로 3월말부터 수출중단(33% 달성)

□ 어업구조 개선(해양수산과)

□ 중앙지침시달 지연(6월중)과 계획변경(24척→18척)으로 추진지연

□ 어업실태조사 완료(11월중)후 어업손실액 평가 준비중

※ 2001. 10월말까지 어업손실액 평가보상 완료 예정

경제통상국				2건

□ 총 48개 시책·사업중  부진사업 2건(4%)

□ 부진 사유는 전반적인 경기침체와 시장재개발과 관련

주민간 갈등으로 추진이 저조한 것으로 분석

① 유통산업 활성화 추진(경제정책과)

□ 당초 공주(산성시장), 예산(역전시장), 보령(75상가) 등 3개소

재래시장 재개발사업을 추진해왔으나

- 공주·보령지역은 상인간 異見으로 추진이 지연됨에 따라

이를 당진·부여지역으로 대상지 변경(5월중)

※ 융자지원액 : 예산(35억원),  당진(15억원),  부여(6억원)

- 3개 시장(예산·당진·부여)에서도 상인간 利權과 의견 불일치로

현재까지 융자가 실행되지 못하는 등 지연

□ 재래시장 재개발사업의 대체사업으로 추진하고 있는

「소규모점포 지원사업」은

- 신청업체가 적어 지원 실적 저조(10억원중 2.3억원만 지원)

□ 농공단지 조성 및 운영 활성화(공업기술과)

□ 농공단지 조성 → 홍성 은하는 완료, 청양 운곡은 조성중

□ 미분양 농공단지 분양 → 계획(82천평)의 37%달성

□ 휴폐업체 대체입주 → 계획(35개기업)의 63%달성

복지환경국				2건

□ 총 41개 시책·사업중 부진사업 2건(5%), 보류 1건(2%)

□ 부진 사유는

- 국비지원 지연(1건), 시공회사 부도(1건) 등에 따른 것으로 분석

① 주민 의료봉사(보건위생과)

□ 도서주민 진료(113%) 및 혈액형 알아주기(105%)는 완료

□ 보건기관 시설개선사업은 보건복지부의 심사후 6월중 국비가

증액(14억→37억) 됨에 따라

- 사업대상(4개사업 17건)을 확정, 기본계획 수립을 완료하였으나

- 중앙의 자금배정이 지연(12월중)되어 2001년으로 이월 추진

□ 노후병원선 대체건조사업은

- 시공사 부도로 공정이 41%인 상태에서 공사가 중단

※ 연대보증사에 의한 보증시공 또는 재입찰을 통해 2001년 시행

② 비위생매립지 정비(환경관리과)

□ 당초 국비보조사업분(4개소)만 정비코자 하였으나, 도비 사업

물량(35개소)이 추가되면서 총 39개소로 확대

- 국비사업의 경우, 11월중 사업비 지원되어 추진이 지연되었고

- 도비사업은, 타예산 전용 및 1회추경 확보(10월중)로 지연

※ 완료 10, 공사중 2, 설계중 17, 착수준비중 10

건설교통국				3건

□ 총 39개 시책·사업중  부진사업 3건(8%), 보류 1건(2%)

□ 부진 사유는

- 민원처리 지연(1건), 민자유치 미흡(1건), 사업계획 변경(1건) 등임

① 백제문화권 특정지역 종합개발(건설정책과)

□ 문화유적 정비사업(9개소)은 대부분 국비확정 지연으로

사업추진이 늦어지고 있으며

- 이중「백제 역사재현단지」는 기반시설공사가 45%인 가운데

보상민원과 전문가의 고증기간을 거치느라 사업추진이 지연

□「공주 문화관광지 조성」은 민자유치 부진으로 추진실적이 저조

□「백제 큰길」건설사업 등 도로교통시설 확충사업(6개소)은

「토특회계」의 세입결함으로 사업비 확보가 늦어져 추진저조

□ 아산만권 배후 신시가지 개발(주택도시과)

□ IMF로 인한 민자유치 여건 불투명으로 사업추진 지연

※ 민자유치계획 수립용역 → 여건을 감안 유보상태

□ 금강종합개발(치수방재과)

□ 고수부지 2개소(부여·강경)중 구드래 고수부지는

문화재청과 설계 협의과정에서 환경보전을 위해 사업을

축소하는 것으로 결정되어

- 문화재청의 설계승인 완료후,  11월중에 공사 발주

여성정책관실				1건

□ 충남여성의 의식수준 향상 교육실시

□ 여성의식교육 및 세미나 개최는 정상추진되었으나

□ 교육시설 개보수를 위한 부족사업비(0.6억원) 확보지연으로

사업추진 지연

∀ 2001년 공사완료와 함께 다양한 교육 실시 예정

백제문화권개발사업소				3건

① 백제 역사재현촌 기반조성공사(개발과)

□ 토목공사중 상수도공사는 완료되었으나, 우수BOX공사는 75%,

기층포장공사는 50% 진도

□ 용지보상은 일부 농경지 및 가옥·지장물 등에 대한 주민

협의 지연으로 연계공종 및 후속공사가 지연

※ 미협의 물건 수용재결 및 공탁 완료(12. 8, 715필지 28만평)

② 백제 역사재현촌 건축공사(개발과)

□ 당초 10월중 설계완료 예정이었으나, 전문가의 고증 및

심의위원회의 의견 수렴 등으로 용역기간이 연장

※ 12. 13 실시설계용역 완료 보고회 개최

③ 백제 역사민속박물관 건립 추진(개발과)

□ 전문가 및 자문위원 의견수렴 절차를 거치면서 설계용역

지연(4월→9월)

<推進保留 또는 取消事業> - 6건

①「충청남도 토지공고제」도입 추진(정책담당관실) → 유보

□ 정부의 토지정책과 道의 개발계획 및 재정부담 등을

감안하여 장기적으로 검토할 사항임에 따라 추진 보류

∀ 향후 전문가의 자문에 따라 실효성 및 도입시기 등 재검토

②「부여 국제예술단지」조성(문화관광과) → 유보

□ 대상지역이 문화재보호구역으로 문화재 현상변경허가 불가

※「농어민 문화체육센터」건립으로 변경 건의·협의중

③「계룡산 자연사박물관」건립(문화관광과) → 유보

□ 사업시행자의 사업포기 의사표시로 추진 보류

④ 오수 및 축산폐수 관리(수질관리과) → 취소

□ 환경부의 사업계획 변경에 따라 국고지원 중단으로 사업취소

⑤ 지진대비 종합대책 강구(치수방재과) → 취소

□ 중앙에서 일괄적인 종합계획 수립 방침에 따라 취소

□ 명천지구 택지개발사업(종합건설사업소) → 유보

□ 감사원 감사시(5월중) 사업 타당성이 미흡하다는 지적에 따라

∀ 2001년에 사업 추진방향 재정립

○ 앞으로, 사업계획 수립시

국가정책과 道 여건 등을 감안한 치밀한 계획수립 필요

□ 事業費 執行狀況

<槪    況>

<단위 : 억원, %>

구 분	총사업비	2000 사업비	집행액	비율	이 월 액
계	352,416.2	38,135.3	36,353.6	95.3	1,781.7
기 획 정 보 실	3,029	146.6	127.6	87	19
자 치 문 화 국	58,194	3,723.4	3,562.3	96	161.1
농 림 수 산 국	50,619	5,115	5,011.6	98	103.4
경 제 통 상 국	7,903	2,060.1	2,040.5	99	19.6
복 지 환 경 국	16,232	4,633.3	4,595.7	99	37.6
건 설 교 통 국	197,795	21,465	20,196	94	1,269
소방안전본부	85	72.4	72.4	100	0
공 보 관 실	26	25.1	24.2	96	0.9
감 사 관 실	2	2.5	2.5	100	0
여성정책관실	121	47.7	45.7	96	2
총 무 과	4	4.5	12.9	287	-8.4(대여장학금과집행)
농 업 기 술 원	198	232.3	231.3	100	1
공무원교육원	1	1.2	1.2	100	0
보건환경연구원	0.2	0.2	0.2	100	0
청 양 대 학	10	10.5	12.3	109	-1.8(장학금증가)
종합건설사업소	16,453	266.1	266.1	100	0
백제문화권개발사업소	1,505	239.5	62.0	26	177.5
꽃박람회조직위원회	239	85.6	85.6	100	0

<事業費 執行 低調事業 內譯>

□	기획 정보실	:	147억원중 128억원 집행∀잔액 19억원(87%집행)

□ 함상공원 개장이 연기(당초 2000. 10월 → 2001. 4. 28)됨에 따라

집행잔액 16.3억원 이월

□「사이버 백제역사문화관」확대 구축, 근거리 통신망 확대

구축사업 등에서 2.7억원 집행잔액

□	자치문화국	:	3,723억원중 3,562억원 집행∀잔액 161억원(96%집행)

□ 관광지 개발(30개지구)을 위한 공공기반 시설 확충 및 상가,

호텔, 종합휴양시설 등 사업비 43억원 이월

- 道 및 시군비의 확보 지연으로 절대공기 부족에 기인

□ 국비포함 사업관련

- 부여 국제예술단지 조성사업이 문화재 현상변경허가 불가로

사업비 15.6억원 미집행 이월

- 전통문화유적 보수·정비사업이 국비확정이 지연되면서

절대공기 부족으로 28억원 이월

- 백제문화권 유적정비사업이 국비확정 및 지장물 매수 지연으로

21.4억원 이월

□	농림수산국	:	5,115억원중 5,012억원 집행∀잔액 103억원(98%집행)

□ 축산물 종합처리장 건립사업에서 참여기관 지분확정 및

사업자 선정 지연으로 집행잔액 52억원 이월

□ 국비포함 사업관련

- 어촌개발사업중 활어위판장 시설비가 부지이용계획 확정

지연으로 사업비가 이월되었고, 냉동·냉장시설 설치비가

지방비 미확보로 사업취소되는 등 집행잔액 19억원 이월

- 어업구조 개선사업중 어업손실액 평가보상비가 중앙계획

변경으로 미집행되어 20억원 이월

□	복지환경국	:	4,633억원중 4,596억원 집행∀잔액 37억원(99%집행)

□ 오수 및 축산폐수 관리사업이 환경부의 사업계획 변경으로

2001년이후 추진됨에 따라 미집행액 10억원 이월

□ 국비포함 사업관련

- 주민의료봉사사업중 노후 병원선 대체건조사업이 시공업체의

부도로 중단됨에 따라 집행잔액 17억원 이월

- 비위생매립지 정비사업에서 국비지원이 지연되고, 道 사업

물량이 추가(35개소)됨에 따라 사업비를 추경에 확보하게

되어 집행잔액 10억원 이월

□	건설교통국	:	21,465억원중 20,196억원 집행∀잔액 1,269억원(94%집행)

□ 지방 도로망 확충사업(143개소)에서 보상 지연, 절대공기

부족 등으로 집행잔액 103억원 이월

□ 국비포함 사업관련

- 기간교통망 구축사업(54개소 124□)이 국비확정 지연 및 편입

토지 협의보상 지연으로 집행잔액 789억원 이월

- 개발촉진지구 개발사업(3개분야 32개사업)이「토특회계」세입

감소로 사업비 지원이 지연됨에 따라 미집행액 48억원 이월

또는 내시액을 변경하여 감액조치 예정

- 백제문화권 특정지역 종합개발(19개사업)이 용지보상에 따른

민원해결 지연과 절대공기 부족으로 집행잔액 252억원 이월

※ 2001년중 → 금년 이월예산 및 2001년 예산(660억원) 사용 계획

□	공보관실	:	25억원중 24억원 집행∀잔액 1억원(96%집행)

□「행담도 홍보전시관」건립에서 공사입찰잔액 등 이월

□	여성정책관실	:	48억원중 46억원 집행∀잔액 2억원(96%집행)

□ 여성개발원 교육시설(생활관) 개보수를 위해 부족사업비

0.6억원을 추경에 확보하였으나, 공기부족으로 이월

Ⅳ. 問題點 및 對策

□ 事業費(國費)의 適期 支援方案 講究

○ 국비 지원사업의 경우,  道의 본예산이 편성된 후 국비가

지원됨에 따라 이를 다시 집행비율에 맞춰 추경예산에

편성하다보니

- 실제 사업착수시기가 늦어질 수밖에 없어 당해연도에 사업을

완료하지 못하고 매년 이월해야 하는 악순환이 반복

(예) 문화유적 보수·정비, 백제문화권 문화유적 정비사업 등

∀ 국비 지원규모를 사전 內示하고, 이를 본예산에 편성할 수

있도록 중앙부처에 제도개선 건의

□ 事業의 妥當性 檢討 徹底

○ 신규 시책·사업추진시 사전 타당성 검토를 소홀히 하여

사업추진과정에서 여건 미성숙, 사업비 확보 미흡 등으로

추진상황이 부진하거나 보류·취소되는 결과 초래

∀ 신규 시책·사업의 구상단계에서 현재의 추진여건, 사업비

확보방안, 실현 가능성 등을 면밀하게 검토한 후 추진

□ 適期에 事業計劃 再調整 履行

○ 여러가지 사유로 당초계획대로 사업추진이 어려울 경우에는

∀ 신속히 사업을 재조정하고 단계적으로 추진하는 자세 요구

Ⅴ. 評價結果 措置事項

□ 審査評價結果에 대한 措置狀況 提出

○ 대    상 : 심사평가결과 미흡·부진사업으로 평가되어

별도의 개선·보완조치가 요구되는 사업

○ 제출시기 : 심사평가 결과통보후 7일 이내

○ 제출서식 : 주요업무 심사평가지침 참조

□『審査評價 報告會』開催

○ 대 상 : 실국본부별 미흡·부진사업중 중요 현안사업

○ 시 기 : 2001. 1월중

○ 참 석 : 과장급 이상 道 간부 60명

○ 방 법 : 기획관실에서 총괄보고후

각 실국본부장, 담당과장이 해명 및 토론