행복한 변화, 새로운 충남

-지역민의 건강 휴식 및 교류공간 확보를 위한-

공 원 조 성

2015. 8.

-지역민의 건강 휴식 및 교류공간 확보를 위한- 공 원 조 성

◈ 공원현황 : 49개소 1,116천㎡

- 생활권 공원(45개소) : 소공원 6, 어린이 25, 근린 14

- 주제공원(4개소) : 문화(홍예) 1, 역사(애향) 1, 체육 2

◈ 시행사 : 충남개발공사, 한국토지주택공사

◈ 특성화계획

• 지방하천 및 소하천을 활용한 생태공원 조성

• 홍예․애향공원 등 대규모 화합의 공원 및 문화활동․생태체험형 근린공원 조성

• 지역민의 옛 흔적을 담은 전통공간 조성 등

〈그 동안 추진현황〉

❍ ’12. 2. 6 : 2구역 조경공사 착공(공원 9개소)

❍ ’12. 10. 15 : LH 초기생활권 조경공사 착공(애향공원외 3개소)

❍ ’13. 10. 1 : 행복나눔의 숲 조성공사 착공(공공공지3)

- 도 산림녹지과 시행(‘14. 11. 준공예정)

❍ ’13. 12. 30 : 1단계 사업 공원조성 완료(애향공원외 12개소)

- 주제공원(애향공원) 1개소(55,988㎡)

- 생활권공원 12개소(37,883㎡) : 근린공원2, 어린이공원4, 소공원6

❍ ’14.  9. 22 : 홍예공원 등 조경공사 착공(’15년 준공예정)

❍ ’14. 10. 24 : 어린이공원10호(3,028㎡) 신설

근린공원2호 면적증가(당초:109,000㎡, 변경:109,510㎡)

❍ ’15. 08 현재 : 4개소 완료(체육2, 근린 5,7, 어린이 16)

18개소 추진중(홍예공원 54%, 근린공원 30%, 어린이공원 5%)

〈향후추진계획>

❍ ‘15. 12 : 2단계 사업 공원조성 완료(홍예공원외 22개소)

■ 공원 조성계획

구 분		합 계	1단계	2단계		3단계
			2013까지	2014	2015	2015이후
합 계		49 (1,116,137.9)	13 (93,870.9)	4 (202,842)	18 (483,817)	14 (336,096)
주제 공원	소계	4 (475,811.9)	1 (55,987.9)	1 (48,479)	1 (274,650)	1 (96,695)
	문화공원	1 (325,941)			1 (274,650)	(51,291)
					홍예공원	(보훈공원)
	역사공원	1 (55,987.9)	1 (55,987.9)
			애향공원
	체육공원	2 (93,883)		1 (48,479)		1 (45,404)
				체육공원2		체육공원1
생활권 공원	소계	45 (640,326)	12 (37,883)	3 (154,363)	17 (209,167)	13 (239,401)
	근린공원	14 (549,036.4)	2 (20,070.4)	2 (150,447)	4 (165,503)	6 (213,016)
			3, 4	5, 7	2,6,8,9	1,11~14,16
	어린이 공원	25 (83,655.5)	4 (10,178.5)	1 (3,916)	13 (43,664)	7 (25,897)
			12 ~ 15	16	4,5,7,10, 17~25	1,2,3,6,8,9,11
	소공원	6 (7,634.1)	6 (7,634.1)
			1 ~ 6