행복한 변화, 새로운 충남

- 신도시 안정적 정책을 위한 -

내포신도시 2단계 부지조성사업 현황

2015. 7.

- 신도시 안정적 정책을 위한 -

내포신도시 2단계 부지조성사업 현황

□ 사업개요

□ 위    치 : 홍성군 홍북면, 예산군 삽교읍 일원

□ 면    적 : 995만㎡ / 100,000명(41,586세대)

□ 사업기간 : 2007. 7 ~ 2020. 12 / 2조 5,692억원

□ 사업시행자 : 충남개발공사, 한국토지주택공사

□ 그동안 추진상황

□ 내포신도시 부지조성은 총 8개 공구,  2020년까지 단계별 건설

- 충남개발공사  3개 공구 378만㎡(38%),  LH공사 5개 공구 617만㎡(62%)

□ ‘15. 6월 현재 6개 공구(680만㎡) 전체 공정률 87%, (충공 100%, LH 75%)

< 6개공구 추진상황 >

공사명		면 적	공사비(억원)	사업기간	진도(%)	사업추진 내용	시공사
충남개발공사	2-1공구 조성공사	․991천㎡	344	’09. 05 ~ ’13. 11	100	․공사 준공	현대 건설
	2-2공구 조성공사	․880천㎡	424	’10. 04 ~ ’13. 12	100	․공사 준공	극동 건설
	2-3공구 조성공사	․1,910천㎡	321	’10. 11 ~ ’13. 12	100	․공사 준공	현대 아산
L H 공사	1-1공구 조성공사	․1,501천㎡	509	’11. 08 ~ ’14. 10	100	․공사 준공	코오롱 건설
	1-3공구 조성공사	․ 336천㎡	160	’13. 11 ~ ’16. 07	65	․도로 및 관로 공사중	명지 건설
	3-2공구 조성공사	․1,182천㎡	318	’12. 01 ~ ’15. 07	100	․공사 완료	동성 건설

□ 향후 추진계획

□ 3단계 사업(정착단계) 미착수 2개 공구 부지조성 추진

- 단계별 조성계획에 따라 미 착공된1-2공구(1,514천㎡) 및 3-1공구(1,545천㎡)는 LH와 협의하여 조속 착공 추진

참고		단계별 추진현황

■ 단계별 준공계획

총 계		1단계(~2013년)		2단계(~2015년)		3단계(~2020년)		비고
면적 (만㎡)	비율 (%)	면적 (만㎡)	비율 (%)	면적 (만㎡)	비율 (%)	면적 (만㎡)	비율 (%)
995	100	184	18.4	496	49.9	315	31.7
		(184)	(18.4)	(680)	(68.3)	(995)	(100)

<단계별 추진현황도>