학술연구용역 활용계획서

연구과제명	소방복합시설 조성 입지선정 및 세부추진계획 연구	연구기관/ 책임연구원	충남연구원 / 이상준
용역발주부서/ 과제담당관	소방행정과 / 소방행정과장 이동우	담당공무원	소방위 김정균
연구기간	2016. 1. 18. ~ 9. 13.(240일)	용역비	99,301천원
연구내용	◦충청남도 소방복합시설 최종 입지선정 - 전문가 설문, 추진위원회 의결을 통한 입지평가 기준 결정 - 후보지 공모, 평가단 구성(20명, 외부전문가) 및 운영을 통한 입지선정 → 청양군 비봉면 록평리 일원(387,302㎡) ◦소방복합시설 기본계획 연구 - 시설 규모 및 소요 예산안 산정 - 소방복합시설 세부 시설 배치안 제시 - 소방복합시설 경제성 분석(경제적 타당성, 지역경제 파급효과)
활용계획	◦소방복합시설 사업 추진의 기초 자료로 활용 - 시설 규모·소요 예산안 : 기본계획 수립 시 참고 - 경제성 분석 : 지방재정 투자심사 기초자료로 활용 - 소방복합시설 배치안 : 설계 단계 등
활용시기	◦소방복합시설 조성 사업 완료 시 까지
세부추진일정 및 방법	◦소방복합시설 기본계획 수립 : ’16. 10. ◦사전 행정절차 추진 : ’17. 1. ~ 6. ◦군관리계획 변경 용역 : ’17. 7. ~ ’18. 6. ◦기본 및 실시설계 : ’18. 7. ~ ’19. 12. ◦토목 및 건축 공사 : ’20. 1. ~ ’21. 12.
기대효과	◦사업예정지 선정, 사업규모 도출을 통하여 소방복합시설 사업의 토대 마련 ◦장기적 관점에서 소방복합시설에 필요한 시설(안전테마파크 등)을 제시함으로 향후 소방복합시설 장기 발전계획에 활용 가능