수소연료전지차 부품 실용화 및 산업기반 구축사업 RFP (기반구축)

과제명 : FCEV부품시험평가센터 구축

가. 개요

□ 개요 및 필요성

o 화석연료 사용에 의한 온실가스 방출문제가 글로벌 이슈로 대두되고 있으며 특히 2015년 파리 유엔 기후변화협약 (Post 2020) 채택 및 발효 이후 국제적 환경규제가 더욱 강화될 전망이며, 특히 수송 분야 온실가스 저감 요구가 자동차 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상 됨

o 연료전지 자동차는 높은 효율과 연소 배출물이 없어 지구환경 문제에 대응 할 수 있는 수송수단으로, 환경규제 요인을 만족시키면서 긴 주행거리와 짧은 충전 시간을 가지고 있어 향후 이에 대한 수요가 크게 증가 할 것으로 예상

o 수소연료전지자동차 보급촉진 및 산업 활성화를 위해 부품개발 및 원가절감을 위한 기술개발 및 부품시험평가를 지원 할 수 있는 기관 및 장비가 필수적으로 요구 됨

o 국내에는 이를 위한 체계적인 기술개발과 시험평가를 지원할 수 있는 기반이 전무하기 때문에 수소연료전지자동차 보급 및 산업 활성화를 위한 수소연료전지자동차 부품기술의 선점을 위한 기반조성 및 시험평가 지원이 시급

나. 기반구축 목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

o 최종 목표 : 수소연료전지자동차(FCEV) 부품산업육성을 위한 연구개발 Hub구축

수소연료전지자동차 부품 실용화를 위한 기술개발 및 시험평가 전문시설 구축

수소연료전지자동차 부품의 시험평가 장비구축

o 내용

수소연료전지자동차 부품시험평가 기반구축 (`17 ~ `19 상반기, 2년)

․ 부품 개발 및 시험평가지원을 위한 센터, 수소공급장치 및 시설 구축

․ 수소연료전지자동차 부품 시험평가 장비 설치 및 규격설정 사전 조사

․ 수소연료전지자동차 부품 시험평가 장비 및 활용도 제고 방안 수립

수소연료전지자동차 부품 개발 및 시험평가 장비(14종 내외) 구축 (`19~`21년, 3년)

․ 수소연료전지자동차 스택, 수소저장탱크 등 핵심부품 개발과 시험평가 장비 구축

․ 시험/평가 항목 : 부품 성능 평가, 신뢰성, 내구 환경시험, 고압가스 기밀시험 등

수소연료전지자동차 부품 기술개발․시험평가 장비 운용

․ 중소・중견기업 대상 부품 개발 및 시험 평가 지원

․ 부품시험평가 관련 전문 인력 확보 및 시험평가자의 능력 확보

수소연료전지자동차 부품 중소기업 지원 기반 마련

․ 부품개발 기업의 애로해소 및 개발기간 단축을 위한 시제품 제작 등 기업지원

서비스 제공

․ 수소연료전지자동차 부품 개발 전문 인력양성 과정 운영

□ 연도별 목표 및 내용

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
연도별 목표	◦수소연료전지자동차 부품 시험평가기반 구축 및 전용센터 확보 추진	◦수소연료전지자동차 부품시험평가 기반 구축(전용센터 착공)	◦수소연료전지자동차 센터 건축 완공 (부품시험평가센터)	◦수소연료전지자동차 시험평가 운영 및 장비 지원	◦수소연료전지자동차 시험평가 운영 및 장비 지원과 자립화 기반 마련
구축 내용	◦센터건물 및 전용시설 설계	◦센터건물 착공	◦센터건물 완공 - 고압 수소공급 시설 - 가스 안전시스템 설치 등	◦FCEV 부품 시험평가장비 구축 - 장비세부사양 검토 - 장비구입 절차 수행	◦FCEV 부품 시험평가장비 구축 - 장비세부사양 검토 - 장비구입 절차 수행
	◦건축 허가 등 시설변경	◦시험평가 장비 사양 검토 - 주요 완성차 업체 개발 사양 - 주요국 시험평가 사양	◦FCEV 부품 시험평가장비 구축 - 장비세부사양 검토 - 장비구입 절차 수행	◦FCEV 부품 시험평가장비 운용	◦FCEV 부품 시험평가장비 운용
	◦FCEV 부품 시제품 제작 등 기업지원 서비스	◦FCEV* 부품 시제품 제작 등 기업지원 서비스	◦기술개발과제 시험평가 지원	◦기술개발과제 시험평가 지원	◦기술개발과제 시험평가 지원
	◦FCEV 부품 개발 관련 인력양성 과정 수립 및 운영	◦FCEV 부품 개발 관련 전문 인력양성 과정 수립 및 운영			◦FCEV 부품시험평가센터 자립화 전략 수립
	◦FCEV 부품기술 개발 및 시험평가 설비 활용도 제고방안 수립 및 운영
연도별 주요 성과	◦부품 개발․시험평가지원기반 부지 확보 및 실시설계 착수	◦부품 개발․시험평가센터 실시설계 완료 및 착공	◦부품 개발․시험평가센터 완공	◦장비구축 연차별 실시	◦장비구축 연차별 실시
	◦기업지원(시제작 등) 및 인력양성과정 운영	◦기업지원(시제작 등) 및 인력양성과정 운영	◦장비구축 연차별 실시	◦FCEV 부품 업체 장비활용 및 시험평가 지원	◦FCEV 부품 업체 장비활용 지원
			◦FCEV 부품 업체 장비활용 지원		◦FCEV 부품시험평가센터 자립화 전략

다. 주관기관 ∙ 총 수행기간 ∙ 정부출연금

사업기간	2017 ∼ 2021 (5개년이내)
사업예산	연차별 지원액(백만원)
	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	합계
국비	-	-	2,388	1,672	1,414	5,474
지방비	2,747	12,987	2,388	1,672	1,414	21,208
계	2,747	12,987	4,776	3,344	2,828	26,682

* 상기의 정부출연금(국비)은 예산 현황 및 평가결과에 따라 연차별로 변동 가능

** 국비지원기준

- 부지/건축 : 국비지원 불가(지자체 및 민간부담)

- 장비 및 운영비 : 국비는 소요금액의 50%이내 범위에서 지원