【2017-09】

정책실명 공개과제 사업내역서(진행 중)

① 정책사업명	계룡소방서 신축
② 추진배경	도민 모두 안전으로부터 소외받지 않는 소방 환경 조성 및 재난현장 골든타임 확보를 위해 신설 된 소방서의 청사 신축을 통해 원활한 업무수행 및 근무환경 개선
③ 사업개요	ㅇ위 치 : 계룡시 엄사면 유동리 283번지 일원 ㅇ구 조 : 철근 콘크리트조 슬래브즙, 지하1층 / 지상3층 ㅇ규 모 : 부지 12,055㎡ / 연면적 3,608.48㎡ ㅇ총사업비 : 11,579백만원(부지매입 1,500, 건축 10,079) ㅇ사업방법 : 종합건설사업소 의뢰 설계 및 건축 추진
④ 사업부서	소방행정과		⑤ 담당자	과 장 김경철(5510) 주무관 정해근(5565)
⑥ 선정기준	시설 및 전기, 통신 등을 포함한 총사업비 50억원 이상의 공사		⑦ 사업기간	2017년 ~ 2020년
<그간 주요 추진내용>
○ 신설 계룡소방서 청사 신축계획 수립		‘16.05.30.	충청남도지사 안희정 소방본부장 한상대 소방행정과장 이동우 복합시설팀장 진종현 복합시설팀 주무관 정해근
○ 2016년 제13 지방재정 중앙 투자사업심사 승인		‘16.08.09.	예산담당관 고준근 재정지원팀장 박태진 재정지원팀 주무관 김현기
○ 충청남도 공유재산심의회 취득 승인		‘16.11.23	세무회계과장 김기승 재산관리팀장 허선무 재산관리팀 주무관 이광복
○ 계룡 도시관리계획(공공청사) 결정 (변경) 고시		‘17.02.10.	국토교통과장 정석완 건설정책과장 강일권 도시계획팀장 임승만 도시계획팀 주무관 박상돈
○ 충청남도 공유재산 관리계획 도의회 의결		‘17.04.03.	세무회계과장 류재홍 재산관리팀장 이헌희 재산관리팀 주무관 황평하
○ 계룡소방서 청사 신축사업 발주 의뢰		‘16.04.05.	소방행정과장 조영학 복합시설팀장 진종현 복합시설팀 주무관 정해근

<그간 주요 추진내용>
○ 계룡소방서 청사 신축공사 설계용역 추진계획 검토 보고	‘16.05.23.	종합건설사업소 소장 윤병환 종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축팀장 김태영 종합건설사업소 건축팀 주무관 주기원
○ 계룡소방서 청사 신축공사 설계용역 일상감사 및 계약심사	‘17.08.28.	감사위원회 조사과장 엄일섭 감사위원회 계약심사팀장 박정순 감사위원회 계약심사팀 주무관 안유환
○ 계룡소방서 청사 신축공사 설계용역 시행결의	‘17.09.12.	종합건설사업소 소장 윤병환 종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축팀장 김태영 종합건설사업소 건축팀 주무관 임택균
○ 계룡소방서 신축공사 건축설계 공모 공고	‘17.09.29.	회계과장 임옥순 계약팀장 김성관 계약팀 주무관 한성대
○ 계룡소방서 청사 신축공사 건축설계 일반설계공모 당선작 선정	‘17.12.29.	종합건설사업소 소장 윤병환 종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축팀장 김태영 종합건설사업소 건축팀 주무관 박성훈
○ 계룡소방서 신축공사 건축설계 공모 결과에 따른 계약 체결	‘18.01.11.	회계과장 임옥순 계약팀장 김성관 계약팀 주무관 한성대
○ 계룡소방서 청사 신축공사 설계용역 착수	‘18.01.22.	종합건설사업소 서무과장 김종흠 종합건설사업소 계약팀장 최양진 종합건설사업소 계약팀 주무관 이길재
○ 계룡소방서 청사 신축공사 설계용역 착수보고회	‘18.02.02.	종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축팀장 김태영 종합건설사업소 건축팀 주무관 박성훈
○ 계룡소방서 청사 신축공사 설계용역 중간보고회	‘18.05.18.	종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축팀장 김태영 종합건설사업소 건축팀 주무관 박성훈

<그간 주요 추진내용>
○ 계룡소방서 청사 신축공사 설계용역 완료	‘18.08.20.	종합건설사업소 서무과장 허영 종합건설사업소 계약팀장 박상용 종합건설사업소 계약팀 주무관 이길재
○ 계룡소방서 청사 신축공사 설계용역 완료보고회	‘18.10.10.	종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축팀장 김태영 종합건설사업소 건축팀 주무관 임택균
○ 계룡소방서 청사 신축공사 낙찰자 결정 및 계약 체결	‘19.01.11.	자치행정국장 이윤선 운영지원과장 임옥순 계약팀장 이헌희 계약팀 주무관 한성대
○ 계룡소방서 청사 신축공사 착공	‘19.01.25.	종합건설사업소 서무과장 허영 종합건설사업소 계약팀장 이영희 종합건설사업소 계약팀 주무관 임선환