아산소방서 이전 신축사업

- 단계 : 준공 -

소방행정과, 김정균, 041-635-5516

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	충청남도 아산시 모종동 210번지
	인구 수	착공일	준공일
		317,291명(2016.11.30. 기준)	328,566명(2018.04.30. 기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		186명 / 189명	223명 / 213명
	재정자립도	착공일	준공일
		30.8% (2016년 본예산 기준)	31.5% (2018년 본예산 기준)

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도				부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)				비고
	합계	1989				3,241㎡		-			1,825			4
	본청
	의회
	기타	1989				3.241㎡		-			1,825			4
	청사신축 필요성			기존 청사의 노후 및 공간협소, 진출입 장애에 따라 이전을 통해 증가하는 소방수요에 대처하고 질 높은 소방안전서비스 제공
	사업기간			착공 당시				2014년 ~ 2018년(5년)
				준공				2014년 ~ 2018년(5년)
	사업수행방식			설계･시공 분리
	추정(예정)가격(원) (관급자제비 제외)			6,339,945,005					계약금액			5,554,379,770			낙찰율		87.61%
	청사신축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계		2018		6,750㎡					3,650.77㎡			1/3
	본청
	의회
	기타		2018		6,750㎡					3,650.77㎡			1/3

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비			시군구비		지방채
	합계	8,343				8,343
	2014년	300				300
	2015년	-
	2016년	2,400				2,400
	2017년	5,643				5,643
	총사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비							비고
			2014		2015		2016	2017
	1) 토지매입비		-							공유재산교환(도↔시)
	2) 설계비		300
	3) 감리비							127
	4) 공사비						2,400	5,496
	5) 기타부대비							20

향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2013.09.	반영	자체
	기본계획 수립	2013.12.31.	수립	자체	원문 공개
	투융자심사	2014.03.24.	승인	중앙
	공유재산관리계획	2014.10.13.	승인	지방의회
	설계	2015.10.20.~2016.03.16.	완료	자체
	착공	2016.12.06.	착공	자체
	준공	2018.05.19.	준공	자체

2. 공종별 공사비

(부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합계	금액(원)	7,743,239,170
	단위비용(원/㎡)	2,121,180
	점유율(%)	100
건축 토목 기계	금액(원)	5,589,379,930	○ 골조 : 철근콘크리트 ○ 외부 : 아연도패널, 화강석, 목재패널, THK24 로이복층유리, TH115 알루미늄바 등 ○ 내부 : 바닥, 벽, 천정 등 - 바닥 : 화강석물갈기, 데코타일, 에폭시라이닝, 자기질타일 등 - 벽 : 친환경수성페인트, 패브릭 흡음재, 도기질타일 등 - 천정 : PVC천정재, 친환경텍스, 필름 등 ○ 토목 : 토공사, 우수공사, 오수공사, 포장공사, 상수공사등
	단위비용(원/㎡)	1,531,150
	점유율(%)	72.18
전 기	금액(원)	750,834,520	○ 수변전, 전력간선, 전등전열, 케이블 트레이 등
	단위비용(원/㎡)	205,680
	점유율(%)	9.7
통 신	금액(원)	279,404,740	○ 통합배선, TV, 출입통제, 방송설비공사 등
	단위비용(원/㎡)	76,540
	점유율(%)	3.6
소 방	금액(원)	498,229,700	○ 소화설비 : 소화기, 자동확산소화장치, 옥내소화전 ○ 경보설비 : 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 바상방송설비 ○ 피난설비 : 유도등, 비상조명등
	단위비용(원/㎡)	136,490
	점유율(%)	6.43
조 경	금액(원)	625,390,280	○ 파고라, 육생·수생비오톱 등
	단위비용(원/㎡)	171,320
	점유율(%)	8.08