내포신도시 개발사업 월간공정 보고(08월)

《 공공ㆍ기반시설 》                                                (2018. 08. 31. 현재)

공사명	공 사 개 요				공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
							전월	금월	누계 계획
▣ 신도시사업 전체 공정률						‘07.07 ~ ‘20.12	84.0	0.9	84.9 84.9	·충개공 : 100% ·L H : 75.7%
▣ 부지조성		(9,952천㎡)					84.0	0.9	84.9	(8,449천㎡)	면적대비
2-1공구 조성공사(충개공)	․면적 984천㎡				344	’09.05 ~ ’13.11	100	-	100 100	·공사준공	현대 건설
2-2공구 조성공사(충개공)	․면적 889천㎡				424	’10.04 ~ ’13.12	100	-	100 100	(특화2, 근린5호, 병원/복지)	극동 건설
2-3공구 조성공사(충개공)	․면적 1,909천㎡				321	’10.11 ~ ’13.12	100	-	100 100	(보훈공원,단독주택용지, 대학1)	현대 아산
1-1공구 조성공사(LH)	․면적 1,501천㎡				509	’11.08 ~ ’14.10	100	-	100 100	(특화상업용지1, 초등학교2용지 일대)	코오롱 글로벌
1-3공구 조성공사(LH)	․면적 372천㎡				165	’13. 11 ~ ’16. 7	100	-	100 100	(단독주택용지 일대)	명지 건설
3-2공구 조성공사(LH)	․면적 1,182천㎡				318	’12. 1 ~ ’15. 7	100	-	100 100	(유보지 2 일대)	동성 건설
1-2,3-1공구 조성공사(LH)	․면적 3,115천㎡				340	‘16.8 ~ ‘20.5	48.8	3.2	52.0 52.0	(산업 1부지 일대)	지평 토건
▣ 조 경			(4,831천㎡)				84.5	-	84.5	(4,082천㎡)	면적대비
충개공 조경공사	․2구역 1,062천㎡				349	’12.02 ~ ’17.05	100	-	100 100	·공사준공	승화 건설
보훈공원 조성공사(충공)	․면적 51천㎡				29	’15.10 ~ ’16.11	100	-	100 100	·공사준공	서진 산업
LH 1단계 조경공사	․면적 75천㎡				78	’12.10 ~ ’15.12	100	-	100 100	·공사준공	유진건설 원광건설
LH 2단계 조경공사	․면적 2,618천㎡				370	‘14.12 ~ ‘15.12	100	-	100 100	·공사준공	대방 건설
홍예공원 조성공사(LH)	․면적 275천㎡				188	‘14.09 ~ ‘15.12	100	-	100 100	·공사준공	구일종합건설
LH 3단계 조경공사	․면적 750천㎡				(410)	-				-
▣ 전 기			(9,638천㎡)				67.3		67.3	(6,486천㎡)	면적대비
충개공 전기공사	․면적 3,783천㎡				127	’12.02 ~ ’15.02	100	-	100 100	·공사준공	삼흥 전력
LH 1단계 전기공사	․면적 400천㎡				28	’12.09 ~ ’14.06	100	-	100 100	·공사준공	금평 전설
LH 2단계 전기공사	․면적 2,303천㎡				90	‘14.08 ~ ’15.12	100	-	100 100	·공사준공	금원 전설
LH 3-2공구 전기공사	․면적 1,539천㎡				21	‘18.05 ~ ‘20.05	0.2	3.8	4.0 5.3	·공사 준비중	동조 전력
LH 2-1공구 전기공사	․면적 1,613천㎡				(74)	-				-
▣ 기반시설				(6개 사업)	3,769		86.0		87.8	(3,309억원)	금액대비
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일 중 1단계22천톤/일				705	’10.10 ~ ’13.10	100	-	100 100	·유지관리운전 시행	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로22.1㎞				676	’10.10 ~ ’14.01	100	-	100 100	·유지관리운전 시행	포스코 건설
지 구 외 생태하천(1단계)	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞				35	’10.12 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	성보 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km				1,459	’11.07 ~ ’15.06	100	-	100 100	·공사준공	동성 건설
제2진입도로	․예산측 3.39km				425	‘15.10 ~ ‘18.12	88	2	90 91	· 공사중	하남 종합
첨단산업단지 진입도로	․홍성측 3.97km				469	‘18.3 ~ ‘22.2	7	4	11 11	· 공사중	일군 토건