충남 권역재활병원 건립공사 기본 및 실시설계

과  업  지  시  서

2018.   10.

목      차

Ⅰ. 사업개요

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 개요	1

3. 과업의 범위	2

Ⅱ. 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류	3

2. 업무보고 및 회의	5

3. 에너지절약형 건축물 설계	6

4. 보안성 검토	6

5. 설계공모 심사위원 지적사항 반영	7

Ⅲ. 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	7

2. 설계 일반 지침	9

3. 설계진행 시 유의사항	12

4. 설계도서의 분리작성	13

5. 설계도서 표기	14

6. 도면작성	14

Ⅳ. 설계도서 작성요령

1. 공통 사항	15

2. 계획 설계	15

3. 중간 설계	16

4. 실시 설계	21

Ⅴ. 설계도서 납품 목록

1. 계획설계 납품도서	29

2. 중간설계 납품도서	29

3. 실시설계 납품도서	30

Ⅵ. 붙 임

[붙임 1] 책임기술자 선임계	31

[붙임 2] 하도급 승인 요청서	32

[붙임 3] 보안각서	33

[붙임 4] (계획, 중간, 실시)설계 검사원	34

[붙임 5] 주간공정보고	35

[붙임 6] 월간공정보고	36

[붙임 7] 설계공모 지적사항	37

[붙임 8] 재활병원 의료장비 목록	38

Ⅰ. 과업개요

1. 과업의 명칭 : 충남 권역재활병원 건립공사 설계 용역

2. 과업의 개요

가. 대지위치 : 충청남도 아산시 용화동 산39, 45-1, 460-1번지 일원

(아산 용화남산 지구단위계획구역내 사회복지시설용지)

나. 대지면적 : 14,900㎡

나. 연면적: 13,900㎡

라. 건폐율/용적률 : 법정 건폐율/용적률 이하

마. 용    도 : 의료시설 중 병원

바. 공사기간 : 2019년 09월~2020년 12월(예정)

※ 전체연면적(±3%범위)은 설계자의 계획에 의하여 조정 가능하며 50병상             규모의 증축을 고려하여 설계할 것

※ 과업규모는 설계과정에서 충청남도 장애인복지과, 아산시 경로장애인과, 의

료법인 영서의료재단(발주 및 운영기관)과 계약상대자(이하 수급인)가 협의하

여 조정 될 수 있으며, 제반법규 적합여부는 별도 검토하여야 한다.

※ 과업범위의 변경이 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지             않는다.(용역계약 일반조건 등 참조)

사. 예정공사비 : 20,600,000,000원(VAT포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물          처리, 녹색건축/에너지효율등급 본인증, BF인증 수수료(컨설팅비용 포함)

등에 대한 총공사비임(발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수

있음)

아. 설계용역비 : 684,860,000원(VAT포함)

1) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리 등 제반 분야의 기본

및 실시설계 및 관련법에서 정하는 제반 행정절차 이행과 시험 굴착, 지질조

사비용, 측량비용, 손해배상공제료 , 각종 인허가, 설계자문 등 발주기관이 요

구하는 신청 및 보고 자료 등에 관한 용역(수수료)이  포함된 사항임

[인증비 등 포함],

※ 충남권역재활병원 진입도로(길이10m, 폭12m)설계 포함(인허가 제외)

2) 내역서 및 원가계산서 작성 시 낙찰차액을 감안해서는 안 되며 예정공사비         이상의 공사비 발생 시 발주기관과 협의하여 추가공사분량을 분리발주 할 수        있도록 설계도서를 조정한다.

자. 과업기간 : 착수일로부터 240일(공휴일 포함, 건축 인·허가업무 포함)

1) 발주기관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

3. 과업의 범위

※ 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는             수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

가. 본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계로 구성되며, 건축협의 등 각종            인허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의, 실시계획의 인가(설계용역 성과물은        제반 인허가를 득한 성과물이어야 한다.) 및 공사 착공신고, 사용승인신청 등         재활병원 건립 사업이 종료될 때까지의 건축 행위 전반에 관한 인허가 업무협조

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 수급인이 대행하여야 한다.

2) 수급인은 용역착수 후 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련법규 및 규제         사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기            위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야          한다.

3) 본 과업의 지구단위계획변경, 교통영향분석 등 각종 영향평가를 실시할            경우 수급인은 별도 발주 사업에 대한 용역사와 협의하여 발주기관 업무에          적극 협조하여야 한다.

4) 수급인은 향후 사용승인 신청시 준공도서 작성 협조, 인장날인 등 발주기관의        업무에 적극 협조하여야 한다.

5) 수급인은 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류         보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

나. 녹색건축 일반등급 예비인증 취득 및 본인증 취득업무에 대한 협조

다. 에너지효율 1등급 예비인증 취득 및 본인증 취득업무에 대한 협조

라. 장애물 없는 생활환경 예비인증 취득 및 본인증 취득업무에 대한 협조

마. 설계와 관련한 각종 용역진행에 대한 업무협조(회의참석, 자료제출, 용역결과

의 설계 반영 등)

바. 지적현황측량(3급 기준점 측량, 수준측량, 지형현황측량, 경계측량) 결과서          작성, 제출

사. 지질조사(NX 3공, 탄성파 2공), 표준관입시험, 다운홀 테스트 및 결과서            작성, 제출

아. 건축물 유지관리에 관한 내용 작성, 제출 및 기타 기술(설계) 용역을               수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한         이행 및 보고서 작성, 제출

자. 공사 발주와 관련, 발주 공종별 현장설명서 작성 및 적정 공사기간(공사            예정 공정표 포함) 산출

차. 지열 설계를 위한 시험천공, 열전도 테스트 결과 및 지열이용 검토서 작성, 제출

카. 충남권역재활병원 진입도로(길이10m, 폭12m)설계 포함(인허가 제외)

타. 설계공모 시 심사위원이 작성한 당선안에 대한 보완 및 지적사항을 설계 시        반영하고 조치결과 보고를 제출한다. [붙임7 참조]

파. 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과        수급인의 협의 하에 수행한다.

Ⅱ. 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 용역착수 시에 다음 서류 2SET를 제출한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계 1부 [붙임 1]

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부(공동응모로 당선되어 계약한 수급인의 경우 공동응모자        상호간 업무범위와 책임한계를 명시한 수행계획 포함)

5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자         명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

8) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일이내 제출) 현황 1부 [붙임 2]

9 인력, 장비투입 예정현황 1부

10) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함) [붙임 3]

11) 당선작 지적사항 설계반영 계획서 1부(계획, 중간, 실시설계 단계로 구분)

12) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

13) 위 모든 서류가 담긴 CD 1set

나. 수급인은 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위            ‘가’호로 승인된 착수회의 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정          장소에서 설명하여야 한다.

다. 계획설계도서 납품

1) 계획설계 검사원 [붙임 4]

2) 계획설계 도서

※ 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 관련법규 검토서

4) 현장조사 결과보고서

5) 유사시설 견학보고서

6) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

라. 중간설계도서 납품

1) 중간설계 검사원 [붙임 4]

2) 중간설계도서 일체(세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조)

가) 개략공사비 내역서

나) 공종별 설계도면

다) 공사시방서(초안)

라) 구조계산서 등 계산서, 물량산출서

마) 관련서류를 포함한 CD

3) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

4) 녹색건축 인증 취득 관련 검토서 및 자료

5) 건축물 에너지효율 1등급 취득 관련 검토서 및 자료

6) 장애물 없는 생활환경 인증 취득 관련 검토서 및 자료

7) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

마. 실시설계도서 납품

1) 실시설계 검사원 [붙임 4]

2) 실시설계도서 일체(세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조)

가) 설계설명서 검토(분야별)

나) 인허가용 설계도서

다) 실시설계도면

라) 발주용 내역서(공내역서 포함)

마) 공사시방서

바) 각종 계산서

사) 수량산출서

아) 단가산출서, 견적서

자) 관련서류를 포함한 CD

4) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

5) 종결보고서

6) 건축허가서(에너지절약계획서, 신재생에너지설비 설치계획서 등 제반 인허가         증빙자료를 포함한다)

7) 설계검사원

8) 녹색건축 예비인증서

9) 건축물 에너지효율 예비인증서

10) 장애물없는 생활환경 인증서

11) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

바. 기타 서류

1) 용역의 진도보고

가) 주간공정보고 [붙임 5]

나) 월간공정보고 [붙임 6]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2. 업무보고 및 회의

※ 수급인은 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

가. 업무보고

1) 주간공정보고

- 매주 수요일에 붙임 양식에 의거 제출한다.

2) 월간공정보고

- 매월 27일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에         의거 제출한다.

3) 수시보고

- 설계용역 진행시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시            마다 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는          경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인              공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을            협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

다) 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구 사항에          대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를          협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의             진행계획을 설명하여야 한다.

3) 중간설계 보고회

가) 수급인은 중간설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과              사전 협의를 거친 후 중간설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련               내용을 협의하여야 한다.

4) 수시회의

가) 설계진행 시 문제점이 발생하거나 설계 보고시 보고에 필요한 자료를 작

성․배부하여야 한다.

5) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의           를 개최할 수 있으며, 이 때 수급인은 발주기관의 요청에 의거 해당 검토

서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수            있다.

6) 업무보고 및 회의내용의 기록

가) 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의             서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 에너지절약형 건축물 설계

가. 관련 규정

1)『건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부고시 제2015-1108호)』

2)『건축물 에너지효율등급 인증 기준(국토교통부고시 제2015-1019호)』

3)『녹색건축 인증 기준(국토교통부고시 제2014-705호)』

4) 기타 에너지 관련 제반 규정

나.『건축물의 에너지절약 설계기준』에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 에너지       관리공단과 에너지절약 사전협의 실시

다. 건축물 에너지효율 1등급 및 녹색건축 예비인증을 취득하여야하며, 취득에        필요한 수수료 및 기타비용(컨설팅비용 등)은 수급인이 부담한다.

4. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을         개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계제출시 설계참여 관련자 전원          보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는            안 된다.

3) 폐기물은 소각 처리하고, 소각대장은 제출해야 한다.

4) 수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은        수급인에게 있다.

5. 설계공모 심사위원 지적사항 반영

가. 수급인은 설계공모 심사 시 심사위원의 보완사항 및 지적사항이 설계에            반영될 수 있도록 한다.

나. 설계공모 심사위원 보완사항 및 지적사항에 대해 설계단계별(계획, 중간,           실시)로 어떻게 반영할 것인지 계획서를 작성하여 착수 시 보고한다.

다. 계획, 중간, 실시설계단계에 설계도서 납품 시에 조치결과 보고서를 필히           첨부한다.

Ⅲ. 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업의 수행 시 아래의 내용을 참고하여 당해 사업과 관련된 각종 법령·        고시·지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

○ 건축법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 건축사법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

○ 건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙

○ 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

○ 건설기술진흥법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 다중이용시설 등의 실내공기질관리법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 건설산업기본법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 산업안전보건법․동법 시행령․동법 시행규칙, 산업안전기준에 관한 규칙

○ 소방기본법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 소방시설공사업법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 화재예방, 소방시설설치․유지 및 안전관리에 관한 법률․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 수도법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 하수도법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 주차장법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 고압가스 안전관리법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 에너지법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 에너지이용 합리화법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 건축물의 에너지절약 설계기준 (국토교통부고시 2015-1108호, 2015.12.31)

○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 도로법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 대기환경보전법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 소음․진동관리법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 공중화장실 등에 관한 법률․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 문화예술진흥법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 전기공사업법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 전기사업법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 전력기술관리법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 전기용품안전관리법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 전기통신기본법․동법 시행령

○ 정보통신공사업법․동법 시행령 및 기타 통신관련 법률․고시

○ 전파법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 산업표준화법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 폐기물관리법․동법 시행령․동법 시행규칙

○ 건축공사 표준시방서

○ 가설공사 표준시방서

○ 건설환경관리 표준시방서

○ 건축기계설비공사 표준시방서

○ 건축전기설비공사 표준시방서

○ 상수도공사 표준시방서

○ 조경공사 표준시방서

○ 콘크리트 표준시방서

○ 토목공사 일반표준시방서

○ 건축구조 설계기준

○ 건축기계설비 설계기준

○ 건축전기설비 설계기준

○ 건축물 내부 마감재료의 불연․준불연․난연 성능기준

○ 구조물기초 설계기준

○ 상수도 시설기준

○ 조경설계기준

○ 콘크리트구조 설계기준

○ 하수도 시설기준

○ 건설공사표준품셈

○ KS(㉿), 큐(Q)마크 등 규격 제품

○ 기타 관련 법규 및 충청남도 및 아산시 조례 등

○ 기타 공공부문 건설공사와 관련되거나 위 법령 및 제 기준 등과 관련된         고시․공고․훈령․예규․지침 및 제반 기준 등

※ 납품일 이전에 관계법규 및 제 규정 등의 내용이 변경된 경우에는 변경된           내용에 따라야 한다.

나. 수급인은 본 과업지시서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한           경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를        위반 시 『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』제14장 용역계약 일반조건          제7절“1-가”에 의거 지연배상금 납부 조치를 하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의        상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로        인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야        하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지         수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에        애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조        자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를          제기할 수 없다.

2. 설계 일반 지침

가. 납품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계도서 납품으로 구분하여 납품한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서           제출 등) 하여야 한다.

다. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등        발주기관의 요구에 응해야 한다.

라. 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약         이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의            하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마.『건축법 시행령』제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 『건축물의 설비           기준 등에 관한 규칙』제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의거 수급자는           본 과업의 이행시 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 안정성과 조형미를 살리면서 권역재활병원으로서 상징성이 부각되도록

설계하며, 주변건물과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

2) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적        관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

3) 본 사업부지 주변현황을 고려하여 안정성 있고 조화롭게 설계 하여야 한다.

4) 구내도로, 공동구, PIT 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영         하여야 한다.

5) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의        크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인        설계가 되어야 한다.

사. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로        쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영

2) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)        을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

3) 공동구, PIT 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과        미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

아. 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한        대책을 수립하여 설계하여야 한다.

1) 전기 및 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용한다.

2) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용한다.

자. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1)『공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정』,『건축물의 에너지절약           설계기준』등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다.

2) 창호, 내․외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형        구조로 설계하여야 한다.

3) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템으로 설계하여야        한다.

4) 신재생에너지 설비 설계시 『신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법』        제12조 제2항을 적용하여 설계하여야 한다.

5) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물        용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

6) 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

차. 환경 친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무환경 조성

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은         환경 친화적으로 설계

3) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기

물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

※『소음․진동관리법』제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진 시설의          설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

카. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계, 범죄예방 환경설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을          고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고,        방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

타. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태          (실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축          및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

3) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

파. 향후 증축대비 설계(운영기관과 사전 협의 필요) : 향후 시설의 증축계획을         고려하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계           하중, Expansion Joint 등)을 수립․반영하여야 한다.

하. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경 친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서        발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재사용

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에        반영하여야 한다.

5) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

거. 하도급의 범위

1) 수급인은 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 기계설비, 전기․정보통신, 인테리어, 부대토목, 구조, 조경 등의 설계업무

라) 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

마) 건설공사의 수량 및 견적업무

바) 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

3) 수급인은 하도급하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급할        수 있으며, 수급인은 하도급된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

3. 설계진행 시 유의사항

가. 지질조사는 사전에 위치 선정 등 지질조사 계획서를 발주기관 담당자에게          제출하여 승인 후 지질조사를 시행한다. (지질조사 후 결과보고서 제출)

나. 설계 완료 후 착공 시 시공사가 시행한 시험터파기에 의거 기초구조 및 가설공법에        대한 설계변경 사항이 발생할 경우 설계자는 이에 대하여 검토하여야 하며,         발주기관이 설계변경의 타당성을 인정한 경우 변경사항에 대한 재설계 및           제반사항을 이행하여야 한다. 또한, 공사 착공 후 지질조사 분석/보고서의 오류로        설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에         막대한 지장 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성,        경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을        숙지하고, 철저히 지질조사, 분석하여야 한다.

다. 수급인은 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야        하고, 지하매설물 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영하여야 하며,           조사항목은 다음과 같다.

- 공공시설물, 전기/통신/상․하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

라. 수급인은 기초공법(지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시        지질조사사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변          구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

마. 수급인은 사업 대상 부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를          작성하여 설계하여야 한다.

바. 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록          설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에        반영하여야 한다.

사. T.B.M(가수준점)을 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실        또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

아. 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간         및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지         방지대책으로 세륜세차시설 설치 등을 검토/반영하여야 한다.

자. 수급인은『건설현장 축중기 설치지침 (국토교통부 훈령 제553호)』에 의거          축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

- 축중기 의무 설치 대상현장 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인                                      건설공사

- 10,000㎥ 이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 축중기를            설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

차. 수급인은 신․재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 에너지 사용        계획서를 작성하여 에너지관리공단과 사전협의/승인을 받아야 하며, 사전협의        결과서를 제출하여야 한다. 또한 관련 규정 등에 따라 신․재생에너지로 지열         설계 시 시험천공을 실시하고, 열전도 테스트 결과 및 지열이용 검토서를 작성        하여 제출하여야 한다.

카. 수급인은 인테리어 설계에 대해 계획/중간/실시설계 단계별로 발주기관에서         보고회를 개최하고 승인을 받아야 한다.

타. 수급인은 [붙임 8]에 제시된 재활병원 의료장비 목록을 참고하여 운영기관 및        발주기관과 협의 후 시설물 및 장치 설치를 설계도서에 반영하여야 하며,           전기/통신 및 기계설비 설계 시에도 장비용량이나 부하용량 등을 산정하여 설계        도서에 반영하여야 한다. 또한 대형 의료장비 설치 및 보수를 위한 개구부 계

획을 충분히 고려하여야 한다.

파. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

하. 본 사업과 관련 특별히 고려하고, 주의해야 할 사항과 발주기관의 요구사항에        대해 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다. 또한 치료시설, 프로그램실        등은 운영기관인 영서의료재단의 요구를 최대한 반영하여 설계한다.

4. 설계도서의 분리작성

가. 건축, 토목, 조경, 기계설비/기계소방/가스, 전기설비/전기소방, 통신 등 공종별로        분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표,        수량산출서 등) 단, 발주단위에 대하여는 작성 전 발주기관과 필히 협의하여        결정하여야 한다.

5. 설계도서 표기

가. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M

7) 기계소방도면 : MF

8) 가스도면 : G

9) 전기도면 : E

10) 전기소방도면 : EF

11) 통신도면 : T

6. 도면작성

가. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한        축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

다. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여        기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및        시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 토목, 조경 ,기계설비, 전기, 통신, 소방 등 관련 공사와 관련하여 명확한        구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서

등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

Ⅳ. 설계도서 작성요령

1. 공통사항

가. 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여

야 한다.

2. 계획설계

가. 정의

“계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을             참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를       정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및        연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이       검토된 계획안을 발주기관에 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 수급인은 건축설계공모 시 심사위원이 작성한 당선안에 대한 보완 및 지적사

항을 계획설계 시 반영하고 발주기관의 승인을 득한다.

2) 수급인은 계획설계 기간 중에 지적현황측량 및 지반조사를 실시하여 기초구조

를 확정하고 지하 터파기 공법 등에 대한 대안을 제시하여 발주기관의 승인

을 득한 후 추후 설계 및 공사진행 시 변동사항이 최소화 될 수 있도록 한다.

다. 계획설계(안) 작성시 포함사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요,        동선계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수․폐수 처리계획

5) 설계공모 당선안에 대해 보완 및 지적사항이 반영된 평면도, 입면도 및 단면도

6) 조경계획

7) 전기, 통신, 기계, 소방 설비계획 개요 및 적용시스템 비교검토

8) 유사시설 견학보고서(기존 유사건물 조사 분석 자료 등)

9) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항

라. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠             수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지          이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한          사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지           내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징          등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을              촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야          한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원          요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시          기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 조사하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로          작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

3. 중간설계

가. 정의

“중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”          라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의         변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관         분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계         도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 과업지시서 및 수정․보완 지시서에 따라         작성한다.

2) 중간설계 단계에서 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로        작성되어야 한다.

3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계         기준을 제시하여야 한다.

4) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등         구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

5) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조, 의료가스실, 화학폐수장, 공조실 등)        시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차                    면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패                        사례를 조사·분석·검토 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황                          등 사전조사 시 조사내용 표기

- 공사비 산정

※ 공종별 내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계

선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물                   의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는                       사항 (축척 : 1/200정도)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면                                이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 시공방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서

- 수리계산서

다) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

라) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 설비 개략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한            중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의                   지침을 받아 작성)

다) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기

계실 위치, 화학폐수장, 공조실 등

- 계통도 : 공조, 위생, 의료가스, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․

난방 배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 옥탑층 등 장비류 설치에 따른 구조계획 건축협의사항, 기계장비 동력 확보          관련 등 전기협의사항

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면(TAB, 진공청소설비, 주방설비, 도시가스,          방음․방진설비, 자동제어 등)

5) 전기

가) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도          등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 부하계산서(설계 시 산출근거 제출)

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명                       한다. 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호                          등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도

- 도면목록

- 범례 및 특기사항

- 상세도(조명기구 등)

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전                      지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비

와의 연결방법 표시

- 수변전설비 : 수변전설비 단선결선도 및 평면도

- 계통토 : 간선, 동력 등 계통도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에                         대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치,          결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명                       한다. 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호                          등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및                        경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결                       방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의                              계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

7) 소방

가) 설계 설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소화,경보,피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재            발견시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을          설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 수원의양, 소화펌프용량 계산서

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명                       한다. 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호                          등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 옥외배치도 : 각 건축물, 시설물의 배치 및 위치 평면도에 따른  소방설비 옥외                      배치도

- 설비의 계통도 : 소화(가스소화포함), 자동화재탐지설비, 유도등, 비상콘센트

- 설비의 배치도 : 소화, 경보, 피난, 소화활동설비

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

4. 실시설계

가. 정의

-“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한         설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감,         색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계         관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를         확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라          작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게          산정하여야 한다. 또한, 공사비 기준이 되는 단가조사서 작성시 견적서 제출        품목에 대해서는 3개사 이상의 견적서를 첨부한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산

서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주기관이 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주기관과 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차                    면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등                        사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 유채색 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선

에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부

수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에

필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 에너지절약계획서 작성시 제출한 형별 성능관계내역서

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도 또는 평면상세도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천장평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 계단 평․단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채사용계획 도면

- 장애인 편의시설 설치계획도서

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척:1/50정도)를 작성하여야 한다.

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 시방서

라) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기           투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 덕트 계산서, 관경 계산서                         (위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도, 열원 흐름도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 의료가스, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 공조실 평면도, 정화조평면도

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5) 전기

가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 기타 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도         등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이         및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.                      단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로                         표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법,                      주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과                      특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 상세도(조명기구 등)

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격                        설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도                         및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표                         (분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에                        대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도         등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.                      단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로                         표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법,                      주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과                      특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및                        경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결                       방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의                              계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV                                등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

7) 소방

가) 설계설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소화,경보,피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재           발견시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을         설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

- 제연설비풍량계산서, 소화수원량 산출서

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.                      단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로                         표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법,                      주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과                      특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

- 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

- 각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

Ⅴ. 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획설계 도면	A3	2	부	조감도 또는 투시도 포함, 반접이
2	현장조사보고서	A4	2	부	유사시설견학보고서 포함
3	관련법규 검토서	A4	2	부

※ 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	중간설계 도면	A3	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리 반접이
3	개략 내역서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공사비
4	각종 계산서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	일반시방 특기시방
6	녹색건축 인증 관련 검토서	A4	2	부
7	에너지효율 인증 관련 검토서	A4	2	부
8	장애물없는 생활환경 인증 관련 검토서	A4	2	부

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

※ 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계도면	A1	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	백도, 반접이
3	설계도면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
4	각종 계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	일위대가, 단가산출서포함
6	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	조감도	A1	5	부	◯							표구 포함
9	공사예정공정표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
10	CD-ROM		5	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
11	녹색건축 예비인증서	A4	1	부
12	에너지효율 예비인증서	A4	1	부
13	장애물없는 생활환경 예비인증서	A4	1	부
14	기타 발주기관 요구사항

※ 발주기관의 필요에 따라 추가제출 요청시 이에 응하여야 한다.

나. 종결보고서

- 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의         진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치         결과, 건축자재의 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서,         납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고         왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 공사량에 맞게 정확

하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은  1부(A4 규격)를 내역서에 포함하여

제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다.

[붙임 1]

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :『충남 권역재활병원 건립공사』 설계용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 201 .   .   .

4. 착수  일자 : 201 .   .   .

5. 완수예정일 : 201 .   .   .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

201 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

의료법인 영서의료재단 이사장 귀하

[붙임 2]

하도급 승인 요청서

1. 용  역  명 :『충남 권역재활병원 건립공사』 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 201 .   .   .

4. 착수  일자 : 201 .   .   .

5. 완수예정일 : 201 .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역(설계)계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

201 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

의료법인 영서의료재단 이사장 귀하

[붙임 3]

보 안 각 서

1. 용  역  명 :『충남 권역재활병원 건립공사』 설계용역

2. 계약  일자 : 201 .   .   .

3. 착수  일자 : 201 .   .   .

4. 완수예정일 : 201 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며   그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역(설계)계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

201 년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

의료법인 영서의료재단 이사장 귀하

[붙임 4]

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용  역  명 :『충남 권역재활병원 건립공사』 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 201 .   .   .

4. 착수  일자 : 201 .   .   .

5. 완수예정일 : 201 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

201 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

의료법인 영서의료재단 이사장 귀하

[붙임 5]

주간 공정 보고

1. 용  역  명 :『충남 권역재활병원 건립공사』 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 201 .   .   .

4. 착수  일자 : 201 .   .   .

5. 완수예정일 : 201 .   .   .

6. 용역진행사항

구 분	금주진행사항(201 . . .)	차주예정사항(201 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

의료법인 영서의료재단 이사장 귀하

[붙임 6]

월간 공정 보고

1. 용  역  명 :『충남 권역재활병원 건립공사』 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 201 .   .   .

4. 착수  일자 : 201 .   .   .

5. 완수예정일 : 201 .   .   .

6. 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (201 . . . ～ 201 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

의료법인 영서의료재단 이사장 귀하

[붙임 7]

설계 제안공모 지적사항

“설계공모 심의 완료 후 추가”

[붙임 8]

재활병원 의료장비 목록

가. 재활치료

1) 물리치료

가) 열전기 치료기                                       (단위 : 점)

장 비 명	수 량
- 온습포	30
- 적외선 치료기	20
- 초음파 치료기	6
- 간섭파 치료기	15
- 경피신경자극 치료기	10
- 파라핀욕 치료기	4
- 경추견인기, 골반견인기	2
- 전기자극치료기	4
- 레이져치료기	2
- 공기압치료기	2
계	95

나) 수치료 장비                                          (단위 : 점)

장 비 명	수 량
- 회전욕조(Whirl pool bath)	2
- 풀치료기(Pool therapy)	1
계	3

다) 운동치료 장비                                        (단위 : 점)

장 비 명	수 량
- 기능적 전기자극치료기	18
- 상지 에르고미터	15
- 하지 에르고미터	15
- Exercise skate	6
- 어깨사다리, 어깨회전기	2
- 치료용Roll	4
- 등속성운동기기	2
- 치료용 계단	2
- 치료용매트	9
- 치료용 볼	3
- 평행봉(P-bar)	4
- 보바스테이블	24
- 전동기립 훈련기(경사대)	6
- 스탠딩 테이블	8
- 재활치료용 트레드 밀	6
- 체중 탈부하 보행기	6
계	130

2) 작업 치료                                                (단위 :점)

장 비 명	수 량
- 편측 시각 무지 평가도구	1
- Hand dynamometer	2
- Jebsen 손기능 평가도구	2
- pinch gauge, pegboard	30
- two point discriminator	6
- 손가락 운동판	30
- 인지기능훈련기	3
- 작업치료 평가도구(손가락 기민성 테스트기)	2
- 기타 일상생활 동작연기구(세면기, 좌변기 등)	1
- 식사연습기구	3
- 연하재활 기능적 전기자극치료기	6
- 전산화인지재활 치료기기	2
계	88

나. 검사 및 진단                                             (단위 :점)

장 비 명	수 량
- 방사선촬영(일반촬영)	1
- 임상검사실(채혈/체뇨, 미생물검사 등)	1
- 초음파	1
- 심전도	1
- 연하장애검사	1
- 골밀도	1
- 근전도검사(신경전도검사, 침근전도검사)	1
- 언어치료 및 인지치료 평가도구	1
- 요류동태검사	1
- 폐기능검사	1
- 보행분석 검사	1
- 운동유발전위 검사(MEP)	1
- 체성감각유발전위검사(SEP)	1
계	13

다. 병원운영 장비                                        (단위 : 점, 식)

장 비 명		수 량
병실용	- Ventilator	2
	- Patient Monitor with oximeter	10
	- 환자용 Bed	150
	- 기타(환자용 냉장고, 환자용 가구 등)	150
간호사실	- 심전도 및 Defibrillator, CPR Set	2
	- 환자이동장비	4
	- 휠체어	30
	- 환자 목욕침대	4
	- 병동기본기기(처치실Set, 기타장비 등)	2
전산장비	- OCS, EMR (소프트웨어)	1
	- OCS, EMR (하드웨어)	1
	- OCS, EMR (DB)	1
	- PC Set(프로그램 및 라이센스 포함)	100
	- PACS	1
	- 하드웨어(서버구축 랜선 제반비용 등)	1식
	- 기타 프로그램(보안프로그램 등)	1식
차량운반구	- 엠뷸런스(그렌드 스타렉스)	1
	- 업무용 차량(그렌드 스타렉스)	1
	- 출·퇴근용 버스(45인승)	1
기타 장비	- 영양실 장비	1식
	- 보안시스템(CCTV 등)	1식
	- 집기류(책상, 의자, 책장 등)	1식
	- 냉·난방 시스템	1식
	- 회의 시스템(회의실, 대강당 등)	1식
계(24종)		461

≪추가 재활치료 장비≫                                     (단위 : 점)

장 비 명		수 량	금액
측정장비	- 동작분석시스템	1
	- 요추 및 경추 근력 측정 및 운동처방 시스템	1
운동치료장비	- 슬링 시스템 ＋ 파워슬링	20
	- FTS(기능훈련시스템)	2
	- GTS(워킹레일시스템)	1
	- 무중력보행 훈련기(AGT)	1
	- 셔틀 운동시스템	1
로봇치료기 (보행훈련장비)	- Lokomat(하지) * 성인	1
	- Lokomat(하지) * 소아	1
	- 로봇치료기(상지)	1
	- Training Methods	4
특수치료장비	- 척추 심부근 및 협응 능력 강화 훈련 시스템	1
	- 고강도 레이저 치료기(체외충격파 겸용)	1
	- 3D감압치료기	1
	- Pain Scrambuler	1
	- Magnetic Stimulator	2
	- RF Electrocoagulator	2
	- Electrical Stimulator	10
작업/언어치료	- 로봇 인지재활 치료 시스템	2
	- 언어치료 시스템	5
소아치료	- 물리/운동치료System	1
	- 작업치료	1
	- 언어치료	1
	- 호흡치료	1
	- 인지치료	1
계(25종)		64