정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

충청남도 미래산업국

미래성장과 연구개발특구팀

②담당자

(연락처)

조용준

041) 635-3956

③정책사업명

(2018-44) 천안아산 KTX역세권 R&D집적지구 조성

④선정기준

주요 도정 현안

⑤사업기간

2017~2024

⑥주요내용

❍ 위    치 : 천안시 서북구 불당동・아산시 탕정면 일원(65만㎡)

❍ 사 업 비 : 3,822억원(국비 501, 도비 1,864, 시군비 1,457)

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2024년

❍ 사업내용 : 부지조성, 공공기관 조성, 특구지정, 관리주체 설립,

지원제도 마련 등 R&D집적지구 조성을 위한 8개 과제 추진

- 과제별･연차별 계획에 따라 사업 추진 중

(1) 부지 조성      (2) 지식산업센터 건립    (3) 컨벤션센터 건립

(4) 제조기술융합센터 설립           (5) 국책연구기관 분원 유치

(6) 연구개발특구 지정               (7) 충남과학기술진흥원 설립

(8) 4차산업혁명 연구소 및 기업 유치방안 마련

<< 추진현황 및 계획 >>

❍ 부지 조성 : 관계기관 협약 체결(도-천안-아산- LH, '18. 2. 26.)

- 천안시 6만㎡ 매입 중('18년 ~ '24년), 아산시 계획 수립 중

❍ 지식산업센터 : 설계공모('19. 1 ~ 4), 설계 완료('19. 5 ~ '20. 3)

-  건립 공사 착공('20.7월) → 준공('21.12월)

❍ 컨벤션센터 건립 : 산업부(전시산업발전協) 심의 통과('19. 3)

- 행안부(LIMAC, 지방투자사업관리센터) 타당성 조사('19. 3 ~ 12)

- 행안부 지방재정투자심사 통과('20.4) → 설계공모('20.하반기)

→ 기본 및 실시설계('21) → 착공('22) → 준공('23)

❍ 강소연구개발특구 지정('20. 8.)

- 세부 시행계획 작성('20. 11.~'21. 2.)

❍ 과학기술진흥원 개원('21.2)

❍ 제조기술융합센터 : '20.국비(14억원) 확보, 세부계획 논의 중

❍ 연구소･기업 유치 : 강소특구 지정 연계, 홍보･유치 계획 수립 추진