충남도청(내포)신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 06. 23일 현재)

공사명	공사 개요	공사비 (억원)	사업기간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계
도청및의회청사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	44.4%	0.4%	44.8%	․철골공사 및 외부 마감공사 추진 ․기계, 소방, 공사 추진	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	330	’09.5 ~ ’13.5	61.3%	1.3%	62.6%	․대로 2-8 동상방지층 포설 및 이주자택지 관로공사 추진	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	425	’10.4 ~ ’13.10	28.6%	0.4%	29.0%	․신경2~4, 자경1교 구조물공사 ․신경천, 상아천 축제공사	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	13.9%	1.5%	15.4%	․3BL-1, 2, 18 토사 절취 및 부지정지 ․신경 1,5교 구조물공사	현대 아산
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	360	’10.7 ~ ’12.7	27.1%	3.6%	30.7%	․토공 터파기 및 상차 ․BL 15, 27~30 버림 콘크리트 타설	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44,000㎡/일	663	’10.10 ~ ’13.1	16.8%	0.6%	17.4%	․전처리시설 벽체철근 조립 ․재이용시설구간 기초 철근조립 및 거푸집 설치	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13.1	10.1%	0.5%	10.6%	․기초 버림Con'c 타설 ․중로 1-11 이송관로 터파기 및 부설	포스코 건설
배수지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	38.2%	1.4%	39.6%	․계단실 좌측 슬래브 거푸집 설치	태성 건설
지장물철거	․폐기물처리, 수목이식 등	136	’09.6 ~ ’11.10	71.1%	0.3%	71.4%	․폐콘크리트 반출 ․소각폐기물 반출	주민생계조합
생태하천	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	6.4%	1.4%	7.8%	․신경1, 2보 낙차보 터파기 및 기초Con'c 타설	구일종합건설
농업용수로 대체시설	․연장 8.6㎞ ․양수장 2개소	123	’09.12 ~ ’11.6	99.8%	0%	99.8%	․기타 보완작업 추진	농어촌 공사

공사명	공사 개요	공사비 (억원)	사업기간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상7층	477	’11.4 ~ ’12.12	1.85%	0.01%	1.86%	․터파기공사	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상7층	139	’11.5 ~ ’13.09	0.75%	0.4%	1.15%	․터파기공사	장위 건설
롯데캐슬 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11.1 ~ ’12.12	15.8%	1.1%	16.9%	․지하층 골조공사	롯데 건설