충남도청(내포)신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 07. 14일 현재)

공사명	공사 개요	공사비 (억원)	사업기간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계
도청및의회청사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	45.60%	0.30%	45.90%	․기계, 소방공사 추진	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	330	’09.5 ~ ’13.5	64.10%	0%	64.10%	․우천으로 인한 작업 대기 및 배수로 정비	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	425	’10.4 ~ ’13.10	29.17%	0%	29.17%	․우천으로 인한 작업 대기 및 배수로 정비	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	16.20%	0%	16.20%	․우천으로 인한 작업 대기 및 배수로 정비	현대 아산
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	360	’10.7 ~ ’12.7	33.60%	0.30%	33.90%	․BL18 구체 콘크리트 타설	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44,000㎡/일	663	’10.10 ~ ’13.1	18.50%	0.80%	19.30%	․전처리시설 벽체철근 조립 및 거푸집 설치	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13.1	11.40%	0.40%	11.80%	․제 1집하장 기초철근 조립 및 거푸집 설치	포스코 건설
배수지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	42.10%	0.90%	43.00%	․배수지 좌측 슬래브 철근조립	태성 건설
지장물철거	․폐기물처리, 수목이식 등	136	’09.6 ~ ’11.10	71.40%	0%	71.40%	․우천으로 인한 작업 대기 및 배수로 정비	주민생계조합
생태하천	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	7.80%	0%	7.80%	․우천으로 인한 작업 대기 및 배수로 정비	구일종합건설
농업용수로 대체시설	․연장 8.6㎞ ․양수장 2개소	123	’09.12 ~ ’11.8	99.80%	0%	99.80%	․기타 보완작업 추진	농어촌 공사
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상7층	477	’11.4 ~ ’12.12	1.86%	0.02%	1.88%	․우천으로 인한 작업 대기 및 배수로 정비	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상7층	344	’11.5 ~ ’13.09	1.88%	0.03%	1.91%	․우천으로 인한 작업 대기 및 배수로 정비	장위 건설
롯데캐슬 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11.1 ~ ’12.12	18.50%	0.50%	19.00%	․지하층 골조공사 ․각 동1~3층 골조공사	롯데 건설

공사명	공사 개요	공사비 (억원)	사업기간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계
진입도로 개설공사 (8.43km)	홍성: 4. 43km	1,230	’09.6 ~ ’13.6			-	․감정평가금액 개인통보	동설 건설
	예산: 4.0km					-	․보상계획공고 (7. 9 ~ 23)
지방도(609호) 연결도로 확포장공사 (1.02km)	홍성: 0.67km	126	’09.9 ~ ’12.12			-	․보상율 70%	명보 개발
	예산: 0.35km					-	․보상율 55%
LH사무소 건립공사	연면적:1,200㎡ 지상 2층	15	’11.6 ~ ’11.9	5	-	5	․우천으로 인한 작업대기 ․기초 Con'c 타설	아름 종합