충남도청(내포)신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 08. 25일 현재)

공사명	공사 개요	공사비 (억원)	사업기간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계
도청및의회청사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	49.7%	1.1%	50.8%	․각동 내부 조적, 미장, 방수, 전기입선 등	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	330	’09.5 ~ ’13.5	65.9%	2.1%	67.7%	․대로 2-11 우수 관로 부설(226m)	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	425	’10.4 ~ ’13.10	30.8%	1.3%	32.1%	․신경2교 교대 2단 벽체 Con'c 타설	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	17.3%	0.8%	18.1%	․신경5교 교대 2단 벽체 거푸집 조립	현대 아산
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	360	’10.7 ~ ’12.7	38.5%	0.5%	39.0%	․BL27 기초 Con'c 타설(925㎥)	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44,000㎡/일	663	’10.10 ~ ’13.1	23.6%	0.7%	24.3%	․전처리시설 중간 슬라브 동바리 설치	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13.1	12.9%	0%	12.9%	․1집하장 지하 2층 벽체 철근조립	포스코 건설
배수지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	49.2%	2.5%	51.7%	․계단실 중앙 1층 슬라브 철근조립	태성 건설
지장물철거	․폐기물처리, 수목이식 등	136	’09.6 ~ ’11.10	71.4%	0.1%	71.5%	․폐기물 반출을 위한 사전준비	주민생계조합
생태하천	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	7.8%	0.1%	7.9%	․지장물 조사 및 보상공고 준비	구일종합건설
농업용수로 대체시설	․연장 8.6㎞ ․양수장 2개소	123	’09.12 ~ ’11.8	99.8%	0%	99.8%	․준공관련 서류 검토	농어촌 공사
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상7층	477	’11.4 ~ ’12.12	1.40%	0%	1.40%	․토공작업 준비	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상7층	344	’11.5 ~ ’13.09	1.18%	0.03%	1.21%	․토공작업 준비	장위 건설
롯데캐슬 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11.1 ~ ’12.12	23.2%	0.8%	24.0%	․지하층 골조공사 ․각 동1~4층 골조공사	롯데 건설

공사명	공사 개요	공사비 (억원)	사업기간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계
진입도로 개설공사 (8.43km)	홍성: 4. 43km	1,230	’09.6 ~ ’13.6			-	․협의취득 197건/60억원(33%)	동성 건설
	예산: 4.0km					-	․감정평가 실시 (8.31~9.2)
지방도(609호) 연결도로 확포장공사 (1.02km)	홍성: 0.67km	126	’09.9 ~ ’12.12			-	․보상율 75% ․구조물(2련박스) 벽체 Con'c 타설	명보 개발
	예산: 0.35km					-	․보상율 76% ․벌개제근
LH사무소 건립공사	연면적:1,200㎡ 지상 2층	15	’11.6 ~ ’11.9	40	5	45	․지붕 및 벽체 판넬 시공	아름 종합
LH 1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11.8 ~ ’14.7	-	-	-	․현장사무실 축조 준비 - 1-1공구 고등학교 부지	코오롱 건설