내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 11. 03일 현재)

공사명	공사 개요	공사비 (억원)	사업기간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	58.7%	1.3%	60.0% 62.2%	․각동 내부 조적, 미장, 방수, 전기입선 등	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	74.2%	1.0%	75.2% 76.6%	․이주자단지 우수관로 부설(D450)	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	39.7%	0.7%	40.4% 39.6%	․신경 4교 슬라브 거푸집 조립	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	22.9%	1.1%	24.0% 23.5%	․대로1-1 토사절취 및 운반	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11.8 ~ ’14.7	2.2	0.5	2.7 2.7	․이주자택지 및 대1-1호선 토공	코오롱 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	360	’10. 7 ~ ’12. 7	56.0%	1.7%	57.7% 60.5%	․7BL 기초 콘크리트 타설	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	663	’10.10 ~ ’13. 1	31.7%	0.9%	32.6% 33.8%	․생물반응조 벽체 거푸집 설치	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13. 1	16.8%	0.4%	17.2% 22.2%	․제1집하장 지하 1층 기둥 및 벽체철근 조립	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	62.6%	0.2%	62.8% 64.9%	․구조물 우측 기둥 및 벽체 거푸집 설치	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	12.7%	1.1%	13.8% 13.7%	․신경#1 낙차공 사석부설	구일종합건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	5.2%	0.6%	5.8% 6.1%	․지하층 옹벽 철근가공	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	4.7%	0.6%	5.3% 5.8%	․지하층 옹벽 철근가공	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	30.8%	0.9%	31.7% 32.2%	․골조공사(지상2층 및 12층골조) 추진	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 0.35km	126	’09.12 ~ ’12. 9	15.6%	2.6%	18.2% 22.5%	․1공구 BOX 벽체 및 슬래브 Con'c 타설	명보 개발
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.43km ․덕산측 4.00km	1,017	’11. 7 ~ ’14. 6	1.4%	0.1%	1.5% 1.5%	․홍성: 토지협의취득 414건/145억원(80%) ․예산: 감정평가액 산정 시공측량	동성 건설