내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 11. 10일 현재)

공사명	공사 개요	공사비 (억원)	사업기간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	60.0%	1%	61% 63.1%	․각동 내부 조적, 미장, 방수, 전기입선 등	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	72.9%	1.0%	73.9% 72.5%	․대로2-8 우수관 부설	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	40.4%	0.7%	41.1% 40.3%	․신경 4교 슬라브 콘크리트 타설	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	24.0%	1.2%	25.2% 24.0%	․신리2교 구체 철근 조립	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	3.0%	0.8%	3.8% 3.8%	․이주자택지 및 대로 1-1 토공사	코오롱 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	57.7%	2.1%	59.8% 62.4%	․8BL 기초 콘크리트 타설	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 1	32.6%	3.6%	36.2% 38%	․전처리시설 상부 슬라브 거푸집 조립	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13. 1	17.2%	0.2%	17.4% 23.3%	․제1집하장 지하 1층 기둥 및 벽체철근 조립	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	62.8%	0.1%	62.9% 65.7%	․구조물 우측 기둥 및 벽체 거푸집 설치	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	13.8%	2.8%	16.6% 16.6%	․신경#1, 목리#1 낙차공 양생	구일종합건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	5.8%	6.1%	11.9% 12%	․지하층 옹벽 철근가공	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	5.3%	0.8%	6.1% 6.9%	․지하층 옹벽 철근가공	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	31.7%	3.2%	34.9% 35.2%	․골조공사(지상2층 및 14층골조) 추진	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 0.35km	126	’09.12 ~ ’12. 9	18.2%	1.0%	19.2% 22.6%	․1공구 BOX 되메우기	명보 개발
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.43km ․덕산측 4.00km	1,017	’11. 7 ~ ’14. 6	1.5%	0.1%	1.6% 1.6%	․홍성: 토지협의취득 414건/145억원(80%) ․예산: 감정평가액 산정 시공측량	동성 건설