내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 11. 17일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	61%	1%	62% 64.1%	․각동 내부 조적, 미장, 방수, 전기입선 등	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	73.9%	0.4%	74.3% 73.2%	․대로 2-8 경계석 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	41.1%	1.0%	42.1% 41.3%	․신경 1교 슬라브 콘크리트 타설	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	25.2%	0.2%	25.4% 26.0%	․신리천 저수호안 자연석 쌓기	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	3.8%	0.7%	4.5% 4.5%	․이주자택지 및 대로 1-1 토공사	코오롱 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	59.8%	1.1%	60.9% 63.8%	․27BL 슬래브 콘크리트 타설	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 1	36.2%	1.0%	37.2% 40.9%	․재이용시설, 생물반응조 벽체 거푸집 조립	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13. 1	17.4%	0.3%	17.7% 25.0%	․RD-3 이송관로 터파기 작업	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	62.9%	0.8%	63.7% 66.7%	․구조물 우측 벽체 거푸집설치	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	16.6%	2.3%	18.9% 18.8%	․신경천 기존수로관 깨기	구일종합건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	11.9%	1.0%	12.9% 13.1%	․지하층 옹벽 철근가공	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	6.1%	0.8%	6.9% 7.5%	․지상1층(강당)기초바닥 conc.타설(130㎥)	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	34.9%	1.2%	36.1% 36.8%	․골조공사(지상5층 및 14층골조) 추진	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 0.35km	126	’09.12 ~ ’12. 9	19.2%	0.7%	19.9% 22.8%	․1공구 BOX 되메우기	명보 개발
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.43km ․덕산측 4.00km	1,017	’11. 7 ~ ’14. 6	1.6%	0.1%	1.7% 1.7%	․홍성: 토지협의취득 414건/145억원(80%) ․예산: 감정평가액 산정 시공측량	동성 건설