내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 11. 24일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	62%	1%	63% 65.1%	․외부마감(알루미늄판넬 및 유리설치)공사	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	74.3%	0.8%	75.1% 74.4%	․대로 2-8(좌) 보차도 경계석 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	42.1%	1.4%	43.5% 42.3%	․신경 4교 보도부 거푸집 조립	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	25.4%	1.5%	26.9% 24.9%	․신리1교 슬라브 철근 조립	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	4.5%	0.2%	4.7% 4.7%	․이주자택지 및 대로 1-1 토공사	코오롱 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	60.9%	0.8%	61.7% 64.7%	․33BL 천공 및 발파 ․1~5BL 뒷채움	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 1	37.2%	2.2%	39.4% 41.9%	․전처리시설 지하1층 슬라브 거더 설치	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13. 1	17.7%	0.5%	18.2% 25.7%	․제1집하장 지상1층 보 거푸집 제작	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	63.7%	0.1%	63.8% 67.0%	․구조물 우측 벽체 콘크리트 타설	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	18.9%	2.3%	21.2% 20.9%	․신경천 기존수로관 깨기	구일종합건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	12.9%	0.6%	13.5% 13.6%	․1층 바닥슬라브 거푸집 조립	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	6.9%	0.9%	7.8% 8.1%	․본관동 1층 기둥, 옹벽 철근 및 거푸집 조립	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	36.1%	1.0%	37.1% 37.8%	․골조공사(지상5층 및 15층골조) 추진	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 0.35km	126	’09.12 ~ ’12. 9	19.8%	0.6%	20.4% 22.9%	․Con'c 개거 시공 ․봉신교 신축이음 교체	명보 개발
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.43km ․덕산측 4.00km	1,017	’11. 7 ~ ’14. 6	1.7%	0.1%	1.8% 1.8%	․삽교천교 A1 기초철근가공조립 ․협의보상 (홍성 85%, 예산 41%)	동성 건설