내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 12. 01일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	63.1%	0.5%	63.6% 65.6%	․외부마감(알루미늄판넬 및 유리설치)공사	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	74.3%	0.1%	74.4% 73.7%	․대로 2-8(좌) 보차도 경계석 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	43.5%	0.1%	43.6% 42.8%	․신경3교 슬라브 콘크리트 타설	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	26.9%	1.4%	28.3% 25.4%	․신리3교 기초 철근 조립	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	4.7%	0.2%	4.9% 4.9%	․이주자택지 및 대로 1-1 토공사	코오롱 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	61.7%	0.4%	62.1% 64.5%	․BL23 슬래브 및 벽체 콘크리트 타설	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 1	39.4%	0.5%	39.9% 42%	․전처리시설 지하1층 슬라브 거더 설치	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13. 1	18.2%	0.7%	18.9% 27.9%	․지상1층 바닥 슬라브 거푸집 설치	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	63.8%	2.1%	65.9% 69.3%	․배수지우측 내부 동바리설치	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	21.2%	1.3%	22.5% 22.5%	․신경#1 낙차공 사석 부설 및 찰붙임	구일종합건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	13.5%	1.5%	15.0% 15.1%	․전기실 보, 슬래브 형틀조립	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	7.8%	0.2%	8.0% 8.8%	․1층 기둥 및 보 형틀 조립 및 콘크리트 타설	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	37.1%	1.0%	38.1% 38.8%	․골조공사(지상5층 및 15층골조) 추진	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 0.35km	126	’09.12 ~ ’12. 9	20.4%	5.0	25.4% 23.1%	․Con'c 개거 시공 봉신교 기초파일설치	명보 개발
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.43km ․덕산측 4.00km	1,017	’11. 7 ~ ’14. 6	1.8%	0.1%	1.9% 1.9%	․삽교천교 A1 기초 Con'c 타설 협의보상 (홍성 85%, 예산 41%)	동성 건설