내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 12. 08일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	63.6%	1.4%	65.0% 66.4%	․외부마감(알루미늄판넬 및 유리설치)공사	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	74.4%	1.8%	76.2% 75.6%	․중로 3-22, 1-9 우수 받이 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	43.6%	0.7%	44.3% 43.5%	․대로 2-10 오수관로 부설	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	28.3%	0.6%	28.9% 25.6%	․신리3교 기초 콘크 리트 타설	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	4.9%	0.1%	5.0% 5.0%	․이주자택지 및 대로 1-1 토공사	코오롱 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	62.1%	1.9%	64.0% 67.0%	․BL37 기초 콘크 리트 타설	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 1	39.9%	3.0%	42.9% 45.3%	․전처리시설 지하1층 슬라브 콘크리트 타설	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13. 1	18.9%	0.4%	19.3% 29.0%	․지상1층 바닥 슬라브 거푸집 설치	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	65.9%	0.6%	66.5% 69.9%	․배수지 되메우기 (7,800㎥)	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	22.5%	0.7%	23.2% 25.0%	․신경#1 낙차공 사석 부설 및 찰붙임	구일종합건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	15.0%	0.2%	15.2% 15.3%	․전기실 보, 슬래브 형틀조립	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	8.0%	0.3%	8.3% 9.5%	․2층 기둥 및 보 형틀 조립 및 콘크리트 타설	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	38.1%	1.0%	39.1% 39.8%	․골조공사(지상5층 및 15층골조) 추진	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 9	70.4%	0.6%	71.0% 71.0%	․콘크리트 개거 시공 ․봉신교 파일 항타	한화 명보
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.43km ․덕산측 4.00km	1,017	’11. 7 ~ ’14. 6	25.3%	0.7%	26.0% 26.0%	․삽교천교 A1 기초콘크리트 타설 ․협의보상 (홍성 84%, 예산 45%)	동성 건설