내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 12. 15일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	65.0%	1.3%	66.3% 67.2%	․외부마감(알루미늄판넬 및 유리설치)공사	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	76.2%	1.0%	77.2% 76.7%	․T유역 초기우수처리 시설 기초 Con'c 타설	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	44.3%	0.7%	45.0% 44.2%	․상아2교 기초 철근 및 거푸집 조립	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	28.9%	0.6%	29.5% 25.8%	․신리천 자연형 낙차공 시공	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	5.0%	1.0%	6.0% 6.0%	․이주자택지 및 대로 1-1 토공사	코오롱 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	64.0%	1.6%	65.6% 68.0%	․BL25 기초 철근 조립	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 1	42.9%	1.3%	44.2% 46.5%	․고도처리시설 지하2층 슬라브 철근 조립	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13. 1	19.3%	0.6%	19.9% 29.2%	․지하1층 벽체 및 지상1층 바닥 슬라브 Con’c 타설	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	66.5%	1.2%	67.7% 70.2%	․배수지 우측 슬라브 철근 조립	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	23.2%	2.5%	25.7% 27.0%	․신경#1 낙차공 사석 부설 및 찰붙임	구일종합건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	15.2%	0.8%	16.0% 16.1%	․1층 바닥 Con’c 타설	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	8.3%	1.3%	9.6% 10.2%	․3층 바닥 철근가공	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	39.1%	1.0%	40.1% 40.8%	․골조공사(지상5층 및 15층골조) 추진	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 0.35km	126	’09.12 ~ ’12. 12	71.0%	0.4%	71.4% 71.4%	․토공사 : 흙깍기(흙운반) ․봉신교 파일 항타	명보 개발
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.43km ․덕산측 4.10km	1,017	’11. 7 ~ ’14. 6	26.0%	0.5%	26.5% 26.5%	․통로암거 ․(홍성 86%, 예산 47%)	동성 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,176	’11. 7 ~ ’20.12	6.0%	0.5%	6.5% 6.5%	․대로 2-8 배관부설 및 용접	롯데 건설