내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 12. 23일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	66.3%	0.7%	67.0% 69.0%	․외부마감(알루미늄판넬 및 유리설치)공사	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	77.2%	0.8%	78.0% 77.6%	․이주자택지 오수분기관 부설	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	45.0%	0.8%	45.8% 45.0%	․신경 4교 보도부 거푸집 해체	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	29.5%	1.4%	30.9% 26.2%	․신리천 자연형 낙차공 시공	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	6.0%	0.7%	6.7% 7.2%	․이주자택지 및 대로 1-1 토공사	코오롱 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	65.6%	0.6%	66.2% 67.9%	․BL25 기초 철근 조립	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 1	44.2%	1.3%	45.5% 47.5%	․고도처리시설 지하2층 슬라브 철근 조립	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13. 1	19.9%	0.4%	20.3% 31.9%	․지하1층 벽체 및 지상1층 바닥 슬라브 Con’c 타설	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	67.7%	1.7%	69.4% 70.6%	․배수지 우측 슬라브 철근 조립	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	25.7%	3.2%	28.9% 30.1%	․매트리스게비온 설치 준비 작업	구일종합건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	16.0%	0.7%	16.7% 16.9%	․1층 벽체 철근조립 및 거푸집 설치	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	9.6%	0.6%	10.2% 10.8%	․3층 바닥 철근가공 및 기둥 및 보 형틀 조립	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	40.1%	3.5%	43.6% 43.9%	․골조공사(지상5층 및 18층골조) 추진	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	71.4%	0.3%	71.7% 71.7%	․토공사 : 흙깍기(흙운반) ․암거공 : 기초 Con’c 타설	한화 명보
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.43km ․덕산측 4.10km	1,017	’11. 7 ~ ’14. 6	26.5%	0.4%	26.9% 26.9%	․통로암거 2개소 시공 ․(홍성 86%, 예산 57%)	동성 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,176	’11. 7 ~ ’20.12	6.0%	0.5%	6.5% 6.5%	․대로 2-8 배관부설 및 용접	롯데 건설