내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 12. 30일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	67.0%	3.0%	70.0% 70.0%	․외부마감(알루미늄판넬 및 유리설치)공사	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	78.0%	1.0%	79.0% 78.7%	․대로1-2 T유역 콘크 리트 타설	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	45.8%	1.2%	47.0% 46.3%	․PC BOX되메우기 (대로(주)1-1)	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	30.9%	1.2%	32.1% 26.3%	․신리천 자연형 낙차공 시공	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	6.7%	0.7%	7.4% 7.8%	․이주자택지 및 대로 1-1 토공사	코오롱 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	66.2%	2.9%	69.1% 69.0%	․BL19 벽체 및 슬라브 Con'c 타설	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 1	45.5%	0%	45.5% 47.5%	․동절기 공사중지	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13. 1	20.3%	0%	20.3% 31.9%	․동절기 공사중지	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	69.4%	1.7%	71.1% 71.1%	․배수지 우측 슬라브 철근 조립	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	28.9%	3.7%	32.6% 31.5%	․매트리스게비온 설치 준비작업	구일종합건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	16.7%	0.7%	17.4% 17.8%	․1층 벽체 철근조립 및 거푸집 설치	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	10.2%	0.5%	10.7% 11.4%	․강당동 3층바닥 타설	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	43.6%	0.4%	44.0% 44.5%	․골조공사(지상5층 및 18층골조) 추진	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 0.35km	126	’09.12 ~ ’12. 12	71.7%	0.4%	72.1% 72.1%	․토공사 : 흙깍기(흙운반) ․암거공 철근가공조립	한화 명보
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․덕산측 4.10km	1,017	’11. 7 ~ ’14. 6	26.9%	0.3%	27.2% 27.2%	․통로암거 2개소 시공 ․(홍성 86%, 예산 58%)	동성 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,176	’11. 7 ~ ’20.12	7.0%	0.5%	7.5% 7.5%	․대로 2-8 배관부설 및 용접	롯데 건설