내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 01. 26일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	70.8%	0.3%	71.1% 71.3%	․외부마감 및 내부 인테리어 공사	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	68.2%	0%	68.2% 68.2%	․현장 주변정리	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	47.0%	0%	47.0% 47.1%	․현장 주변정리	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	33.8%	0.2%	34.0% 27.0%	․대로2-1 우수관 부설	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	7.7%	0.1%	7.8% 7.8%	․이주자택지 및 대로 1-1 토공사	코오롱 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	69.4%	0.1%	69.5% 69.5%	․BL31 기초철근 조립	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 1	45.5%	0%	45.5% 47.5%	․동절기 공사중지	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13. 1	20.3%	0%	20.3% 31.9%	․동절기 공사중지	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	105	’10.10 ~ ’12.10	71.2%	0%	71.2% 71.2%	․구조물 내부 면정리	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	32.6%	0%	32.6% 33.6%	․매트리스게비온 설치 준비작업	구일종합건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	18.1%	0.3%	18.4% 18.5%	․1층 벽체 철근조립 및 거푸집 설치	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	10.7%	0%	10.7% 11.4%	․동절기 공사중지	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	49.2%	0.2%	49.4% 45.0%	․골조공사(지상7층 및 18층골조) 추진	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	73.1%	0.2%	73.3% 73.3%	․공사중지	한화 명보
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	27.9%	0.2%	28.1% 28.1%	․삽교천교 기초공사시행	동성 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,176	’11. 7 ~ ’20.12	7.8%	0.1%	7.9% 7.9%	․대로 2-8 배관부설 및 용접	롯데 건설