내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 02. 29일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	73.3%	0.4%	73.7% 74.0%	․외부마감 및 내부 인테리어 공사	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	68.2%	0%	68.2% 68.2%	․초기우수처리시설 기계설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	47.0%	0.8%	47.8% 49.7%	․하천재이용수 관로 부설(대로2-1)	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	35.1%	0.1%	35.2% 28.2%	․중로1-6 오수관 부설	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	11.2%	0.5%	11.7% 11.5%	․이주자택지 및 대로 1-1 토공사	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,180천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	0%	0.5%	0.5% 0.5%	․시공측량 및 현장 사무실 공사	동성 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	69.9%	0.1%	70.0% 70.2%	․BL34 집수정 철근조립	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 1	45.5%	0%	45.5% 47.5%	․공사착수를 위한 자재 및 인력 준비	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13. 1	20.3%	0%	20.3% 31.9%	․공사착수를 위한 자재 및 인력 준비	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	105	’10.10 ~ ’12.10	71.2%	0%	71.2% 71.2%	․구조물 되메우기	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	32.6%	0.2%	32.8% 33.8%	․신경천 수로관 설치	구일종합건설
조경공사	․2구역 (3,783천㎡)	329	’12. 1 ~ ’14. 1	0%	0%	0% 0%	․설계도서 검토	승화 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	20.0%	0.4%	20.4% 20.5%	․2층 벽체․기둥 철근조립	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	10.7%	0%	10.7% 11.4%	․공사착수를 위한 자재 및 인력 준비	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	51.2%	2.0%	53.2% 54.2%	․골조공사(지상13층 및 20층골조) 추진	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	1.2%	0.1%	1.3% 1.3%	․토공사 추진	극동 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	73.9%	0.2%	74.1% 74.1%	․노상정리 및 골재운반	한화 명보
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	29.1%	0.2%	29.3% 29.3%	․삽교천교 기초공사시행 ․산수과선교 터파기시행	동성 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,176	’11. 7 ~ ’20.12	8.3%	0%	8.3% 8.3%	․대로2-7 열배관 부설	롯데 건설
(가칭)신경 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	1.1%	0.1%	1.2% 1.2%	․현장사무실 개설 및 토공사 추진	세광 건설
(가칭)신경 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	2.1%	0.1%	2.2% 2.2%	․현장사무실 개설 및 토공사 추진	케이앤 건설