내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 03. 15일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	75.2%	0.9%	76.1% 76.2%	․외부마감 및 내부 인테리어 공사	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	68.9%	0.7%	69.6% 69.6%	․초기우수처리시설 기계설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	48.9%	1.1%	50.0% 52.6%	․상아2교 벽체 거푸 집 조립	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	35.3%	0.1%	35.4% 30.0%	․대로3-7 PC BOX 터파기 및 버림Con'c 타설	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	11.9%	0.3%	12.2% 13.1%	․이주자택지 및 대로 1-1 관로매설	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,180천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	1.0%	0.1%	1.1% 1.1%	․현장사무실 공사 및 토공사	동성 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	71.9%	0.1%	72.0% 71.6%	․BL31 슬라브 철근조립	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	45.7%	0.1%	45.8% 47.8%	․관리동 슬라브 거푸집 설치	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13. 1	20.4%	0.1%	20.5% 32.1%	․1집하장 구조물공사 추진	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	105	’10.10 ~ ’12.10	71.3%	0.1%	71.4% 71.4%	․구조물 되메우기	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	34.2%	2.7%	36.9% 38.9%	․신경천 수로관 설치 ․순성토 반입	구일종합건설
조경공사	․2구역 (3,783천㎡)	329	’12. 1 ~ ’14. 1	0.1%	0.2%	0.3% 0.3%	․소나무 이식공사	승화 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	21.6%	0.7%	22.3% 22.5%	․청사동 4층, 교육연 구동 3층 골조공사	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	11.2%	0.1%	11.2% 12.5%	․지상2층 덕트 및 배관공사	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	54.0%	1.6%	55.6% 56.0%	․골조공사(지상18층 및 옥탑 골조) 추진	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	1.4%	0.1%	1.5% 1.5%	․토공사 추진	극동 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	74.6%	0.5%	75.1% 75.1%	․배수관 부설, 골재포설	한화 명보
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	29.8%	0.5%	30.3% 30.3%	․삽교천교 하부공 ․산수과선교 기초공사	동성 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.3%	0%	8.3% 8.3%	․대로2-7 열배관 부설	롯데 건설
(가칭)신경 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	1.3%	0.1%	1.4% 1.4%	․현장사무실 개설 및 토공사 추진	세광 건설
(가칭)신경 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	2.3%	0.1%	2.4% 2.4%	․현장사무실 개설 및 토공사 추진	케이앤 건설