내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 04. 05일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	77.96%	0.9%	78.86% 78.86%	․외부마감 및 내부 인테리어 공사	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	72.9%	0.3%	73.2% 71.4%	․대로 1-2 도로경계석 및 L형측구	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	51.8%	3.8%	55.6% 56.1%	․중로1-5 상수관로 터파기 및 관부설	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	35.8%	0.2%	36.0% 32.7%	․관사진입로 토공사	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	17.1%	0.4%	17.5% 17.5%	․이주자택지 및 대로 1-1 관로매설	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,180천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	1.7%	0.8%	2.5% 2.5%	․현장사무실 공사 및 토공사	동성 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	72.6%	0.3%	72.9% 72.4%	․BL33 슬라브거푸집 조립 ․BL34 기초철근 조립	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	46.9%	1.1%	48.0% 48.7%	․관리동 2층 벽체철근 조립	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13. 4	20.7%	0.2%	20.9% 20.9%	․1집하장 구조물공사 및 2집하장 토공사	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	105	’10.10 ~ ’12.10	71.8%	0.2%	72.0% 72.0%	․진입도로 성토 및 사면 정리	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	42.7%	5.8%	48.5% 48.0%	․종배수관 설치 ․목리#2 배수문 설치	구일종합건설
조경공사	․2구역 (3,783천㎡)	329	’12. 1 ~ ’14. 1	0.8%	0.5%	1.3% 1.1%	․이식소나무 굴취 및 운반 식재	승화 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	23.7%	1.9%	25.6% 26.1%	․3층 벽체 및 4층 바닥 스리브 설치	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	13.6%	14.9%	28.5% 29.5%	․본관동 4층 기둥 및 옹벽 철근조립	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	57.7%	1.0%	58.7% 58.9%	․골조공사(지상18층 및 옥탑 골조) 추진	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	1.7%	0.1%	1.8% 1.8%	․토공사 및 파일항타 공사 추진	극동 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	76.1%	1.0%	77.1% 77.1%	․배수관 부설, 골재포설	한화 명보
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	31.3%	1.0%	32.3% 32.3%	․삽교천교 하부공 ․산수과선교 기초공사	동성 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.31%	0.01%	8.32% 8.32%	․대로2-7 열배관 부설	롯데 건설
(가칭)신경 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	4.5%	0.6%	5.1% 5.1%	․기초 바닥 Con'c공사	세광 건설
(가칭)신경 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	6.8%	0.4%	7.2% 7.2%	․기초 바닥 Con'c공사	케이앤 건설