내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 04. 19일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	80.0%	1.2%	81.2% 81.2%	․외부마감 및 내부 인테리어 공사	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	74.1%	0.8%	74.9% 72.8%	․중로 1-12 도로경계석 및 L형측구 시공	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	56.9%	0.7%	57.6% 57.6%	․상아2교 슬라브철근 조립	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	36.6%	1.3%	37.9% 34.5%	․대로2-7 우수관로부설	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	18.4%	1.6%	20.0% 20.0%	․이주자택지 및 대로 1-1 관로매설	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,180천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	3.4%	0.7%	4.1% 4.1%	․토공사 및 송수관로 공사	동성 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	74.8%	1.2%	76.0% 74.6%	․BL34 벽체 거푸집 설치 ․BL39 기초 철근조립	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	48.9%	0.9%	49.8% 50.4%	․관리동 2층 벽체철근 조립	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13. 4	21.5%	0.6%	22.1% 21.8%	․1집하장 구조물공사 및 2집하장 토공사	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	105	’10.10 ~ ’12.10	74.0%	2.0%	76.0% 75.0%	․우수관로 매설 ․배수관로 매설	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	51.3%	9.8%	61.1% 56.0%	․개비온매트리스설치	구일종합건설
조경공사	․2구역 (3,783천㎡)	329	’12. 1 ~ ’14. 1	1.7%	0.1%	1.8% 1.5%	․이식목 관수작업	승화 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	26.9%	1.3%	28.2% 29.0%	․지하층 액체방수 및 조적공사	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	28.6%	4.5%	33.1% 33.1%	․본관동(우측) 6층바닥 거푸집 및 철근조립	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	59.5%	1.4%	60.9% 60.9%	․옥상층 골조공사 및 내부 습식공사 추진	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	1.9%	0.6%	2.5% 2.5%	․지하2층 기초공사 준비	극동 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	78.1%	0.5%	78.6% 78.6%	․배수관 부설, 골재포설	한화 명보
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	33.3%	1.0%	34.3% 34.3%	․삽교천교 상부공 준비 ․산수과선교 하부공	동성 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.33%	0.01%	8.34% 8.34%	․대로2-7 열배관 부설	롯데 건설
(가칭)신경 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	5.6%	0.5%	6.1% 6.1%	․지중보 설치공사	세광 건설
(가칭)신경 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	7.6%	0.4%	8.0% 8.0%	․지중보 설치공사	케이앤 건설