내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 05. 03일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	82.4%	1.0%	83.4% 83.4%	․외부마감 및 내부 인테리어 공사	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	75.4%	0.9%	76.3% 74.4%	․이주자택지 노상 다짐 작업	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	58.3%	0.7%	59.0% 59.0%	․초기우수처리시설 벽체 철근 조립	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	38.4%	0.1%	38.5% 36.0%	․대로2-1 상하수관로부설 ․대로1-1 PC 암거부설	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	22.0%	0.1%	22.1% 22.1%	․이주자택지 및 대로 1-1 관로매설	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,180천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	5.3%	0.7%	6.0% 6.0%	․토공사 및 송수관로 공사	동성 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	76.6%	0.4%	77.0% 75.4%	․BL34 슬래브 거푸집조립 ․BL32 슬래브 철근조립	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	50.9%	1.2%	52.1% 52.1%	․생물반응조 지하1층 동바리 설치	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13. 4	22.6%	0.8%	23.4% 23.3%	․1집하장 구조물공사 및 2집하장 기초공사	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	105	’10.10 ~ ’12.10	76.2%	2.0%	78.2% 75.5%	․상수․우수관로 매설 ․배수지 내부방수	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	61.2%	0.1%	61.3% 57.8%	․목리천 수로관 설치	구일종합건설
조경공사	․2구역 (3,783천㎡)	329	’12. 1 ~ ’14. 1	1.8%	0.0%	1.8% 1.7%	․근린공원 확인측량	승화 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	29.3%	0.9%	30.2% 30.4%	․지하층 액체방수 및 조적공사	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	30.6%	0.1%	30.7% 30.7%	․본관동(좌측) 6층바닥 데크플레이트깔기	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	61.9%	1.2%	63.1% 63.1%	․옥상층 골조공사 및 내부 습식공사 추진	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	3.1%	0.4%	3.5% 3.5%	․지하2층 기초공사 준비	극동 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	79.1%	0.5%	79.6% 79.6%	․배수관 부설, 골재포설	한화 명보
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	35.3%	1.0%	36.3% 36.3%	․삽교천교 상부공 ․산수과선교 하부공	동성 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.35%	0.01%	8.36% 8.36%	․대로2-7 열배관 부설	롯데 건설
(가칭)신경 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	6.6%	0.4%	7.0% 7.0%	․지중보 설치공사	세광 건설
(가칭)신경 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	8.4%	0.5%	8.9% 8.9%	․지중보 설치공사	케이앤 건설