◉산업통상자원부고시제2018-220호

전원개발사업 실시계획 승인(변경)

① 산업통상자원부 고시 제2014-62호(’14.04.01), 산업통상자원부 고시 제2017-65호(‘17.05.10)로 고시한 바 있는 154kV 김제-부안 송전선로 건설사업, ② 지식경제부 고시 제2011-35호(’11.03.14), 산업통상자원부 고시 제2015-228호(’15.03.10), 산업통상자원부 고시 제2017-139호(’17.10.11)로 고시한 바 있는 154kV 천선분기 송전선로 건설사업, ③ 산업자원부 고시 제2007-138호(‘07.12.06), 지식경제부 고시 제2010-114호(‘10.06.09), 지식경제부 고시 제2010-162호(‘10.09.28), 지식경제부 고시 제2011-36호(‘11.03.14), 지식경제부 고시 제2011-78호(‘11.05.13), 지식경제부 고시 제2011-143호(’11.07.13), 산업통상자원부 고시 제2013-14호(‘13.04.29), 산업통상자원부 고시 제2013-177호(‘13.12.20), 산업통상자원부 고시 제2015-228호(’15.10.30), 산업통상자원부 고시 제2016-197호(‘16.10.30)로 고시한 바 있는 765kV 신고리-북경남 송전선로(제1구간) 건설사업, ④ 산업자원부 고시 제2007-138호(‘07.12.06), 지식경제부 고시 제2010-114호(‘10.06.09), 지식경제부 고시 제2010-162호(‘10.09.28), 지식경제부 고시 제2011-36호(‘11.03.14), 지식경제부 고시 제2011-78호(‘11.05.13), 지식경제부 고시 제2011-143호(’11.07.13), 산업통상자원부 고시 제2013-14호(‘13.04.29), 산업통상자원부 고시 제2013-177호(‘13.12.20), 산업통상자원부 고시 제2015-228호(’15.10.30), 산업통상자원부 고시 제2016-197호(‘16.10.30)로 고시한 바 있는 765kV 신고리-북경남 송전선로(제2구간) 건설사업을 위한 전원개발사업 실시계획에 대하여 전원개발촉진법 제5조 제2항의 규정에 의하여 변경된 내용을 다음과 같이 고시하며, 동일 건에 대하여 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 지형도면 고시합니다. 관계도서는 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의거 토지이용규제정보시스템(http://luris.molit.go.kr)에서 열람이 가능하고 한국전력공사 해당 사업소에 비치하여 일반인에게 보입니다. 다만, 국가지리정보 보안관리지침(지식경제부훈령 제50호) 제9조 및 제10조에 의거 전력․통신․가스 등 공공의 이익 및 안전과 밀접한 관계가 있는 국가기간시설이 포함된 지도는 공개제한 대상으로 분류되어 있어 도면에 표기하지 않습니다.

2018년 11월 30일

산업통상자원부장관

154kV 김제-부안 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 김제-부안 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동 120)

3. 변경사유 : 철탑부지 복구공사 기간을 고려하여 사업기간 연장

4. 변경내역

가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2014. 02 ∼ 2018. 12 (59개월)	2014. 02 ∼ 2019. 06 (65개월)	6개월 연장

나. 기타 : 변경사항 없음

154kV 천선분기 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 천선분기 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동 120)

3. 변경사유 : 창원시 관내 국도대체우회도로(제2안민터널)건설공사 관련 철탑 4호, 5호 지장이설 요청에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2011. 02 ∼ 2018. 12 (95개월)	2011. 02 ∼ 2020. 12 (119개월)	24개월 연장

나. 기타 : 변경사항 없음

765kV 신고리-북경남 송전선로(제1구간) 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 765kV 신고리-북경남 송전선로(제1구간) 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동 120)

3. 변경사유 : 사후환경영향평가 및 항공장애표시등 재설치에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2007. 11 ∼ 2018. 12 (134개월)	2007. 11 ∼ 2020. 12 (158개월)	24개월 연장

나. 기타 : 변경사항 없음

765kV 신고리-북경남 송전선로(제2구간) 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 765kV 신고리-북경남 송전선로(제2구간) 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동 120)

3. 변경사유 : 사후환경영향평가 및 항공장애표시등 재설치에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2007. 11 ∼ 2018. 12 (134개월)	2007. 11 ∼ 2020. 12 (158개월)	24개월 연장

나. 기타 : 변경사항 없음