천안서북소방서 증축사업

- 단계 : 준공 -

소방행정과, 강용철, 360-0220

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 2길 32
	인구 수	착공일	준공일
		399,923명(2018.07.31. 기준)	402,687명(2018.11.30. 기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		216명/271명	236명 / 271명
	재정자립도	착공일	준공일
		31.5% (2018년 본예산 기준)	31.5% (2018년 본예산 기준)

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도				부지면적			기준면적			건물연면적		층수 (지하/지상)				비고
	합계	2011년				6,042.7㎡						3,760.4㎡		-1/3
	본청
	의회
	기타	2011년				6,042.7㎡						3,760.4㎡		-1/3
	청사신축 필요성			소방인력 및 소방 수요 증가에 따른 사무 공간 확보
	사업기간			착공 당시				2017 ~ 2018 ( 2년)
				준공				2017 ~ 2018 ( 2년)
	사업수행방식			설계･시공 분리
	추정(예정)가격 (관급자재 제외)			523,921,740원						계약금액		462,812,180원			낙찰율		88.34%
	청사증축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적				건물연면적		층수 (지하/지상)			비고
	합계		2018		6,042.7㎡						4,098.29㎡		-1/3			2층 증축 337.89㎡
	본청
	의회
	기타		2018		6,042.7㎡						4,098.29㎡		-1/3			2층 증축 337.89㎡

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만 원)
	구분	합계		국비		시도비		시군구비	지방채
	합계	608				608
	2017년	608				608
	-
	-
	-
	총 사업비안(백만 원)
	구분		연도별 사업비
			2017년		2018년
	1) 토지매입비						해당 없음
	2) 설계비		30
	3) 감리비		10
	4) 공사비		565
	5) 기타부대비		3

향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2016.12.	반영	자체
	공유재산관리계획	-	-	-	해당 없음
	기본계획 수립	2017.07.	수립	자체
	기본 및 실시설계	2017.09. ~ 2018.05.	완료	자체
	착공	2018.08.	착공	자체
	준공	2018.12.	준공	자체

2. 공종별 공사비

(부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합계	금액(원)	541,309,970
	단위비용(원/㎡)	1,601,500
	점유율(%)	100
건축 기계	금액(원)	402,041,170	민원실, 사무실, 민원인 대기실, 사법조사실, 문서고, 임산부 휴게실 등
	단위비용(원/㎡)	1,276,090
	점유율(%)	74.3
전 기	금액(원)	54,803,520	전열기구, 전등기구
	단위비용(원/㎡)	162,140
	점유율(%)	10.1
통 신	금액(원)	37,264,460	전화, TV공청, LAN, 방송설비 연결
	단위비용(원/㎡)	110,240
	점유율(%)	6.9
소 방	금액(원)	47,200,820	화재감지기, 시각경보기, 피난구유도등
	단위비용(원/㎡)	139,650
	점유율(%)	8.7

3. 주요 장비내역

구분	주요 사업설계 내용	비 고
건축	○ 골조 : 일반철골구조 ○ 외부 : THK24 로이복층유리, THK0.7 아연도강판, THK220 난연성지붕판넬 등 ○ 내부 : 바닥, 벽, 천정 등 - 바닥 : 친환경비닐계타일 THK3.0 등 - 벽 : 친환경 수성페인트 - 천정 : 친환경텍스, 고급 천장지, 열경화성수지 천장재(SMC) 등
기계	○ 주요장비 : 냉난방설비, 환기설비 ○ 환기설비 : 1종 환기시설
전기	○ 전열기구 1식, 등기구 55조 등
통신	○ 전화, TV공청, LAN, 방송설비 연결 및 신설
소방	○ 화재감지기 7개소, 시각경보기 4개소, 소화기 6개, 피난구유도등 5개 등
특이 사항	대지면적 : 6,042.7㎡, 1동, 건축면적 : 1,585.37㎡, 연면적 : 4,081.49㎡, 지하1층, 지상3층