계룡소방서 신축사업

- 단계 : 계약체결(’19년 1월 14일 기준) -

소방행정과 정해근, 041-635-5565

일반 현황	소 재 지	계룡시 엄사면 유동리 283번지 일원
	인구 수	43,731명(2018.12.31.기준)
	공무원 수	86 명 / 86명	현원/정원
	재정자립도	31.5% (2018년 본예산 기준)

사업 개요	기존청사(없음)
	용도	준공연도				부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계
	본청
	의회
	기타
	청사신축 필요성			신설 소방서의 소방청사 신축을 통한 근무환경 개선 및 안전인프라 구축
	사업기간			2017년 ~ 2020년(4년)
	사업수행방식			설계･시공 분리입찰 : 일반경쟁(지역제한)
	추정(예정)가격			6,938백만원					계약금액			6,038백만원			낙찰율		86.47%
	청사신축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계		2019		12,055㎡					3,608㎡			1/3
	본청
	의회
	기타		2019		13,793㎡					3,608㎡			1/3

소요 예산액	사업비 조달 계획안(백만원)
	구분	합계		국비	시도비		시군구비	지방채
	합계	11,579			11,579
	2017년	400			400
	2018년	4,165			4,165
	2019년	7,014			7,014
	총 사업비안(백만원)
	1) 토지매입비		1,500
	2) 설계비		460
	3) 감리비		160
	4) 공사비		9,440
	5) 기타부대비		19

향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	15.12.	반영	자체
	사업기본계획	16.05.	수립	자체	원문 공개
	투융자심사	16.08.	승인	중앙
	공유재산관리계획	17.04.	승인	도 의회
	설계	18.08.	완료	자체
	공사계약	19.01.	완료	자체
	착공	19.01.	-	자체	예정
	준공	20.03.	-	자체	예정

2. 공종별 공사비

(부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합계	금액(원)	8,472,108,490
	단위비용(원/㎡)	2,348,145
	점유율(%)	100
건 축 토 목 기 계	금액(원)	6,832,755,700	소방차고, 사무실, 출동대기실, 심신안정실, 회의실, 식당, 세탁실, 창고, 기계실, 발전기실, 전기실, 방풍실, 급배수 및 냉난방 설비 등
	단위비용(원/㎡)	1,893,779
	점유율(%)	80.65
전 기	금액(원)	768,204,030	수배전시설, 태양광발전시설, 비상발전기, 전력간선, 접지설비, 원격검침설비 등
	단위비용(원/㎡)	212,917
	점유율(%)	9.07
통 신	금액(원)	342,012,760	통합배선설비공사, 방송설비공사, CCTV공사 등
	단위비용(원/㎡)	94,793
	점유율(%)	4.04
소 방	금액(원)	169,056,000	자동화재탐지설비, 시각경보기, 피난설비, 유도등설비, 비상조명, 소화기, 옥내소화전 등
	단위비용(원/㎡)	46,856
	점유율(%)	2.00
조 경	금액(원)	360,080,000	수목식재 등
	단위비용(원/㎡)	99,800
	점유율(%)	4.25

3. 주요 장비내역

구분	주요 사업설계내용	비 고
건축 ･ 토목	○ 골조 : 철근콘크리트 등 ○ 외부 : 알루미늄커튼월(THK24 로이복층유리), 타공패널, 화강석 등 ○ 내부 : 바닥, 벽, 천정 등 - 바닥 : 화강석, 데코타일, 석재타일, 자기질 타일 등 - 벽 : 친환경수성페인트, 고급벽지, 도기질 타일, 다채무늬도료 등 - 천정 : 친환경텍스, 퍼라이트계 뿜칠, 고급 천장지, 열경화성수지 천장재 등 ○ 토목 : 토공사, 우수공사, 오수공사, 포장공사, 상수공사, 옹벽공사, 자연석 쌓기, 차선도색 등
기계 설비	○ 주요장비 : 저탕식전기온수기, 급수펌프(부스터펌프), 배수펌프, 급배기팬, 저수조, ○ 환기설비 : 덕트, 디퓨저, 배기후드 ○ 배관 : 옥외, 기계실, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관 등 ○ 신재생에너지 설비 : 지열순환펌프, 지중열교환기설치, 지열실외기 공사 등
전기 · 통신 ･ 소방	○ 수배전시설, 태양광발전설비, 비상발전기, 등기구 설치 등 ○ 통합배선설비, CCTV설비, 방송설비, 통신접지설비 ○ 자동화재탐지설비, 시각경보기, 피난설비, 유도등설비, 비상조명, 소화기,옥내소화전 등
특이 사항	○ 건축물에너지효율등급인증(1등급), 녹색건축 인증(그린2등급 이상), 장애물 없는 생활환경 인증 등 ○ 대지면적 : 12,055㎡, 1동, 건축면적 : 1,733.66㎡, 연면적 : 3,608.48㎡, 지하1층 / 지상3층 ○ 옥외시설 : 잔디광장, 쉼터, 옥외주차장(2개소) 등