보령소방서 이전·신축사업

- 단계 : 준공 -

소방행정과, 정해근, 041-635-5565

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	충청남도 보령시 명천동 715-10번지 일원
	인구 수	착공일	준공일
		103,344명(2017.10.31. 기준)	101,799명(2019.1.31. 기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		149명 / 151명	178명 / 159명
	재정자립도	착공일	준공일
		32.8% (2017년 본예산 기준)	31.5% (2018년 본예산 기준)

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도				부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)				비고
	합계	1988				3,328㎡		-			2,179㎡			1/3
	본청
	의회
	기타	1988				3,328㎡		-			2,179㎡			1/3
	청사신축 필요성			노후 협소한 소방청사 이전·신축 필요
	사업기간			착공당시			2016년 ~ 2018년( 3년)
				준공			2016년 ~ 2019년( 4년)
	사업수행방식			설계･시공 분리
	추정(예정)가격			6,200백만 원					계약금액			5,374백만 원			낙찰율		87.13
	청사신축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계		2019		9,977㎡		-			3,519.72㎡			0/3
	본청
	의회
	기타		2019		9,977㎡		-			3,519.72㎡			0/3

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비			시군구비		지방채
	합계	8,450				8,450
	2016년	400				400
	2017년	2,621				2,621
	2018년	5,429				5,429
	총사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비							비고
			계		2016		2017	2018
	합계		8,450		400		2,621	5,429
	1) 토지매입비									공유재산 교환
	2) 설계비		400		400
	3) 감리비		145				145
	4) 공사비		7,886				2,470	5,416
	5) 기타부대비		19				6	13

향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2015.12.	반영	자체
	사업기본계획	2015.02.25.	수립		원문 공개
	지방재정 투자심사	2015.02.13.	승인	중앙
	공유재산관리계획	2015.03.25.	승인	지방의회
	설계	2016.09.21. ~ 2017.06.05.	완료	자체
	착공	2017.10.24.	착공	자체
	준공	2019.02.25.	준공	자체

2. 공종별 공사비

(부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합 계	금액(원)	7,581,308,940
	단위비용(원/㎡)	2,153,952
	점유율(%)	100
건 축 토 목 기 계	금액(원)	6,033,402,930	○ 골조 : 철근콘크리트 등 ○ 외부 : THK24 로이복층유리, THK3 AL 쉬트, 인조라임스톤 등 ○ 내부 : 바닥, 벽, 천정 등 - 바닥 : 데코타일, 비닐쉬트, 자기질 타일 등 - 벽 : 친환경수성페인트, 고급벽지, 도기질 타일, 다채무늬도료 등 - 천정 : 친환경텍스, 퍼라이트계 뿜칠, 고급 천장지 천장재 등 ○ 토목 : 토공사, 우수공사, 오수공사, 포장공사, 상수공사, L형옹벽공사, 자연석 쌓기, 차선도색 등 ○ 주요장비 : 저탕식 전기온수기, 급수펌프(부스터펌프), 배수펌프, 급배기팬, 저수조,지열순환펌프, 빗물재이용시설 초절전바닥난방, 냉·난방기, TAB, 엘리베이터 등 ○ 주요시설 : 소방차고, 사무실, 출동대기실, 심신안정실, 호흡보호장비충전실, 세탁실, 창고, 기계실, 발전기실, 전기실 등
	단위비용(원/㎡)	1,714,171
	점유율(%)	79.58
전 기	금액(원)	836,483,140	수배전시설 500kw, 태양광발전설비 45kw, 비상발전기 90kw, 등기구 등
	단위비용(원/㎡)	237,656
	점유율(%)	11.03
통 신	금액(원)	330,883,870	통합배선설비, CCTV설비, 방송설비
	단위비용(원/㎡)	94,009
	점유율(%)	4.36
소 방	금액(원)	92,621,000	자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 비상방송설비, 유도등설비, 비상조명, 소화기, 자동확산소화장치, 옥내소화전 등
	단위비용(원/㎡)	26,315
	점유율(%)	1.22
조 경	금액(원)	287,918,000	○ 수목식재(실외조경, 실내조경, 육생비오톱), ○ 편의시설(퍼걸러), 디자인휀스 설치 등
	단위비용(원/㎡)	81,801
	점유율(%)	3.80