충청남도 소방복합시설 조성사업

(충청소방학교 이전 등)

- 단계 : 기본계획(’20. 4월 말 기준) -

충청남도 소방본부 소방행정과, 정해근, 635-5565

일반 현황	소 재 지	충청남도 청양군 비봉면 록평리 12-1 일원
	인구 수	2,194,384명(2019.12.31. 기준)
	공무원 수	84명 / 84명(2020.03.31. 기준)	현원/정원
	재정자립도	34.74%(2020년 도 일반회계 본예산 기준)

사업 개요	기존청사(충청소방학교)
	용도	준공연도				부지면적			기준면적			건물연면적		층수 (지하/지상)				비고
	합계	1993				15,900㎡						4,166㎡		1/3				3개동
	본청
	의회
	기타	1993				15,900㎡						4,166㎡		1/3				3개동
	청사신축 필요성			이전이 필요한 충청소방학교와 임시청사를 활용하여 운영 중인 소방항공구조대, 119광역기동단, 장비정비센터 등 4개 기관(시설)의 집중화를 통한 연계 운영으로 시너지 효과 창출
	사업기간			2017년 ~ 2023년(7년)
	사업수행방식			설계･시공 분리
	추정(예정)가격							계약금액							낙찰율		%
	청사신축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계		2023년		385,154㎡					17,444㎡						9개동 4개 시설물
	본청
	의회
	기타		2023년		385,154㎡					17,444㎡						9개동 4개 시설물

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비	시도비		시군구비	지방채
	합계	79,023			79,023
	2019년 이전	13,000			13,000
	2020년	17,510			17,510
	2021년	16,200			16,200
	2022년 이후	32,313			32,313
	총 사업비안(백만원)
	1) 토지매입비		5,115
	2) 설계비		2,113
	3) 감리비		2,660
	4) 공사비		53,435
	5) 기타부대비		15,700

향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	16.12.	반영	자체
	기본계획 수립	16.10.	수립	자체	원문 공개
	지방재정 중앙 투자심사	17.03.	승인	중앙
	공유재산관리계획	17.07.	승인	지방의회
	설계	18.10.~ 20.10.	진행 중	자체
	타당성조사	19.08.	완료	중앙
	중기재정계획(변경)	19.12.	반영	자체
	기본계획 수립(변경)	19.12.	수립	자체	원문 공개
	지방재정 중앙 투자심사 (재심사)	20.03.	승인	중앙
	착공	21.하반기	예정	자체
	준공	23.하반기	에정	자체