계룡소방서 신축사업

- 단계 : 준공 -

소방행정과, 정해근, 041-635-5565

1. 일반현황

일반현황	소 재 지	계룡시 엄사면 유동리 283번지 일원
	인구 수	착공일	준공일
		43,731명(2018.12.31.기준)	42,803명(2020.06.30 기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		86명 / 86명	115명 / 115명
	재정자립도	착공일	준공일
		30.4% (2019년 본예산 기준)	34.4% (2020년 본예산 기준)

사업개요	기존청사
	용도	준공연도				부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)				비고
	합계	없 음
	본청
	의회
	기타
	청사신축 필요성			신설 소방서의 소방청사 신축을 통한 근무환경 개선 및 안전인프라 구축
	사업기간			착공당시			2017년 ~ 2020년(4년)
				준공			2017년 ~ 2020년(4년)
	사업수행방식			설계･시공 분리
	추정(예정)가격			7,082백만 원					계약금액			6,065백만 원			낙찰율		85.63%
	청사신축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계		2019		12,055㎡					3,608㎡			1/3
	본청
	의회
	기타		2019		12,055㎡					3,608㎡			1/3

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비			시군구비		지방채
	합계	11,579				11,579
	2016년	400				400
	2017년	4,165				4,165
	2018년	7,014				7,014
	총사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비							비고
			계		2017		2018	2019
	합계		11,579		400		4,165	7,014
	1) 토지매입비		1,500				1,500
	2) 설계비		400		400
	3) 감리비		160				160
	4) 공사비		9,500				2,500	7,000
	5) 기타부대비		19				5	14

향후계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2015.12.	반영	자체
	사업기본계획	2016.05.	수립	자체	원문 공개
	지방재정 투자심사	2016.08.	승인	중앙
	공유재산관리계획	2017.04.	승인	지방의회
	설계	2018.08.	완료	자체
	착공	2019.01.	착공	자체
	준공	2020.07.	준공	자체

2. 공종별 공사비

(부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합 계	금액(원)	9,181,909,570
	단위비용(원/㎡)	2,608,705
	점유율(%)	100
건 축 토 목 기 계	금액(원)	7,364,391,930	◦ (골조) 철근콘크리트 등 ◦ (외부) 알루미늄커튼월(THK24 로이복층유리), 타공패널, 화강석 등 ◦ (내부) 바닥, 벽, 천정 등 - 바닥 : 화강석, 데코타일, 석재타일, 자기질 타일 등 - 벽 : 친환경수성페인트, 고급벽지, 도기질 타일, 다채무늬 도료 등 - 천정 : 친환경텍스, 퍼라이트계 뿜칠, 고급 천장지, 열경화성수지 천장재 등 ◦ (토목) 토공사, 우수공사, 오수공사, 포장공사, 상수공사, 옹벽공사, 자연석 쌓기, 차선도색 등 ◦ (주요장비) 저탕식 전기온수기, 급수펌프(부스터펌프), 배수펌프, 급배기팬, 저수조, 지열순환펌프, 빗물재이용시설, 냉·난방기, TAB, 엘리베이터 등 ◦ (주요시설) 소방차고, 사무실, 출동대기실, 식당, 대회의실, 체력단련실, 심신안정실, 공기호흡기충전실, 세탁실, 창고, 기계실, 발전기실, 전기실 등
	단위비용(원/㎡)	2,092,323
	점유율(%)	80.21
전 기	금액(원)	829,549,670	◦ 수배전시설, 태양광발전시설, 비상발전기, 전력간선, 접지설비, 원격검침설비 등
	단위비용(원/㎡)	235,686
	점유율(%)	9.03
통 신	금액(원)	350,135,970	◦ 통합배선설비, CCTV설비, 방송설비, 통신접지설비
	단위비용(원/㎡)	99,478
	점유율(%)	3.81
소 방	금액(원)	153,170,600	◦ 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 비상방송설비, 유도등설비, 비상조명등, 소화기, 자동확산소화장치, 옥내소화전 등
	단위비용(원/㎡)	43,518
	점유율(%)	1.67
조 경	금액(원)	484,661,400	◦ 수목식재(실외조경, 실내조경, 육생비오톱) ◦ 편의시설(퍼걸러), 디자인휀스 설치 등
	단위비용(원/㎡)	137,699
	점유율(%)	5.28