내포신도시 개발사업 월간공정 보고(01월)

《 공공ㆍ기반시설 》                                                 (2022. 01. 31. 기준)

공사명	공 사 개 요				공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
							전월	금월	누계 계획
▣ 신도시사업 전체 공정률						‘07.07 ~ ‘22.12	98.7	0.1	98.8 98.9	· 부지조성 : 97.32% · 조 경 : 99.10% · 전 기 : 100 % · 기반시설 : 98.76%
▣ 부지조성		(9,952천㎡)			2581		97.28	0.04	97.32	(9,685천㎡)	면적기준
2-1공구 조성공사(충개공)	․면적 984천㎡				344	’09.05 ~ ’13.11	100	-	100 100	·공사준공	현대 건설
2-2공구 조성공사(충개공)	․면적 889천㎡				424	’10.04 ~ ’13.12	100	-	100 100	(특화2, 근린5호, 병원/복지)	극동 건설
2-3공구 조성공사(충개공)	․면적 1,909천㎡				321	’10.11 ~ ’13.12	100	-	100 100	(보훈공원,단독주택용지, 대학1)	현대 아산
1-1공구 조성공사(LH)	․면적 1,501천㎡				509	’11.08 ~ ’14.10	100	-	100 100	(특화상업용지1, 초등학교2용지 일대)	코오롱 글로벌
1-3공구 조성공사(LH)	․면적 372천㎡				165	’13.11 ~ ’16.07	100	-	100 100	(단독주택용지 일대)	명지 건설
3-2공구 조성공사(LH)	․면적 1,185천㎡				318	’12.01 ~ ’15.07	100	-	100 100	(유보지 2 일대)	동성 건설
1-2공구 조성공사(LH)	․면적 1,292천㎡				450	‘16.08 ~ ‘20.05	100	-	100 100	·공사준공	지평 토건
3-1공구(산단) 조성공사(LH)	․면적 1,542천㎡						100	-	100 100	·공사준공
1-2공구 중 골프장구역	․면적 278천㎡				50	‘21.11 ~ ‘22.11	2.5	1.5	4.0 7.0	(공공청사, 공원녹지, 도로 등)	청담 건설
▣ 조 경			(4,779천㎡)		1,359		99.03	0.07	99.10	(4,736천㎡)	면적기준
충개공 조경공사	․2구역 1,062천㎡				349	’12.02 ~ ’17.05	100	-	100 100	·공사준공	승화 건설
보훈공원 조성공사(충공)	․면적 51천㎡				29	’15.10 ~ ’16.11	100	-	100 100	·공사준공	서진 산업
LH 1단계 조경공사	․면적 75천㎡				78	’12.10 ~ ’15.12	100	-	100 100	·공사준공	유진건설 원광건설
LH 2단계 조경공사	․면적 2,618천㎡				370	‘14.12 ~ ‘15.12	100	-	100 100	·공사준공	대방 건설
홍예공원 조성공사(LH)	․면적 275천㎡				188	‘14.09 ~ ‘15.12	100	-	100 100	·공사준공	구일종합건설
3단계 1공구 조경공사	․면적 148천㎡				83	‘18.12 ~ ‘20.05	100	-	100 100	·공사준공	네오선진건설
3단계 2공구 조경공사	․면적 330천㎡				146	‘19.12 ~ ‘22.05	86.0	1.0	87.0 89.0	·식재공사 및 시설공사	대림종합건설
3단계 3공구 조경공사	․면적 220천㎡				116	‘19.12 ~ ‘21.06	100	-	100 100	·식재공사 및 시설공사	대림종합건설
▣ 전 기					286.5		100.00	-	100.00	(286.5억원)	금액기준
충개공 전기공사	․인수인계완료				127	’12.02 ~ ’15.02	100	-	100 100	· 공사준공	삼흥 전력
LH 1단계 전기공사	․인수인계완료				28	’12.09 ~ ’14.06	100	-	100 100	· 공사준공	금평 전설
LH 2단계 전기공사	․인수인계완료				90	‘14.08 ~ ’15.12	100	-	100 100	· 공사준공	금원 전설
LH 3-1공구 전기공사	․가로등 539기 ․신호등 12개소				21	‘18.05 ~ ‘20.05	100	-	100 100	· 가로등 설치	동조 전력
LH 1-2공구 전기공사	․가로등 152기 ․신호등 5개소				8.5	19.07 ~ ‘21.1	100	-	100 100	· 공사 준공	유림 전기
LH 3-1공구 전기공사(공원)	․가로등 393기				8.0	‘20.02 ~ ‘21.05	100	-	100 100	· 가로등 설치	성우 이엔씨
LH 1-2공구 전기공사(공원)	․가로등 166기				4.0	‘20.09 ~ ‘21.03	100	-	100 100	· 가로등 설치	계룡 전기
▣ 기반시설					4,380		98.73	0.03	98.76	(4,326억원)	금액기준
스마트도시 1단계 공사	․면적 1,836천㎡				20	‘13.01 ~ ‘14.09	100	-	100 100	· 공사준공	명성 씨앤에스 외 1개사
스마트도시 2단계 공사	․면적 4,044천㎡				90	‘15.01 ~ ‘15.12	100	-	100 100	· 공사준공	센텍 외 2개사
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일 중 1단계22천톤/일				705	’10.10 ~ ’13.10	100	-	100 100	· 공사준공(1단계)	G S 건설
지 구 외 생태하천(1단계)	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞				35	’10.12 ~ ’13.12	100	-	100 100	· 공사준공	성보 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km				1,459	’11.07 ~ ’15.06	100	-	100 100	· 공사준공	동성 건설
제2진입도로	․예산측 3.39km				424	‘15.10 ~ ‘18.12	100	-	100 100	· 공사준공	하남 종합
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로22.1㎞				966	’10.10 ~ ’22.12	95.0	-	95.0 100	· 유지관리운전 시행	브니엘네이처
첨단산업단지 진입도로	․홍성측 3.90km				494	‘18.03 ~ ‘22.02	100	-	100 100	· 공사완료 (임시개통 중)	일군 토건
스마트도시 3단계 공사	․도시통합운영센터				53	‘20.06 ~ ‘21.11	100	-	100 100	· 공사준공	지수 종합 건설
스마트도시 3단계 공사	․정보통신공사				104	‘20.07 ~ ‘22.07	93.0	1.0	94.0 100	· 공사중	중흥 건설
한옥마을 조성사업	․면적 46천㎡				30	‘20.05 ~ ‘21.11	100	-	100 100	· 공사준공	지아이건설

《 토지이용계획도 》