◉산업통상자원부고시제2023-141호

전원개발사업 실시계획 승인(변경)

산업통상자원부 고시 제2022-10호(’22.01.14)로 고시한 바 있는 ①154kV 영신변전소 및 분기 송전선로 건설사업, ② 산업자원부 고시 제2021-199호(’21.11.25), 제2022-32호(22.02.16) 및 제2022-194호(22.11.23)로 고시한 바 있는 345kV 신정읍변전소 및 입·출입 송전선로 건설사업, ③산업통상자원부 고시 제2022-10호(’22.01.14), 산업통상자원부 고시 제2022-194호(’22.11.22)로 고시한 바 있는 154kV 정촌분기 송전선로 건설사업, ④산업통상자원부 고시 제2015-120호(’15.06.22), 산업통상자원부 고시 제2018-40호(’18.06.16), 산업통상자원부 고시 제2019-205호(’19.12.13), 산업통상자원부 고시 제2021-182호(’21.11.09), 산업통상자원부 고시 제2022-194호(’22.11.22)로 고시한 바 있는 345kV 북당진-신탕정 송전선로 건설공사(1구간), ⑤산업통상자원부 고시 제2014-62호(’14.04.01), 제2015-127호(’15.06.26), 제2016-76호(’16.04.25), 제2019-137호(’19.08.30)로 고시한 바 있는 345kV 북당진-신탕정(2구간) 송전선로 건설사업, ⑥산업통상자원부 고시 제2023-25호(’23. 2. 13)로 고시한 바 있는 154kV 신청주-문백 송전선로 건설사업, ⑦산업통상자원부 고시 제2019-139호(2019.8.30.), 산업통상자원부 고시 제2021-113호(’21.6.28)로 고시한바 있는 345kV 포스파워 송전선로 건설사업을  위한 전원개발사업 실시계획에 대하여 전원개발촉진법 제5조 제2항의 규정에 의하여 변경된 내용을 다음과 같이 고시하며, 동일 건에 대하여 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 지형도면 고시합니다. 관계도서는 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의거 토지이용규제정보시스템(http://luris.molit.go.kr)에서 열람이 가능하고 한국전력공사 해당 사업소 및 삼척블루파워(주)에 비치하여 일반인에게 보입니다. 다만, 국가공간정보 보안관리규정(산업통상자원부훈령 제221호) 제9조 및 제10조에 의거 전력․통신․가스 등 공공의 이익 및 안전과 밀접한 관계가 있는 국가기간시설이 포함된 지도는 공개제한 대상으로 분류되어 있어 도면에 표기하지 않습니다.

2023년  7월  일

산업통상자원부장관

①154kV 영신변전소 및 분기 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 :154kV 영신변전소 및 분기 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 직무대행 부사장 이정복

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)

3. 변경사유

가. 잔여지 매수에 따른 부지면적 변경

나. 토지분할(영신리 550, 549-2 519)에 따른 토지 및 물건 명세 변경

4. 변경내역

가. 사업구역 면적

변 경 전	변 경 후	비 고
13,228 ㎡	13,543 ㎡	315 ㎡ 증가

○ 변전소

구분	소 재 지	지목	원지적 (㎡)	편입지적(㎡)			비 고
				당 초	변 경	증 감
1	해남군 옥천면 영신리 549-2	답	2,658	886	0	-886	고시해제
2	해남군 옥천면 영신리 549-5	답	1,201	0	1,201	1,201	추가고시 및 면적변경
3	해남군 옥천면 영신리 550	답	1,785	665	665	-665	고시해제
4	해남군 옥천면 영신리 550-2	답	665	0	665	665	추가고시
5	해남군 옥천면 영신리 519	답	3,884	2,635	0	-2,635	고시해제
6	해남군 옥천면 영신리 519-1	답	2,635	0	2,635	2,635	추가고시
소 계				3,521	3,836	315

5. 도시·군계획시설(전기공급설비) 결정(변경)조서 : 변경없음

6. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소

[변전소]

토 지 등 의 명 세 (토 지)
① 번호	② 소재지	③ 지 번	④ 지목	지 적(㎡)			소 유 자		소유권 이외의 권리			⑫ 비 고 (취득권리)
				⑤ 원지적	⑥ 편입 지적		⑦ 주 소	⑧ 성 명	⑨ 권리 종류	권 리 자
					당초	변경				⑩ 주 소	⑪ 성 명
■ 154kV 영신변전소
1	전라남도 해남군 옥천면 영신리	549-2	답	2,658	886	0	전라남도 해남군 옥천읍 신계리 208	진인순				고시해제 (소유권)
2	전라남도 해남군 옥천면 영신리	549-5	답	1,201	0	1,201	전라남도 나주시 전력로 55	한국전력 공사				추가고시 및 면적변경 (소유권)
3	전라남도 해남군 옥천면 영신리	550	답	1,785	665	0	서울특별시 관악구 청룡길 78 104-1201	신철하				고시해제 (소유권)
							서울특별시 성북구 송샘로7길 49,2층(정릉동)	신일균
							경기도 시흥시 신천6길 38 가-201(희망빌라)	신자균
							서울특별시 도봉구 도당로 13 101동 504호	신종금
4	전라남도 해남군 옥천면 영신리	550-2	답	665	0	665	전라남도 나주시 전력로 55	한국전력 공사				추가고시 (소유권)
5	전라남도 해남군 옥천면 영신리	519	답	3,884	2,635	0	전라남도 해남군 계곡면 법곡길 122	이용희				고시해제 (소유권)

토 지 등 의 명 세 (토 지)
① 번호	② 소재지	③ 지 번	④ 지목	지 적(㎡)			소 유 자		소유권 이외의 권리			⑫ 비 고 (취득권리)
				⑤ 원지적	⑥ 편입 지적		⑦ 주 소	⑧ 성 명	⑨ 권리 종류	권 리 자
					당초	변경				⑩ 주 소	⑪ 성 명
■ 154kV 영신변전소
6	전라남도 해남군 옥천면 영신리	519-1	답	2,635	0	2,635	전라남도 나주시 전력로 55	한국전력 공사				추가고시 (소유권)
7	전라남도 해남군 옥천면 영신리	517-1	임	1,574	1,574	1,574	전라남도 나주시 전력로 55	한국전력 공사				소유권
8	전라남도 해남군 옥천면 영신리	579	도	5,025	341	341	국					사 용

②345kV 신정읍변전소 및 입·출입 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 345kV 신정읍변전소 및 인·출입 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 직무대행 부사장 이정복

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)

3. 변경사유

가. 지형사정에 의한 편입토지 잔여지 매수

나. 등록사항 대상토지 정정에 따른 편입면적 변경

다. 계통계획 변경에 따른 사업기간 조정

라. 기설선로 전선교체에 따른 선종 변경

4. 변경내역

가. 사업개요

변 경 항 목		변 경 전	변 경 후	비 고
사 업 기 간		`19.06∼`24.10(65개월)	`19.06∼`27.12(103개월)	38개월증가
변전소형태		345kV 옥외GIS형	좌동	변경없음
변전설비		변압기 345kV 3Bank 차단기 362kV 11CB 차단기 170kV 17CCT	좌동	변경없음
선로길이		4.908㎞	좌동	변경없음
전 선		ACSR 480㎟×복도체(4B)×2회선 HSTACIR/AW 410㎟×단도체(S)×4회선 HSTACIR/AW 330㎟×단도체(S)×2회선	ACSR 480㎟×복도체(4B)×2회선 ASCC/TW 520㎟×단도체(S)×4회선 ASCC/TW 430㎟×단도체(S)×2회선	선종변경
철탑기수		15기 (345kV 5기, 154kV 10기)	좌동	변경없음
사 업 면 적	변전소	33,175㎡	33,498㎡	323㎡증가
	철 탑	4,044㎡	4,044㎡	변경없음
	선하지	76,920㎡	76,920㎡	변경없음
	계	114,139㎡	114,462㎡	323㎡증가

나. 면적변경

(1) 변 전 소

번 호	소 재 지	지목	원지적 (㎡)	편입지적(㎡)			비 고
				당 초	변 경	증 감
6	정읍시 용계동 산32-1	도	160	136	160	+24	면적변경
15	정읍시 용계동 산33	임	8,566	447	746	+299	면적변경
소 계				583	906	323

다. 사업기간

변 경 전	변 경 후	비 고
‘19.06 ～ ’24.10 (65개월)	‘19.06 ～ ’27.12 (103개월)	38개월 증가

라. 선종변경

○ 154kV 신정읍분기T/L

변 경 전	변 경 후	비 고
HSTACIR/AW 330㎟(하단)	ASCC/TW 430㎟(하단)	선종변경
HSTACIR/AW 410㎟(상단)	ASCC/TW 520㎟(상단)

○ 154kV 신정읍-소성T/L 인출변경

변 경 전	변 경 후	비 고
HSTACIR/AW 330㎟	ASCC/TW 430㎟	선종변경

5. 도시·군계획시설(전기공급설비) 결정(변경)조서 : 별항

6. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 도시·군계획시설(전기공급설비) 결정(변경)조서

1. 변 전 소

(단위 : ㎡)
사업명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규모(면적)			비 고
				당 초	변 경	증 감
345kV 신정읍변전소 및 인·출입 송전선로 건설사업	변경	변전소	전라북도 정읍시 용계동 811-1	119	119	0	계획관리지역
			전라북도 정읍시 용계동 811	2	2	0	계획관리지역
			전라북도 정읍시 용계동 735-1	22	22	0	계획관리지역
			전라북도 정읍시 용계동 산32-2	79	79	0	계획관리지역
			전라북도 정읍시 용계동 735-2	348	348	0	계획관리지역
			전라북도 정읍시 용계동 산32-1	136	160	24	계획관리지역
			전라북도 정읍시 용계동 735-3	1,321	1,321	0	계획관리지역
			전라북도 정읍시 용계동 734	3,810	3,810	0	계획관리지역
			전라북도 정읍시 용계동 791-4	936	936	0	계획관리지역
			전라북도 정읍시 용계동 731	1,046	1,046	0	계획관리지역
			전라북도 정읍시 용계동 730-3	831	831	0	계획관리지역
			전라북도 정읍시 용계동 733	4,097	4,097	0	계획관리지역
			전라북도 정읍시 용계동 산32	19,837	19,837	0	계획관리지역
			전라북도 정읍시 용계동 732	144	144	0	계획관리지역
			전라북도 정읍시 용계동 산33	447	746	299	계획관리지역
소 계				33,175	33,498	323

[별항] 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소

토 지 등 의 명 세 (토 지)
① 번호	② 소재지	③ 지 번	④ 지 목	지 적(㎡)			소 유 자		소유권 이외의 권리			⑫ 비 고 (취득권리)
				⑤ 원지적	⑥ 편입 지적		⑦ 주 소	⑧ 성 명	⑨ 권리 종류	권 리 자
					당초	변경				⑩ 주 소	⑪ 성 명
■ 345kV 신정읍변전소 및 인출입 송전선로 건설사업 (345kV 신정읍변전소)
6	정읍시 용계동	산32-1	도	160	136	160	전라북도 정읍시 연지동 137	전용석				면적변경 (소유권)
							전라북도 정읍시 용계동 200	권재술
							전라북도 정읍시 용계동 200	권중술
							전라북도 부안군 백산면 용계리 591	권재율
15	정읍시 용계동	산33	임	8566	447	746	정읍시 샘골로 95(수성동)	최경순	구분 지상권	전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)	한국전력공사	면적변경 (소유권)
							정읍시 샘골로 95(수성동)	오경태
							정읍시 샘골로 95(수성동)	오세복

③154kV 정촌분기 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 정촌분기 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 직무대행 부사장 이정복

전라남도 나주시 전력로 55

3. 변경사유

가. 장기 송변전설비계획 적정성 검토 결과 준공목표 변경으로 인한 사업기간 연장

나. 경남지역 취약계통 해소를 위한 송변전설비계획 변경(선종변경)

4. 변경내역

가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사 업 기 간	2021.09∼2023.10(26개월)	2021.09∼2025.12(52개월)	26개월 연장
전 력 선	ASCR330㎟ x S x 2C	PIAC330㎟ x S x 2C

나. 기타 변경사항 없음

④345kV 북당진- 신탕정 송전선로 건설사업(1구간)(변경)

1. 사업의 명칭 : 345kV 북당진-신탕정 송전선로 건설사업(1구간)

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 직무대행 부사장 이정복

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)

3. 변경사유

가. 제 10차 전력수급기본계획 및 해상 공사용 가설 교량 철거 기간 반영

○ 서해대교 횡단구간 지중송전선로 완공(‘24.12) 후 가설 교량 철거

4. 변경내역

가. 사업개요

변 경 항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
사 업 기 간	‘15.06 ∼‘23.12 (103개월)	‘15.06 ∼ ‘26.06 (133개월)	30개월 증가

나. 기타 : 다른 항목 변경사항 없음

⑤345kV 북당진-신탕정(2구간) 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 345㎸ 북당진-신탕정(2구간) 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)

3. 변경사유

가. 제 10차 전력수급기본계획 사업기간 반영

나. 아산지역 기설 154kV 송전선로 정비 필요

4. 변경내역

가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2014. 02 ∼ 2023. 12 (119개월)	2014. 02 ∼ 2025. 12 (143개월)	24개월 연장

나. 기타 : 다른 항목 변경사항 없음

⑥154kV 신청주-문백 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 345kV 신청주-문백 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 직무대행 부사장 이정복

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)

3. 변경사유

가. 편입토지 증여, 매매, 경매로 인한 소유자 및 관계인 변경

나. 경계 정정, 분할 등으로 인한 원면적 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2021.04.01.∼ 2025.10.31	2021.04.01.∼ 2025.10.31	변동 없음
편입면적	308,480㎡	308,480㎡	변동 없음
소유자수	권기범외 349명	권기범외 350명	1명 증가
관계인수	한국전력공사외 76처	한국전력공사외 50처	26처 감소

5. 도시계획시설(전기공급설비) 결정(변경)조서 : 변경 없음

6. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
1 (5∼6)	당초	충북 청주시 흥덕구 신성동	157-1	답	3,525	11	충북 청주시 서원구 성봉로 88, 103동 102호(성화동,성화주공1단지아파트)	한재열				구분지상권 (상공16-54m)
							충북 청주시 흥덕구 신성로108번길 46(신성동)	한재근
	변경	충북 청주시 흥덕구 신성동	157-1	답	3,525	11	충북 청주시 서원구 성봉로 88, 103동 102호(성화동,성화주공1단지아파트)	한재열	가압류	충북 청주시 서원구 신성화로 8, 302동 806호(성화동,구룡산휴먼시아3단지아파트)	유희남	구분지상권 (상공16-54m)	관계인 추가
							충북 청주시 흥덕구 신성로108번길 46(신성동)	한재근
2 (16∼17)	당초	충북 청주시 흥덕구 옥산면 소로리	산112	임	595	22	충북 청원군 옥산면 중신리	박봉성				구분지상권 (상공30-76m)
	변경	충북 청주시 흥덕구 옥산면 소로리	산112	임	595	22	충북 청원군 오창면 중신리	박봉성				구분지상권 (상공30-76m)	소유자 주소 정정
3 (23)	당초	충북 청주시 흥덕구 옥산면 호죽리	산50	임	31,824	441	충북 청주시 모충동 425-150	연해천	지상권	서울시 강남구 삼성동 167	한국 전력 공사	철탑 (지상권 또는 소유권)
						2,274						구분지상권 (상공17-86m)
	변경	충북 청주시 흥덕구 옥산면 호죽리	산50	임	31,795	441	대전 대덕구 대청로 43, 110동 203호(신탄진동,동일스위트리버스카이1단지)	연병준	지상권	서울시 강남구 삼성동 167	한국 전력 공사	철탑 (지상권 또는 소유권)	분할로 원면적 변경 증여로 소유권 변경
						2,274	경기 안양시 동안구 동안로 209, 307동 1508호(비산동,관악아파트)	연병륜				구분지상권 (상공17-86m)
4 (27) (28)	당초	충북 청주시 청원구 오창읍 구룡리	산31	임	43,744	299	대전광역시 서구 둔산북로 56, 12층(둔산동)	주식 회사 레즐러	가압류	서울 중구 서소문로 115(서소문동,한산빌딩)	한전산업개발주식회사	철탑 (지상권 또는 소유권)
									가압류	대전시 서구 둔산중로78번길 15 (둔산동,대전고등검찰청923호(강남세무서)	대한 민국
									가압류	대전시 유성구 테크노2로 187, 307호 (용산동,미건테크노월드2차)	주식 회사 다산 에너지
									가압류	서울시 종로구 김상옥로 29 (연지동,서울보증보험)	서울보증보험주식회사
									임의경매개시결정	천안시 서북구 직산읍 부송로 385-17	주식 회사 신한이앤아이
									가압류	대구시 동구 첨단로 7(신서동)	신용 보증 기금
									가압류	서울시 영등포구 은행로 37 (여의도동)	자본재공제조합
									가압류	영덕군 강구면 영덕대게로 68	강구 수산업협동 조합
									가압류	서울시 종로구 김상옥로 29 (연지동,서울보증보험)	서울 보증 보험 주식 회사
									가압류	서울시 은평구 증산로 333, 101동 1108호 (증산동,디엠씨월드파크)	최미경
									임의경매개시결정	청주시 서원구 가장로 396-6 (장암동)	청주산림조합
									가압류	경기도 고양시 일산동구 일산로 206, 305동 103호 (마두동,백마마을3단지아파트)	이환희
									가압류	진주시 동진로 430 (충무공동,중소기업진흥공단)	중소벤처기업진흥공단
									가압류	경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로 54번길 7-3	주식 회사 윌링스
									압류		서대전세무서
									압류		청주시청원구
									압류	강원도 원주시 건강로 32 (반곡동,국민건강보험공단)	국민 건강 보험 공단
									근저당권	청주시 상당구 상당로 15 (남문로 1가동)	청주 산림 조합
									지상권
									근저당권	천안시 서북구 직산읍 부송로 385-17	주식 회사 신한이앤아이
									근저당권가처분	대구시 동구 첨단로 7 (신서동)	신용 보증 기금
									근저당권가처분	진주시 동진로 430(충무공동,중소기업진흥공단)	중소벤처기업진흥공단
									근저당권가처분	서울시 영등포구 은행로 37 (여의도동)	자본재공제조합
									근저당권	광주시 북구 추암로 69 (대촌동)	주식 회사 탑인프라
									근저당권가처분	대구시 동구 첨단로 7 (신서동)	신용 보증 기금
									근저당권가처분	진주시 동진로 430 (충무공동,중소기업진흥공단)	중소벤처기업진흥공단
									근저당권가처분	서울시 영등포구 은행로 37 (여의도동)	자본재공제조합
									근저당권	천안시 서북구 월봉1길 15, 110동 804호 (쌍용동,쌍용자이아파트)	정진도
									근저당권가처분	대구시 동구 첨단로 7 (신서동)	신용 보증 기금
						428			근저당권가처분	진주시 동진로 430(충무공동,중소기업진흥공단)	중소벤처기업진흥공단	철탑 (지상권 또는 소유권
						2,480			근저당권가처분	서울시 영등포구 은행로 37 (여의도동)	자본재공제조합	구분지상권 (상공18-52m)
	변경	충북 청주시 청원구 오창읍 구룡리	산31	임	43,744	299	충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 760, 110동 3902호(오창롯데캐슬더하이스트)	박동명	근저 당권	충북 증평군 증평읍 광장로 27	증평 농업 협동 조합	철탑 (지상권 또는 소유권)	경매로 소유권 변경 관계인 변경
						428			지상권			철탑 (지상권 또는 소유권
						2,480						구분지상권 (상공18-52m)
5 (35∼36)	당초	충북 청주시 청원구 오창읍 양청리	산89-1	임	7,523	1,274	충북 청주시 영운동 118 정화아파트 나동 302호	전희원	지상권	서울시 강남구 삼성동 167	한국 전력 공사	구분지상권 (상공22-84m)
	변경	충북 청주시 청원구 오창읍 양청리	산89-1	임	7,523	1,274	충북 청주시 흥덕구 강내면 탑연월곡길 76-9, 202호	주식 회사 두명	근저 당권	충북 청주시 상당구 1순환로 1265 (용암동)	청주 농업 협동 조합	구분지상권 (상공22-84m)	매매로 소유권 변경 관계인 변경
									근저 당권	충북 청주시 흥덕구 대농로 17, 102동 1305호 (복대동,신영지웰시티1차아파트)	황지희
6 (35∼36)	당초	충북 청주시 청원구 오창읍 양청리	산89-3	임	64,675	187	충북 청주시 영운동 118 정화아파트 나동 302호	전희원	지상권	서울시 강남구 삼성동 167	한국 전력 공사	구분지상권 (상공22-84m)
	변경	충북 청주시 청원구 오창읍 양청리	산89-3	임	10,000	187	충북 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 382	주식 회사 미주	근저 당권	충북 청주시 상당구 1순환로 1265 (용암동)	청주농업협동조합	구분지상권 (상공22-84m)	분할로 원면적 정정 매매로 소유권 변경 관계인 변경
									근저 당권	충북 청주시 흥덕구 대농로 17, 102동 1305호 (복대동,신영지웰시티1차아파트)	황지희
7 (36)	당초	충북 청주시 청원구 오창읍 양청리	산89-4	임	54,675	524	충북 청주시 영운동 118 정화아파트 나동 302호	전희원	지상권	서울시 강남구 삼성동 167	한국 전력 공사	철탑 (지상권 또는 소유권
						2,372						구분지상권 (상공22-84m)
	변경	충북 청주시 청원구 오창읍 양청리	산89-4	임	54,675	524	충북 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 382	주식 회사 미주	지상권	서울시 강남구 삼성동 167	한국 전력 공사	철탑 (지상권 또는 소유권	매매로 소유권 변경 관계인 변경
						2,372			근저당권	충북 청주시 흥덕구 대농로 17, 102동 1305호 (복대동,신영지웰시티1차아파트)	황지희	구분지상권 (상공22-84m)
8 (37)	당초	충북 청주시 청원구 오창읍 양청리	5-1	임	43,179	507	충북 청주시 흥덕구 비하로 27, 214호(비하동,덕원빌딩)	순천박씨만수당공파종중				철탑 (지상권 또는 소유권
							대전광역시 서구 복수동로52번길 56(복수동)	운하리조트주식회사
						2,837	충북 청주시 흥덕구 비하로 27, 214호(비하동,덕원빌딩)	순천박씨만수당공파종중				구분지상권 (상공25-84m)
							대전광역시 서구 복수동로52번길 56(복수동)	운하리조트주식회사
	변경	충북 청주시 청원구 오창읍 양청리	5-1	임	43,355	507	충북 청주시 흥덕구 비하로 27, 214호(비하동,덕원빌딩)	순천박씨만수당공파종중				철탑 (지상권 또는 소유권	경계 정정으로 원면적 정정
							대전광역시 서구 복수동로52번길 56(복수동)	운하리조트주식회사
						2,837	충북 청주시 흥덕구 비하로 27, 214호(비하동,덕원빌딩)	순천박씨만수당공파종중				구분지상권 (상공25-84m)
							대전광역시 서구 복수동로52번길 56(복수동)	운하리조트주식회사

⑦345㎸ 포스파워 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 345kV 포스파워 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 삼척블루파워(주) 옥인환

강원특별자치도 삼척시 중앙로 200(남양동) 유안타증권빌딩 1층

3. 변경사유 : 선하지 미등기(토지대장 상) 필지(소유자를 특정할 수 없고, 절대적불확지)에 대한

권원확보를 위한 사업기간 변경

4. 변경내역

가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 07 ∼ 2023. 06 (48개월)	2019. 07 ∼ 2023. 12 (54개월)	6개월 연장

나. 기타 : 다른 항목 변경사항 없음