내포 공동주택 건설현황

□ 공동주택 건설현황 총괄표                      ‘23. 8월말 (단위: 세대수, ㎡)

구 분	개발계획 (A)	건설추진				비 고
		계(B)	준 공	공사진행	허가 등
주택합계	40,023	31,982	17,579	6,810	7,593	세대수 기준
공동주택	36,263 (36블록)	31,028 (31블록)	17,579 (19블록)	5,855 (6블록)	7,593 (8블록)	RM 1-1,2, RM3,RM4,RH14
주상복합	3,760 (3블록)	955 (1블록)	-	955 (1블록)	-	RC1, RC3

○ 공동주택 건설 추진현황

위 치		명칭(시행사)	세대수	추 진 상 황
홍 성 (7)	RH 5-2블록	모아메가시티1차	870	· 세대내부마감 및 외부 부대토목공사 중 (공정율 82%) · ’24년 2월 준공예정
	RH 5-3블록	모아메가시티2차	836	· 지상층 골조 및 세대내부마감 공사 중 (공정율 63.5%) · ’24년 8월 준공예정
	RC 2블록	반도유보라	955	· 지하층~기준층 골조공사 중 (공정율 42.6%) · ’24년 12월 준공예정
	RM 14블록	대방 디에트르	1,474	· 지하층 및 지상층 골조공사 중 (공정율 13%) · ’25년 10월 준공예정
	RL 6블록	대방산업개발	304	· ’23. 6. 사업승인 신청(현재 검토 중)
	RH 12	한국토지주택공사	1,706	· 한국토지주택공사 사업 시행 (준비중)
	RH 16	충남개발공사	1,068	· 설계완료 중앙투자심사 6월 추진예정 · ’24년 착공 예정 (리브투게더 사업)
예 산 (8)	RH 4-1블록	이지더원3차	954	· 골조공사 및 내장공사 중 (공정율 78.38%) · ’24년 3월 준공예정
	RH 3블록	중흥건설	1,120	· 지하&지상층 골조공사중 (공정율 55.29%) · ’24년 9월 4일 준공예정
	RH 4-2블록	대광로제비앙	601	· 지하&지상층 골조공사중 (공정율 18.80%) · ’25년 5월 준공 예정
	RH 13블록	동원 비스타	696	· ’23년 1월 주택건설사업계획 승인 · ’24년 착공 예정
	RH 2-1블록	제일 풍경채	1,138	· ’23년 4월 경관건축공동위원회 심의
	RH 2-2블록	대우 푸르지오	755	· ’23년 5월 경관건축공동위원회 심의
	RH15	한국토지주택공사	1,062	· 한국토지주택공사 사업 시행 (준비중)
	RM5	한국토지주택공사	864	· 한국토지주택공사 사업 시행 (준비중)