충청남도 동물위생시험소 태안지소 신축사업

- 단계 : 기본계획 -

동물위생시험소 운영지원과, 장훈, 041-635-7047

일반 현황	소 재 지	충청남도 태안군 태안읍 인평리 213-1
	인구 수	2,126,374명(2023.6.30.기준)
	공무원 수	7명/ 8명(2023.7.21.기준)	현원/정원
	재정자립도	33.6%(2023년도 본예산 기준)

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도				부지면적			기준면적			건물연면적		층수 (지하/지상)				비고
	합계	1993				4,707㎡						991.92㎡		지하1층/지상1층				3개동
	본청
	의회
	기타	1993				4,707㎡						991.92㎡		지하1층/지상1층				3개동
	청사신축 필요성			업무공간이 협소하여 행정 및 실험 공간 분리에 한계가 있어 사고 시 피해가 가중되기에 예방이 필요하며, 동물위생시험소 부여지소가 1985년 건축 이후 노후화되어 실험실 안전이 취약하여 개선이 시급
	사업기간			2024 ~ 2025 (2년)
	사업수행방식			설계･시공 분리
	추정(예정)가격							계약금액							낙찰율		%
	청사신축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계		2025		4,707㎡					1,500㎡			지상2층			1~2개동
	본청
	의회
	기타		2025		4,707㎡					1,500㎡			지상2층			1~2개동

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비	시도비		시군구비	지방채
	합계				7,453
	2024				428
	2025				7,025
	총사업비(백만원)
	1) 토지매입비		-			도유지
	2) 설계비		404
	3) 감리비		757
	4) 공사비		5,950
	5) 기타부대비		342
	합계		7,453

향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	기본계획 수립	`21. 8.	수립	자체	원문 공개
	중기지방재정계획	`22. 10.	반영	자체
	지방재정 투자심사	`23. 6.	승인	중앙
	공유재산심의	`23. 8.	예정	자체
	공유재산관리계획	`23. 9.	예정	도의회
	설계	`23.상반기	예정	자체
	착공	`24.상반기	예정	자체
	준공	`24.하반기	예정	자체