내포 공동주택 건설현황

□ 공동주택 건설현황 총괄표                       ‘23. 12월말 (단위: 세대수)

구 분	개발계획 (A)	건설추진				비 고
		계(B)	준 공	공사진행	허가 등
주택합계	40,023	33,418	17,579	6,810	9,029	세대수 기준
공동주택	36,263 (36블록)	32,464 (34블록)	17,579 (19블록)	5,855 (6블록)	9,029 (9블록)	RM 1-1,2, RM3, RH14
주상복합	3,760 (3블록)	955 (1블록)	-	955 (1블록)	-	RC1, RC3

○ 공동주택 건설 추진현황

위 치		명칭(시행사)	세대수	추 진 상 황
홍 성 (7)	RH 5-2블록	모아메가시티1차	870	· 세대내부마감 및 외부 부대토목공사 중 (공정율 96%) · ’24년 2월 준공예정
	RH 5-3블록	모아메가시티2차	836	· 세대내부마감 및 외부 부대토목공사 중 (공정율 78%) · ’24년 8월 준공예정
	RC 2블록	반도유보라	955	· 지상층 골조 및 세대내부마감 공사 중 (공정율 52.67%) · ’24년 12월 준공예정
	RM 14블록	대방 디에트르	1,474	· 지하층 및 지상층 골조공사 중 (공정율 24%) · ’25년 10월 준공예정
	RL 6블록	대방산업개발	304	· ’23. 10. 29. 사업승인
	RH 12	한국토지주택공사	1,706	· 한국토지주택공사 사업 시행 (12.28. 사업승인)
	RH 16	충남개발공사	1,068	· ’24년 착공 예정 (리브투게더 사업)
예 산 (9)	RH 4-1블록	이지더원3차	954	· 내외장공사, 조경공사 중 (공정율 93.28%) · ’24년 3월 준공예정
	RH 3블록	중흥건설	1,120	· 골조공사중 (공정율 73.88%) · ’24년 9월 4일 준공예정
	RH 4-2블록	대광로제비앙	601	· 지하&지상층 골조공사중 (공정율 35.76%) · ’25년 5월 준공 예정
	RH 13블록	동원 비스타	696	· ’23년 1월 주택건설사업계획 승인 · ’24년 착공 예정
	RH 2-1블록	제일 풍경채	1,138	· ’23년 4월 경관건축공동위원회 심의
	RH 2-2블록	대우 푸르지오	755	· ’23년 12월 주택건설사업계획승인 신청
	RH 1블록	중흥S클래스	1,436	· ’23년 10월 경관건축공동위원회 심의
	RH15	한국토지주택공사	1,062	· 한국토지주택공사 사업 시행 (준비중)
	RM5	한국토지주택공사	864	· 한국토지주택공사 사업 시행 (준비중)

※ 총괄표상 개발계획은 내포신도시 최초의 계획으로 현재의 건설추진과 다를 수 있음.