		제245회 도의회 임시회 건 설 소 방 위 원 회 (2011. 8. 23)

2011년 주요업무 추진상황

건설교통항만국

보고순서

Ⅰ. 총   평

Ⅱ. 분야별 추진실적 및 계획

Ⅲ. 당면 현안사항

Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황

1. 2010년 행정사무감사 처리상황

2. 의회 약속사항 처리상황

Ⅴ. 참고사항

1. 위원회 현황

2. 관련 기관․단체 현황

3. 간부명단

Ⅰ. 총     평

□ 상반기에는 「참여와 소통」의 지방행정을 통하여      주민들의 다양한 의견수렴으로 참여적 건설행정을      적극 추진하였는데, 그 성과로는,

❍ 내포문화권개발 본격 추진 및 신발전지역 종합계획 수립

- 특정지역 변경, 보부상촌 조성 및 간월호관광도로 용역

❍「사람중심」의 도로관리에 중점을 두며 교통망 구축

- 고속도로, 국도, 지방도 확․포장, 안전한 보행환경 조성 등

❍ 도시와 농촌 주거환경개선 및 공공디자인 확산

- 주택개량 1,110동, 빈집정비 640동, 경관기본계획 수립 등

❍ 자연 친화적 생태하천 조성 및 재해예방사업 추진

- 생태하천(14지구), 고향의 강(8지구), 재해위험지구(51지구) 등

❍ 충남의 항만․물류 종합발전계획 수립 추진

- 용역발주(2건), 항만시설 확충, 국가철도망계획 대폭반영

❍ “말로 신청하는 지적민원 처리”로 민원인 편의 도모

- 전국최초, 지적민원시스템 개발, 연간 14만건 처리시간 단축

□ 아쉬웠던 점은

❍ 기후변화 영향으로 예년보다 많은 호우로 인한 피해 발생

- 강우량 : 1,209㎜(평년 723㎜), 복구액 801건 582억원

⇨ 관련부처 협의 예산확보 및 신속한 복구로 再피해 방지

□ 앞으로, 남은 기간에는

❍ 금년 목표한 사업의 차질없는 마무리 추진과 2012년       국비확보에 총력을 기울여 도민들의 숙원사업 적극 해결

Ⅱ. 분야별 추진실적 및 계획

지역특성을 살린 삶의 공간 조성

1

【1】내포문화권 특정지역개발

내포역사 문화유산을 복원ㆍ재현하여 문화관광자원으로 육성

역사문화ㆍ관광자원 확충을 통한 지역균형발전 도모

❍ 내포보부상촌 조성 종합계획수립 용역 발주(’10.12.17)

❍ 내포문화권 특정지역 2차 변경추진 중(’09～’11년, 충발연)

- ’10년까지 42개사업 1,658억원 투자(종합진도 16%)

❍ 주요 추진상황

- 가야산순환도로(2공구)생태탐방로 조성 추진(공정 65%)

- 내포문화권 특정지역 변경, 보부상촌 조성 용역 추진

- 간월호 관광도로공사 기본 및 설계용역 발주(’11. 3. 31)

앞으로
		▪특정지역 개발계획 2차 변경 승인 신청(하반기, 국토부)

【2】개발촉진 지구 및 신발전지역 사업 추진

개발수준이 다른 지역보다 현저하게 낮은 지역 등의 개발 촉진

낙후지역에 대한 민간투자 유도를 통해 지역성장 동력 창출

❶ 개발촉진 지구 사업

❍ ’10년까지 2지구 30개사업 2,535억원 투자(종합진도 42%)

- 금산 : 완료 1건, 추진중 12건, 534억원(17%), 계획변경용역중

- 서천 : 완료 5건, 추진중 12건, 2,001억원 투자(69%)

❍ ‘11년 금산․서천지구 산꽃ㆍ벚꽃 농촌체험마을 등 5개사업 추진

❷ 신발전지역 종합발전계획 수립 연구용역 중간보고회 개최(‘11.5.3)

앞으로
		▪ 중앙부처 및 시․군과 지속적인 협의로 조기 마무리 ▪ 2011년 신발전지역 종합발전계획 수립 연구용역 마무리

【3】국토계획 관리 및 난개발 방지

개발과 보전이 조화되고 지속성장 가능한 녹색 국토계획 수립을 통한 주민의 삶의 질 향상

❍ 보전과 개발이 조화를 이루는 「비도시지역」계획적 관리

❍ 농업진흥지역 및 보전산지에서 해제된 지역 등은 주민 불편 해소 차원에서 관리지역 추가세분 추진

- 상반기 완료(5개시군) : 보령, 논산, 연기, 청양, 예산

- 하반기 추진(4개시군) : 공주, 서산, 서천, 홍성

앞으로
		▪ 토지적성, 환경, 여건 및 주변지역과의 연계성 등을 고려, 정밀한 관리지역 추가세분

【4】건설공사 건설기술심의 추진

건설기술 진흥·개발·활용 등 건설기술에 대한 사항의

합리적 조정을 통해 건설기술의 발전과 품질·기술 향상

❍ 발주청 요청 시기에 맞추어 설계심의 위원회 운영 : 9회

- 일괄입찰(T/K) 기본설계 적격심의 2건, 기술심의 10건

앞으로
		▪건설공사 조기 발주를 위하여 설계 심의기간 최대한 단축 ▪지역건설업체 공동도급 49% 의무화 및 하도급 50%이상 참여유도

【5】지속가능한 친환경 도시개발

사업규모 : 8개 시․군 / 25지구 18,886천㎡

- 도시개발 22지구 9,397천㎡  - 택지개발 1지구 655천㎡

- 신 도 시  2지구 8,834천㎡

❍ 공사추진 : 13지구 12,240천㎡(도시개발 11, 신도시 2)

❍ 행정절차 이행 : 12지구 6,646천㎡

- 구역지정 추진중2, 개발계획  수립중2, 실시계획 수립중8

앞으로
		▪택지수요에 대한 안정적 공급 및 삶의 질 향상을 위해 면밀한 사업계획 검토 승인

녹색인프라로 융복합된 주거환경 조성

2

【1】주거환경개선사업 추진

도시지역의 열악한 기반시설을 개선 쾌적한 주거환경 조성

저출산 고령화 시대에 농촌지역의 정주기능 개선 토대마련

❍ 도시주거환경개선 : ’05～’12(8년간)까지 10개 시군 48개지구

- ’11년 정비구역 2지구 지정(74%) / 421억원

❍ ’11년 농어촌주거환경개선 : 총1,750동/568억원 추진

- 주택개량(42%) : 1,110동 555억원, 빈집정비(52%) : 640동 13억원

앞으로
		▪금년 계획한 사업 마무리를 위한 추진사항 점검독려 ▪농어촌주거환경개선사업 추진실적 평가 및 시상

【2】도시기능 회복을 위한 구도심 정비사업

노후된 구도심권 활성화로 도심공동화 방지

도시기반시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성

❍ 천안시 등 5개 시·군 32지구 / 1,752천㎡(25,576세대)

- 주택재개발18, 주택재건축11, 도시환경정비2, 도시재정비1

❍ 도시정비사업 추진상황

- 원도심 활성화 방안 워크숍 개최 : ’11. 5. 4(천안, 160명)

- 추진상황 : 완료1, 공사중2, 행정절차중28, 지정취소1

※  민간사업자가 추진하는 사업으로 침체경기 영향으로 다소 부진

앞으로		▪경기활성화 추이에 따라 추진 가능토록 여건조성 ▪현재 추진 중인 사업에 대한 행정절차 완료에 중점

【3】저탄소 친환경『그린홈 으뜸아파트』선정

으뜸아파트 입주민 자긍심 유발로 녹색환경 분위기 확산

단절된 주민의식을 통합하는 공동체문화 조성

❍ 선정기준 : 준공 후 5년 이상된 공동주택단지(3개 단지)

- 에너지절약, 탄소저감, 쾌적한 주거환경 조성, 주민공동체 문화활성화 등 평가 후 단지당 30백만원 지원, 인증패 부착

❍「그린홈 으뜸아파트」선정 공모 중 : ’11. 6.1～9.30(4개월간)

- 언론 및 도 홈페이지, 시․군(공동주택단지) 등 홍보

앞으로
		▪「그린홈 으뜸아파트」접수․평가 및 선정 : ’11. 10～11월중 ▪ 기 선정된 아파트 관리실태 점검 및 홍보 : ’11. 12월중

【4】충남 공공디자인 확산 추진

지역 자원의 계획적 관리로 매력적인 충남경관 창출    공모사업을 통한 우수한 지역 맞춤형 디자인 모델 제시

❍ 道 경관기본계획 수립 : ’11.1～’12.12, 용역비 285백만원

- 기본계획 수립, 도정조정위원회 자문, 계약심사

❍ 유니버설디자인 공모사업 : ’11.2～’12.12, 보조금 390백만원

- 추진실적 : 3시군(논산, 금산, 당진) 선정 지원(’11. 3월)

❍ 공공디자인클리닉센터 운영 : 디자인자문 28건, 워크숍 등 5회

❍ 공공디자인아카데미 운영 : 6.20～6.30, 주민 등 130명 참가

❍ 충남Sign한마당 개최 : 6.9～6.12, 옥외광고물 87점 전시

앞으로
		▪경관기본계획 용역 발주(10월) 및 착수보고회 개최(11월) ▪공공디자인 공모전․인증제 추진 (전시기간 : 11.3∼11.6)

사람중심의 도로교통체계 및 기반구축

3

【1】고속도로 건설

대상사업 : 5개 지구  / 203.3km / 7조 5,415억원

- 공사추진 : 북천안 IC  / 나들목 1개소 /       626억원

- 실시설계 : 당진～천안 / 43.7km   / 1조 9,971억원

- 기본계획 : 서울～세종 / 49.0km   / 2조 6,000억원

- 타당성조사 : 평택～부여 / 86.3km   / 2조 2,457억원

- 예비타당성 : 대산～당진 / 24.3km   /     6,361억원

❍ 북천안 IC : ’09. 3월 공사 착공(공정율 70%)

❍ 당진～천안 : 아산～천안 구간  20.95㎞ 실시설계 착수(’11. 2)

❍ 평택～부여 : 평택～아산구간 18㎞ 타당성조사 착수(’10.12)

제2차 도로정비기본계획(’11～’20) 반영(’11.6, 국토부 )

앞으로
		▪북천안 IC건설 조기 완공될 수 있도록 적극 행정 지원 ▪설계추진, 예타선정 등 조기 착수될 수 있도록 집중노력

【2】국도 확ㆍ포장 건설

사업대상 : 71지구 669.1km / 8조 3,515억원(국비)

- 사업기간 : 1995～2015 / 주관부처 : 국토해양부

❍ ’10년까지, 총69지구 4조 9,778억원 투자(종합진도 60%)

- ’10년 4,327억원 투자, 35지구 323.9km 추진

❍ ’11년 32지구 300.2km/ 3,838억원 투자 추진중

- 계속사업 24지구, 준공사업 6지구, 설계추진  2지구

※ 보령～청양(국36호), 학봉～공암(국1호) 실시설계 착수(’11.3)

앞으로
		▪아산～천안 등 6지구 62.8km, 금년중 준공목표 추진 ▪국도건설 적기 추진을 위한 ’12년 국비확보 행정력 집중

【3】국가지원 지방도 확ㆍ포장 사업

추진계획 : 30지구 277.1km / 2조 6,676억원

- 사업기간 : 2006～2020

❍ ’10년까지 5지구 1,808억원 투자(종합진도 7%)

❍ ’11년 6지구 38.8km 489억원 투자 추진 중

- 계속사업 4지구, 준공사업 1지구, 신규착공 1지구

※ 금산IC～충북도계간 실시설계 완료(’11.7 / 대전청)

앞으로
		▪장기～남면(2.1km) 8월말 개통, 금산IC～충북도계(3.7km) 착공

【4】지방도 정비사업

추진계획 : 58지구 242.8km / 7,819억원 / 2004~2015

❍ ’10년까지, 31지구 3,138억원 투자(종합진도 40.1%)

❍ ’11년 12지구 56.59km  580억원 투자 추진중

- 계속지구 : 홍성～덕산 등 12지구 56.59km, 580억원

※ 재정지원사업 : 도청신도시 연결지방도 확장 60억원

앞으로
		▪홍성～덕산간 등 조기준공으로 내포시 접근성 개선

【5】광역도로 정비사업

위    치 : 금산군 복수면 구례리～백암리(2차분)

사 업 량 : 1.04km(4차로) / 445억원(국비223, 도비222)

사업기간 : 2010. 12～2013. 12

❍ ’10. 12월 : 2차 구간(1.04km) 공사착공

❍ ’11.  6월 : 편입토지 보상협의(68%), 현장사무실 가설완료

앞으로
		▪토지보상, 터널(307m) 및 교량(451m) 공사추진(’11예산 60억원)

【6】주민이 편리한 사람중심의 도로관리

위험도로 개선 등 1,651개소/10,791억원

- 위험도로 개선 : 356개소, 2,615억원(’11년 29개소 138억원)

- 보행환경 조성 : 547개소, 6,606억원(’11년  5개소 112억원)

- 어린이 보호 : 507개소, 1,106억원(’11년 54개소 128억원)

- 사고 잦은곳 : 241개소,  464억원(’11년 17개소  28억원)

지방도 접속 교차지점 개선 40개소/40억원

❶ 위험도로 개선 등 사업 추진

❍ ’10년까지 679개소 2,210억원 투자

❍ ’11년 추진계획 : 105개소 406억원 투자

- 지방비(50%) 확보 추진 및 조기발주 시행

❷ 지방도 접속 교차지점 개선 사업

❍ ’11년 추진 : 10개소 / 11억원(도비) 확보 시행중

- ’11. 6월말 : 준공 8개소, 공사중 2개소

앞으로
		▪주민 호응도가 높은 사업으로 ’12년 예산확보 지속 사업 추진

【7】녹색교통 자전거이용 활성화

자전거 인프라 구축 : 994㎞/ 3,271억원/ ’10～’19년

- 국가자전거도로 구축사업(330.5㎞/990억원) : 천안 등 9시군

- 광역자전거도로(472㎞/2,009억원), 금강자전거 길(192㎞/272억원)

자전거 거점도시 육성 : 아산시/ 100억원/ ’10～’12년

❍ ’11년 국가자전거도로 26.9km /105억원 사업 추진

❍ 자전거거점도시 계획수립 : 도로 34.5km, 공공자전거 1,000대 등

❍「제3회 대한민국 자전거축전」개최 : 당진군 5천명 참여

❍ 자전거 관련 조례 제정 : 천안 등 9개 시․군 완료

앞으로
		▪ ’11년 국가자전거도로 26.9km 등 사업 추진(연내 80%목표) ▪ 금강자전거길 : 192km/272억원 추진(연내 준공, 4대강사업 포함) ▪ 금강 자전거길 단절구간 13.3km,17.85억원 연내 완공 추진

친환경 수변경관 조성 및 재해예방

4

【1】국가하천정비 및 수계치수 사업 추진

사 업 량 : 총 14지구 / 141.1km/ 4,710억원

사업기간 : 2005 ～ 2014(10년간)

사업내용 : 국가하천 103.8km, 수계치수 13.8km, 도시하천 23.4km

주관부처 : 국토해양부(시행청 : 대전지방국토관리청)

❍ ’10년까지 총 13지구/2,018억원 투자

❍ ’11년 14지구 665억원 투자(계속13, 신규1), 종합진도 49%

앞으로
		▪사업의 조기준공을 목표로 관련기관 협조 지원 추진

【2】소하천 정비사업 추진

2011년 추진 사업

- 사 업 량 : 자연형 소하천 정비 22개소, 35.6km

- 사 업 비 : 35,242백만원(국비 : 17,621, 시․군비 : 17,621)

❍ 6월말까지 주요공정 완료 지구 14개소(60%이상 달성)

❍ ’11년 아름다운 소하천 공모전 2개소 수상

- ’12년 45억원 국비 추가확보

※ 우수 : 홍성군 남산골천(25억원), 장려 : 예산군 향천천(20억원)

앞으로
		▪자연친화적 공법을 적용한 하천정비로 친수환경 조성 ▪효율적인 공정관리로 사업 조기 마무리 독려

【3】자연재해 예방 등 친환경 하천 조성사업 추진

자연재해 예방사업 : 총 260지구/  1조 7,477억원

생태하천 조성사업 : 총 36지구 / 165㎞/ 4,285억원

「고향의 강」 조성사업 : 총 14지구 / 120㎞/ 2,823억원

물 순환형 수변도시 조성사업 : 총 6지구 / 17km/ 1,160억원

❶ 자연재해예방사업

❍ ’10년까지 162지구, 8,557억원 투자(완료 120지구)

❍ ’11년 사업 : 43지구 1,105억원 투자

- 재해위험지구 21지구(신규4, 계속10, 마무리7), 563억원

- 수해상습지 12지구(신규2, 계속8, 마무리2), 332억원

- 하도정비 10지구(신규1, 계속7, 마무리2), 210억원

❷ 생태하천 조성사업

❍ ’10년까지 13개 지구, 290억원 투자

❍ ’11년 14개 지구, 247억원 투자(계속 13, 신규 1)

- 계속지구 : 13개 지구 설계 완료 및 공사착공 추진

- 신규지구 : 1개 지구 실시설계용역 추진

❸ 「고향의 강」조성사업

❍ ’10년 선도사업으로 논산천 선정 및 실시설계 용역

❍ ’11년 8개 지구, 102억원 투자(계속 1, 신규 7)

- 계속지구 : 1개 지구 설계완료 및 공사발주 행정절차 이행

- 신규지구 : 7개 지구 실시설계용역 발주 준비

❹ 물 순환형  수변도시 조성사업

❍ ’11년 시범사업으로 논산시 중교천 확정(’10. 8)

❍ 중교천 지방하천 지정 고시(’11.3)

앞으로
		▪자연재해예방사업 철저한 관리로 이월사업 최소화 ▪생태하천조성사업 설계 완료지구에 대한 공사발주 등 본격 추진 ▪고향의 강 조성사업 신규 7개 지구 실시설계 용역 착수

【 4 】금강살리기 사업 마무리

사업구간 : 151km(금강하구둑～금산군 부리면)

사 업 비 : 2조 26억원(국비)

사업기간 : 2009～2011년

❍ ｢생태하천, 하도준설, 하천정비｣ 등 주요사업 정상추진

❍ ｢농경지 리모델링 사업｣ 12백만㎥ 반입완료(100%)

※ 2011년 사업 마무리를 위한 사업추진 진력(道 추진 4지구)

앞으로
		▪ 8월은 혹서기이고 집중호우로 인한 수해대비에 전념 ▪작업효율성 높은 9~11월에 사업추진을 집중하여 마무리

【5】자연재해 대책 추진

재해 대책기간

- 겨울철(’10. 12. 1～’11. 3. 15) : 폭설･강풍･한파･해일 등

- 여름철(’11. 5. 15～’11. 10. 15) : 태풍･호우･강풍･해일･폭염 등

❍ 자연재난 사전대비 및 신속대응체계 구축

- 재해취약(777지역), 예방시설(2,864개소) 일제점검

- 7개 유관기관(32사단, 한국수자원공사 외 5개) 협약

❍ 재해예방 방재교육, 대국민홍보 실시, SKX 훈련 실시

❍ 이재민 수용시설 2,142개소 지정, 방재․구호물자 비축

❍ 현장재난상황관리관 위촉 : 이․통장 5,588명

앞으로
		▪기상상황 신속･정확한 전파를 위한 방재 홈페이지 정비 ▪기상상황에 따라 준비･대응･비상단계 종합상황실 운영

경쟁력 있는 서해안 항만․물류 중심 기반구축

5

【1】도 항만 종합발전계획 수립

사업기간 : ’11.4월~’12.4월 / 200백만원

수행기관 : 한국해양수산개발원(KMI)

주요내용 : 항만별 경쟁력확보, 대중국 교류, 배후단지개발 등

❍ 도 항만종합발전계획 수립 학술연구 용역추진

- 전문가 자문 등 사전절차 이행 : 2월

- 수행기관 선정 및 계약 : 4월

- 착수보고회 개최 : 5월

앞으로
		▪ 해양정책토론회(8월), 중간보고회(10월), 대중국교류 간담회(11월) ▪ 도 종합계획, 제3차 항만기본계획 등 상위계획과 연계 추진

【2】항만시설 확장 및 정비

제3차 항만기본계획 확정(국토부, ’11.7월)

- 무역항5(국가관리3, 지방관리2), 연안항2

지방관리 무역항 및 연안항 정비사업 추진

- 시설물정밀안전진단, 돌제부두 축조, 준설 등

❍ 제3차 항만기본계획(’11～’20) 12개사업 반영

- 당진항5, 대산항3, 보령항1, 장항항1, 대천항2

❍ 지방관리 무역항 및 연안항 정비사업 추진

- 정밀안전진단(보령항), 정비사업(대천․비인항)

앞으로
		▪ 도 항만종합발전계획 수립과 연계 신규 또는 미반영사업 제3차 항만기본계획 수정계획(2016)반영 노력

【3】연안정비사업 및 생태탐방로 조성 추진

사업지구 : 연안보전 18지구, 친수연안조성 8지구

- 대상 : 보령3, 서산1, 서천7, 홍성4, 당진3, 태안8지구

사업기간 : 2010～2019년(10개년 계획)

사 업 비 : 총 1,458억원 투자

시 행 자 : 시장·군수, 대산지방해양항만청장

❍ 2011년도 추진사업 착수

- 대상사업 : 6시군 11지구, 98억원 투자

(보령1, 서산1, 서천1, 홍성3, 태안2, 당진1, 대산청시행 2지구)

- 사업내용 : 호안신설 및 보수, 친수공원 조성 등

⇨ 연안지역 재해 사전예방 등 도민의 삶에 질 향상 도모

앞으로
		▪계획기간 내 완료목표로 친환경 연안정비 추진

【4】연안지역 생태탐방로 조성

사업내용 : 생태탐방로 총 4개 노선 37km

사업기간 : 2011～2012(2개년 계획)

사 업 비 : 1,065백만원(국비 745, 시군비 320)

시 행 자 : 서천군수

❍ 2011년도 계획사업 착수

- 1개 노선(춘장대～홍원항구간) 3km, 143백만원 투자

- 사업내용 : 기존도로를 활용한 탐방로 정비, 안내시설 설치 등

⇨ 우리도 연안의 생태적·경제적 가치의 재창출 도모

앞으로
		▪계획기간 내 완료목표로 생태관광 기반시설 조기구축

【5】물류기본계획 수립

사업기간 : ’11.4월~’12.4월 / 300백만원

수행기관 : 충남발전연구원

주요내용 : 최적물류단지입지선정, 효율적인 물류네트워크 구축 등

❍ 도 물류기본계획 수립 학술연구 용역 추진

- 전문가자문 등 사전절차 이행 : 2월

- 수행기관 선정 및 계약 : 4월

- 착수보고회 및 물류정책심의회 구성 : 5월

앞으로
		▪ 중간보고회(10월), 물류정책심의회(’12.2월), 최종보고회(’12.3월) ▪ 물류기종점조사를 통한 도내 화물운송체계 분석 반영

【6】국가철도망 구축계획 지역숙원사업 반영

제2차 국가철도망 구축계획 확정

- 국가 철도망시설 신규4개 노선 연차별 구축(2020년까지)

❍ 충청권 자립경제권 확충을 위한 철도시설망 구축

❍ 기 시행중인 사업 : 3개노선

- 호남고속철도(230.9km), 장항선2단계(33.1km) 서해선(98.3km)

❍ 신규 전반기(’11～’15)착수사업 : 2개노선

- 장항선 복선전철(122.1km), 천안～청주공항 복선전철

❍ 신규 후반기(’16～’20)착수사업 : 2개노선

- 충청권 철도(106.9km), 아산산단인입철도(32.6km)

앞으로
		▪계획기간 내 완료 광역 교통기능 철도망 확충 ▪기간 철도망 확충으로 물류비 절감 및 지역균형 발전 촉진

도민이 만족하는 으뜸 토지행정 실천

6

【1】종이 없는 그린 지적민원시스템 구축

지적민원 신청서작성 및 구비서류 제출에 따른 민원인

불편해소와 처리문서 전산화에 따른 행정비용 절감

❍ 기간/사업비 : ’10～’12(3년간)/1,002백만원

❍ 사업추진 : 시스템 개발(도), 시스템 도입ㆍ운영(시․군)

※ 시스템 개발 국비지원으로 도비 186백만원 예산절감

❍ 주요내용 : 토지이동 등 15종의 지적민원을 말로 접수ㆍ처리하고 별도의                    처리문서 전산화가 불필요한 시스템 개발 및 운영

❍ 시스템에 의한 민원서비스 제공 실적 : 1,200건/4,500필지

앞으로
		▪지속적인 의견수렴 및 시스템 고도화 등 발전방안 모색 ▪중앙정부의 전국확산을 위한 테스트 베드(Test-Bed)역활 수행

【2】도로명주소사업 추진

지번주소를 위치찾기 편리한 도로명주소체계로 개편,

도민 실생활 편익증진 및 물류ㆍ정보화 산업촉진

❍ ’98～’11(14년간, 연차사업)/16개 시ㆍ군/311억원(국 82, 도 48, 시ㆍ군 181)

❍ 도로명ㆍ건물번호판 설치 : 12,819개 / 430천개

❍ 도로명주소 기반 표준 전자지도 전지역 DB구축(8,630㎢)

❍ 도로명주소 일제고지/고시 : 139만건 / 42만건

❍ 도로명주소 인지도 제고 및 활용화를 위한 홍보사업 추진     - TVㆍ라디오 캠페인 273회, 드라마 1회, 초등학교 교재제작 배부(25천부) 등

앞으로
		▪ 각종 공적장부 주소전환 및 생활화 홍보사업 추진 - 7대 핵심 공적장부 우선 주소전환 ※ 주민등록부, 건축물대장, 사업자등록부, 외국인등록부, 건물등기부, 법인등기부, 가족관계등록부

【3】개별공시지가의 정확한 조사‧산정

국세‧지방세 등 부과대상 토지에 대한 공시지가 조사산정

업무량 / 예산 : 3,310천필지 / 3,200백만원

❍ 결정‧공시일 : 2011. 5. 31 (162조 8,232억원)

❍ 전년지가 대비 : 3.13% 증(’10년 2.25%), 전국 2.57% 증

❍ 이의신청 : 3,086필지(상향 1,299, 하향 1,787)/전년대비 39% 감

- 심의결과 : 기각 1,563, 상향 681, 하향 842필지

앞으로
		▪1월 이후 토지이동분 결정공시(7.1기준) : 36,704필지 ▪2012적용 개별공시지가 지침 시달 및 표준지 조사

【4】이웃사랑 무료부동산중개센터 운영

소년‧소녀가장, 홀몸노인, 등 저소득층 126천 가구의 전‧월세 무료 부동산중개로 주거안정 도모

전세 4천만원이하의 계약(건당 중개수수료 20만원)

❍ 무료 부동산중개센터 지정 : 102개소

❍ 관련부서, 유관기관 및 주민홍보 활동 전개

❍ 중개센터 운영실태 방문 및 시책추진 협조

❍ 상반기 추진실적 : 20건(월세 8, 전세 12)

앞으로
		▪공인중개사협회충남도지부와 간담회 개최(10월 중) ▪가을 이사철 무료부동산중개센터 방문 및 협조

【5】도서 및 해안가 미등록 토지 조사‧등록

지적전산자료와  항측자료를 활용하여 도서 및 해안

미등록 토지를 발굴, 지적공부에 등록관리

⇨ 관할구역내 정확한 토지관리로 국토의 효율적 이용 도모

❍ 사업기간 : 2010. 9～2011. 12

❍ 사업규모 : 610필지/753천㎡(도서224, 105천㎡, 해안가386, 648천㎡)

❍ 사업예산 : 147백만원(전액국비)

❍ 추진현황 : 성과품 검수 완료(지적측량 성과도 발급)

앞으로
		▪행정구역 결정 신청(시‧군 ⇨ 道 ⇨ 행정안전부) ▪도서 등록을 위한 공고(6개월) 후 소유자 등록

【6】One-Touch 부동산정보 열람시스템 구축

도내 낙후지역 및 정보화 소외계층이 토지 등 부동산 정보를

쉽고 편하게 이용할 수 있는 시스템 구축

❍ 대상/사업비 : 13개 시‧군(180읍면동) / 1,470백만원

❍ 구 축 내 용 : 지적(임야)도, 토지이용계획, 항공사진 등 7종

❍ 사업실적

- ’11년도 사업량 90개소 中 77개소(86%) 구축완료

- 열람실적(’11. 5～6) : 총 74천건(본청 19천, 읍면 55천)

※ 비용편익 82백만원 효과(열람 및 등본발급 비용)

앞으로
		▪지속적인 시스템 기능개선 및 대민홍보로 이용 활성화 ▪’12년도 잔여지역(84개소) 확산 설치

Ⅲ. 당면 현안사항

□ 수해복구 사업 추진

’11.7.7～14(8일간) 국지성 집중호우로 논산, 금산, 부여,

서천 등 피해 발생(798건 210억원)

※ 강우량 : 논산446㎜, 금산301㎜, 부여436㎜, 서천425㎜

수해복구사업의 빠른 시일내 추진으로 再피해 방지 및

지역주민 불편 해소

□ 피해 현황

○ 피해규모 : 798건 210억원

- 사유시설 : 22억원(건물, 농경지, 축사, 비닐하우스 등)

- 공공시설 : 188억원(도로, 하천, 소규모시설 등)

□ 복구계획

○ 시설별 : 801건 582억원(사유시설 42, 공공시설 540)

- 재원별 : 국고 189억원, 지방비 177억원, 자력 216억원

- 지역별 : 논산 139억원, 금산 112억원, 부여 136억원, 기타 154억원

□ 그동안 추진상황

○ ’11. 7.21～27(7일간) : 道 및 중앙 합동조사 실시

○ ’11. 8.  : 복구 계획수립, 복구계획 관련부처 협의 및  중앙재난안전대책본부 심의․확정, 예산확보 등

□ 앞으로 추진계획

○ 실시설계, 행정절차이행 등 신속한 수해복구사업 추진을 위한 T/F팀 구성․운영

○ 조기 발주 등으로 소규모(3억원 미만)사업은 내년 4월말까지 준공, 늦어도 6월말까지 모든 사업장 조기 마무리 추진

□ 대중교통 및 해양정책 발전방안 토론회

우리도 대중교통의 합리적인 개선방안 마련을 위해

전문가를 초청「충남 대중교통정책 토론회」개최

해양 물류, 해양관광, 해양환경 등 부문별 전문가와

토론을 통한 해양정책 발전방안 강구

❶ 대중교통 토론회 개요

○ 때․곳 : ’11. 9. 6(화) 14:00～17:00 / 도청 대회의실

○ 참  석 : 100여명(도지사, 관계공무원, 전문가 등)

○ 방  법 : 주제발표 20분, 토론 5분(주제별 토론 3인 지정)

○ 내  용

ⅰ) 오너드라이브 시대 대중교통체계의 합리적 개선방안

ⅱ) 저탄소 녹색성장 시대에 대비한 대중교통체계 방안

ⅲ) 버스재정지원 및 비수익 노선 등에 대한 합리적 개선방안

❷ 해양정책발전방안 토론회 개요

○ 때․곳 : ’11. 8.24(수) 14:00～16:00 / 도청 대회의실

○ 참  석 : 50명(도지사, 전문가, 공무원, 정책자문위원 등)

○ 내  용

ⅰ) 해양물류 : 항만관련 동향, 항만 활성화, 배후지역 개발전략

ⅱ) 해양관광 : 체험관광․크루즈․마리나 등 새로운 관광수요 대처

ⅲ) 해양환경 : 미래를 대비하는 해양환경, 안전한 해양환경 조성

앞으로
		▪토론내용을 분야별 정책과 연계, 도정에 적극 반영

□ 「2011금산세계인삼엑스포」 협조 지원

2011년 금산세계인삼엑스포의 성공적인 개최를 위하여      대중교통, 주요접근로 및 행사장 주변정비 등 적극 지원

❶ 대중교통 수송력 강화

❍ 교통대책(질서, 안내) 실무협의회 구성․운영(5월)

- 도, 경찰, 공무원, 봉사단체 등 실무협의회 개최

❍ 교통상황실 운영지원(9.2～10.3) / 5명(경찰 협조)

❍ 시외․내 버스 운송력 증강(행사기간 전)

- 대전↔금산간 시외버스 대전역 동광장 정차 개선명령

- 시외버스는 행사기간 중 10%내외 증회(59회→65회) 운행

- 시내버스는 금산 터미널과 행사장을 경유토록 조치

❷ 주요 접근로 정비 및 교통편의 추진

❍ 행사장 접근로 5개 노선 127㎞ 9억원 투자

- 덧씌우기 3개 노선, 차선도색, 교통안전시설 정비 등

- 주변도로 정비를 위한 실시설계, 공사착공(6월)

❍ 고속도로(3곳) 및 국도(1곳) 전광판 활용 홍보

❸ 주차장 확보 및 운영인력 지원

❍ 주차장 조성기본 및 실시설계 용역 완료(4월)

❍ 주차장 조성공사 계약 및 착공(5월)

앞으로
		▪ 8월말까지(행사 개최전) 모든 사업 마무리에 최선

Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황

1. 2010 행정사무감사결과 처리상황

구 분	합 계	추 진 완 료		추진중	비 고
		처 리	불 가
합 계	12	12	0	0
시정요구	2	2	0	0
처리요구	1	1	0	0
건의사항	9	9	0	0

< 완  료>

① 불법 부동산중개업소 단속 대책 방안 강구

○ 개발예정지역, 거래수요 다발지역 등 취약지역에 대하여 시‧군 및 한국공인중개사협회 지도위원을 포함하는 합동점검반 구성

○ 자격증 대여여부 점검, 불법부동산중개업소 행정조치 129건

- 등록취소 7, 업무정지 96, 과태료 6, 시정‧경고 20

② 직원민원처리 서비스개선 대책 강구(충남교통연수원)

○ 즉각적인 고객의견 수렴을 위한 프로그램 개발

○ 주기적이고 체계적인 직원교육실시(외부전문CS강사초청, 연2회)

○ 신속한 업무처리를 위한 사무자동화 및 교육환경 개선

③ 무임교통카드 발급 관련 홍보 강구

○ 시군 담당공무원대상 사전 설명회(’10.7), 무임교통카드 홍보물 시군별 배포(3만매), 무임교통카드 발급관련 시․군 통보(’11. 1.) 등 지속적인 홍보 실시

④ 국도 4차선 확･포장공사(21호/천안～홍성, 보령～서천) 조기완공

○ 천안～아산～예산～홍성～보령간 4차로 개통 완료

○ 보령～서천간 4차로 확포장 공사중

- 1공구 15.1km / 1,094억원 / ‘09년 사업착수

- 2공구 11.0km / 2,153억원 / ‘08년 타당성재조사결과 추후시행

- 3공구  6.4km /   848억원 / ‘10년 사업착수

○ 2공구에 대하여도 사업의 연계성을 감안하여 1, 3공구와 동시에

준공될 수 있도록 중앙부처 지속 건의 추진

⑤ 보금자리주택사업 추진 관련 민원해결 방안 강구

○ LH공사의 사업취소에 따라 국토해양부 천안 신월․성환지구       해제고시(’11. 7.14)

⑥ 내포문화권 특정지역 개발사업 적극추진

○ 내포권개발 TF팀 신설(’11. 1.13)

- 2명(시설 5급, 시설 6급), 파견1명

⑦ 내포문화권 개발사업 고건축물 도입추진

○ 내포문화권 개발사업관련 실과 및 시군에 협조공문 발송(’10.12.27)

○ 내포보부상촌 조상사업등에 전통양식을 살린 고건축물 도입

- 기존 해미읍성 복원 등에 역사적 자료 등을 토대로 전통양식 살린 고건축물 도입 재건함

⑧ 충남 내륙을 관통하는 제2서해안 고속도로 조기 추진

○ 제2서해안 고속도로(평택~광천, L=66.3㎞/14,428억원)는 광역경제권 30대 선도사업으로 선정되어 국가 정책적 추진(기재부)

○ 새만금, 황해경제자유구역 등 본격 개발로 서해안축 교통량 분담을 위해 평택~홍성~청양~부여를 연결하는 부여~화성간 고속도로(L=94.3㎞/19,839억원)건설 건의(’09.1. 국토부), 국가계획 확정

⑨ 금강살리기사업에 대한 충청남도 입장 홍보로 갈등해소 조치

○ 원만한 사업추진을 위하여 중앙, 도, 시․군 등과 적극 협의 추진

○ 지역숙원사업 및 민원사항 등에 대한 적극 수렴 반영

○ 언론사 토론회 등을 통한 도의 입장이 무조건반대가 아님을 홍보

○ 금강비전기획위원회를 통한 금강살리기 사업의 발전적 방향 모색

⑩ 내실있는 교육을 통하여 교통사고방지 대책 강구(충남교통연수원)

○ 도민 교통안전교육 및 각 시․군 합동 교육캠페인 전개(4만명)

- 팜플릿배부를 통한 지속적이 교육홍보(8천매)

- 교통관련기관, 유관기관과의 운영협의를 통한 계도활동

○ 교통관련 기관과 MOU체결 등 교통사고 전시사진 홍보 및 교통사고 사상자 줄이기 운동 전개

⑪ 교육과정에서 외래어 표기 남발 주의(충남교통연수원)

○ 자체 표기단어(경영혁신 비전2010 등)는 검토 후 취지에 맞는 단어로 변경

○ 전임교수등 외래어 표기 및 사용자제하도록 주지

⑫ 내실있는 교육프로그램 당부(충남교통연수원)

○ 홈페이지를 통한 교육안전교육 동영상물 등재

- 직무, 친절, 소양, 어린이, 청소년, 자가운전자 교육

○ 교육운영평가위원회 및 운영연구회의 개최(연1회)

- 전임교수 및 조합 등 교육담당자간 개선방안 강구

2. 도의회 약속사항 처리상황

합 계	추 진 완 료			추진중	비 고
	기완료	금회처리	불 가
12	3	5	0	4

< 완  료 >

① 수도권 전철의 천안-조치원-청주국제공항까지 연결 관련

○ 2010년 국가철도망 구축계획에 반영 등 건의(’09～’10)

② 서해안 관광용 광역도로망 구축

○ 서해안 고속도로 개통 완료(’00.12), 보령～태안간(연육교) 국도77호 건설공사 ’10.12월 착수 예정

○ 대산～가곡간, 원청～태안간, 만리포～태안간, 보령～서천간 등 서해안 관광용 광역도로망 확포장 건설중

③ 충남 원도심 규제완화 및 개발 대책

○ 도시주거환경개선사업 등 원도심 활성화 관련 사업 지속추진

○ 인구 50만이상인 천안시는 원도심활성화 자체 추진가능하나 향후 천안시와 협의, 적극 추진 방안 모색

④ 아산만권배후 신도시개발 관련, LH 사업 축소검토 계획에 따른 대책

○ 탕정지구 지구지정 변경(축소) 고시(국토부’11.6.28)

- 당초 17,643천㎡(534만평) → 변경 5,160천㎡(156만평)

○ 사업 취소지역에 대한 후속대책 수립

- 취소지역내 간선도로 설치비 지원(6.4km 1,100억원)

- 도시관리계획 수립 용역비 지원(18억원)

- 행위제한에 따른 주민피해 T/F팀 운영

후속대책 추진을 위하여 아산시와 LH 협약체결 시행

⑤ 학교용지 매입비 전출계획

○ 내포신도시 신설학교용지 매입비 15억원 전출완료(’11.8월)

○ 교육청과 협의하여 도내 학교수립에 차질이 없도록 특별회계 철저 운영

⑥ 장항항 보완 정비사업이 계획대로 완공될 수 있도록 노력

○ 물량장신설, 호안정비 및 친수공간 조성(’14년까지 706억원 투자)

- ’11년까지 설계비 등 275억원 투자 현재 공정률 38.9%(예산대비)

○ ’12년～’14년(432억)까지 연차적으로 추진될 수 있도록 노력

⑦ 군산항 북측 도류제 해체 등 개선방안 건의

○ 국토부, 군산지방해양항만청에 도류제 시설 보완 또는 별도의

어선통행로 준설 건의(4월)

⑧ 금산군 부리면 방우리 교량건설 관련

○ 방우리 지역만 가지고 있는 현재의 가치를 높일 수 있는 방안

마련에 노력하고, 우선 종합개발계획 용역예산 지원(3월)

< 추 진 중>

① 내포문화권 개발사업(보부상촌 조성사업) 추진상황 및 계획

가. 추진상황

○ 내포문화권 개발계획 변경 용역중(’09～’11)

- 특정지역 변경용역 추진절차 이행(공청회, 관련기관 협의)후 ’11년 하반기 국토해양부 승인신청 목표 추진

※ 내포문화권개발계획 변경 및 조성사업 적극 추진

○ 내포보부상촌 종합계획수립 용역 발주(’10. 12. 17)

○ 전문가 자문회의 개최 2회(’11.3.30, ’11.7.18)

나. 추진계획

○ 내포문화권 개발계획변경

- ’11년 용역완료후 개발계획변경 승인 신청(국토부)

○ 내포보부상촌 조성사업 추진

- ’11년 종합계획 수립용역 수행

- ’12년 관광지 지정 등 행정절차 이행 등

② 금강하구둑해수유통 개선대책

○ 금강하구둑 해수유통에 따른 생태계변화, 희귀어종 보존방안,

농업용수 활용방안 등을 종합 분석 검토, 중앙정부 및 전북도와

긴밀 협의추진

- 금강하구역의 효율적 관리를 위한 대토론회 개최(’11.7.22,서천)

③ 금강살리기 현안사업 특별대책

○ 보설치와 준설계획은 홍수량, 홍수위 등을 종합적으로 검토, 홍수와 가뭄을 대비하는 계획수립 추진 중(국토부)

○ 도에서 하천종합정비계획을 통한 금강지류하천 정비 추진

○ 보 및 지류하천의 수질관리 대책 ’12년까지 3,596억원 투입해 추진하고, 영농에 불편이 없도록 용배수로 설치, 침수방지를 위한 배수관 사업 시행중임.

○ 하천고수부지는 생태공원조성 및 생활체육공원 등 설치 계획

○ 고수부지 수목식재는 숲조성과 쉼터공원화 계획(국토부)

④ 대전․당진간 고속도로 대산 연장 관련

○ 예비타당성 조사 시행건의

- 시․도 부단체장 협의회(’11.5.31, 국토부 제1차관)

- 국회의원 초청 도정간담회(’11.6.13, 충남국회의원)

- 지방자치단체 재정협의회(’11.6.3, 기재부 제2차관)

Ⅴ. 참고사항

1. 각종 단체, 위원회 현황

① 단체현황

단 체 명	소 재 지	대표자	전화번호
대한건설협회 충청남도회	대전 서구 둔산동 926	신창균	486-9100
대한전문건설협회충청남도회	대전 서구 둔산동 1290	박상희	472-2558
대한설비건설협회대전충남도회	대전 유성구 탑립동 925	황광연	932-3900
대한건축사협회충남건축사회	대전 중구 선화동 374-2	최종옥	256-4088
대한주택건설사업협회대전충남지회	대전 동구 삼성동 121-9	안성열	256-6299
대한주택관리사협회충남도회	천안시 신방동 784-26	이운길	573-5011
한국옥외광고협회 충청남도지부	예산군 예산읍 예산리 261	정상래	335-6522
충청남도 공공디자인 협회	대전 서구 월평동 17-2	류철호	537-1180
충남 버 스 운 송 사 업 조 합	대전시 동구 정동10 - 1	이준일	221-0880
충 남 택 시 운 송 사 업 조 합	대전 서구 갈마동363 - 5	엄승섭	522-4849
충남개인택시운송사업조합	예산군 예산읍 산성리 73 - 1	김해경	331-1610
충남화물자동차운송사업협회	대전 서구 만년동 381 엑스포오피스텔 204호	황인범	489-4395
충남용달화물자동차운송사업협회	대전 중구 중촌동 12 - 2 중도쇼핑 408호	김광태	226-6375
충남개별화물자동차운송사업협회	공주시 금흥동 110 - 2	안철진	852-6235
충남전세버스운송사업조합	대전 서구 도마2동128-1	김인수	534-4036
충남특수여객자동차운송사업조합	아산시 실옥동 294 - 20	김진태	542-5588
충남화물자동차운송주선사업협회	천안시 풍세면 가송리 241	권구현	575-2401
충남자동차검사정비사업조합	대전 중구 오류189-45	주관선	522-6651
충남자동차매매사업조합	천안시 구룡동 1-122	정업영	572-8444
충남자동차부분정비사업조합	천안시 신부동 328-2	김주용	555-6251
신충남자동차부분정비사업조합	예산군 오가면 분천리 11-32	김철원	335-4411
한국자동차폐차업협회 충남도지부	천안시 두정동 50	육란수	562-7744
교통안전공단 대전․충남지사	대전 대덕구 문평동 83-1	황병운	933-4324
도로교통공단 대전․충남지부	대전 중구 오류동 190-10	김원권	525-7969
한국골재협회 대전충남지회	대전 유성구 지족동 894-1 골드프라자 701호	이순영	223-5425
헌국공인중개사협회 충남지부	천안시 성정동 효원빌딩 805	이배안	522-0087
대한측량협회 대전‧충남지부	천안시 오룡동 40-1 청봉빌딩	조순종	562-6555

② 위원회 현황

위 원 회 명	설치	소 관	위 원 회 구 성
			위원장	부위원장	위원수
지방토지수용위원회	법령	건설정책과	도지사	-	9
지방도시계획위원회	법령	〃	행정부지사	-	25
도시공원위원회	법령	〃	민간인	-	12
건설기술심의위원회	법령	〃	건설교통항만국장	-	166
지방건설분쟁조정위원회	법령	〃	건설교통항만국장	-	13
지방건축위원회	법령	건축도시과	건설교통항만국장	-	55
경관디자인위원회	조례	〃	건설교통항만국장	민간인	39
광고물관리심의위원회	조례	〃	건설교통항만국장	민간인	7
도시교통정책심의위원회	법령	도로교통과	행정부지사	건설교통항만국장	23
교통영향심의위원회	법령	〃	민간인	민간인	23
교통안전대책위원회	법령	〃	도지사	-	9
택시총량제심의위원회	법령	〃	건설교통항만국장	-	10
지방하천관리위원회	법령	치수방재과	건설교통항만국장	-	20
사전재해영향평가심의위원회	법령	〃	건설교통항만국장	-	40
재해복구사업 사전심의위원회	법령	〃	건설교통항만국장	-	31
지역연안관리위원회	법령	항만물류과	행정부지사	건설교통항만국장	12
지방지명위원회	법령	토지관리과	행정부지사	건설교통항만국장	10
도로명주소위원회	법령	〃	행정부지사	민간인	13
지방지적위원회	법령	〃	건설교통항만국장	토지관리과장	10

2. 지도․감독 기관

기 관 명	위 치	대표자	구성원수	지도․감독사항
대한지적공사 대전․충남본부	대전시 서구 탄방동 653	최종만	360	지적측량 수행업무
충청남도 교통연수원	충남 공주시 금흥동 110-2	양학순	12	운수종사자 교육

3. 간부 명단

소 속	직 위	직 급	성 명	현직임용일
건설교통항만국장		지방부이사관	서 동 수	’10. 07. 22
건설정책과	과 장	지방기술서기관	김 홍 록	’10. 07. 22
	건설정책담당	지방행정사무관	신 기 영	’10. 10. 07
	지역계획담당	지방시설사무관	안 명 대	’11. 07. 14
	도시계획담당	지방시설사무관	최 재 왕	’10. 07. 22
	건설기술담당	지방시설사무관	문 흥 로	’11. 07. 14
	내포권개발팀장	지방시설사무관	이 명 수	’11. 01. 13
건축도시과	과 장	지방기술서기관	김 창 헌	’08. 07. 31
	주택정책담당	지방시설사무관	박 경 구	’08. 07. 31
	건축문화담당	지방시설사무관	김 관 호	’11. 01. 13
	공공디자인담당	지방계약‘가’급	안 진 근	’08. 10. 28
	도시기반담당	지방시설사무관	조 봉 환	’11. 01. 13
도로교통과	과 장	지방시설사무관	조 은 하	’11. 07. 01
	도로교통담당	지방행정사무관	윤 동 현	’11. 07. 14
	도로계획담당	지방시설사무관	김 인 식	’11. 07. 14
	도로관리담당	지방시설사무관	전 태 진	’11. 07. 14
	교통관리담당	지방공업사무관	서 종 호	’10. 01. 13

소 속	직 위	직 급	성 명	현직임용일
치수방재과	과 장	지방기술서기관	박 승 태	’11. 04. 22
	하천행정담당	지방행정사무관	이 기 승	’11. 07. 14
	하천시설담당	지방시설사무관	윤 병 환	’11. 04. 22
	금강사업팀장	지방시설사무관	정 석 완	’11. 01. 13
	예방대책담당	지방시설사무관	김 순 기	’10. 10. 7
	복구지원담당	지방시설사무관	정 규 재	’11.01.13
	재난상황관리담당	지방행정사무관	노 현 도	’09. 01. 07
항만물류과	과 장	지방기술서기관	안 병 량	’11. 01. 03
	항만정책담당	지방시설사무관	남 광 현	’11. 01. 13
	항만개발담당	지방시설사무관	김 영 선	’11. 01. 13
	연안관리담당	지방시설사무관	김 인 호	’09. 01. 07
	물 류 담 당	지방행정사무관	윤 석 용	’11. 07. 14
토지관리과	과 장	지방기술서기관	이 종 연	’08. 01. 02
	토지정책담당	지방행정사무관	유 두 상	’11. 07. 14
	지적관리담당	지방시설사무관	김 덕 만	’11. 01. 13
	부동산관리담당	지방시설사무관	리 순 하	’11. 01. 13
	공간정보담당	지방시설사무관	김 시 부	’10. 03. 12
	새주소팀장	지방시설사무관	이 병 희	’10. 07. 22