□ 외국인학교 설립 관련 추진계획

〈지금까지 추진상황〉

〈외국인학교 설립타당성 검토연구용역 추진 〉

❍ 기    간  : ’12.3.1.~8.27

❍ 용역기관/ 용역비 : 충남발전연구원 /45백만원

❍ 주요내용

- 외국인학교설립 필요성, 수요대상자조사, 설립시기 및 운영         주체 선정 등 전반적인 사항 제시

❍ 착수보고회(3.1), 실무회의(5회), 중간보고(7.4), 최종보고(8.21)

〈용역결과(외국인학교 기본구상)〉

❍ (수요분석) 2015년 200명(외국인 115, 내국인 85) 목표

❍ (설립시기) 2014년 착수, 2017년 개교, 사업비 260억원

❍ (학교규모) 정원 350명 목표(2027년), 통합형(유․초․중․고), 사업비 260억원     ※건축비 : 국100, 도55, 시군55, 부지(법인, 50), 부지 : 33천㎡(1만평)

❍ (후보지역) 외국인수(1위 천안시, 1위 아산시, 3위 당진시)

집중화 지수(1위 아산시, 1위 천안시, 3위 당진시)

※202기업 설문조사 결과 삼성(4개계열)에서 학령 아동층 외국인 9명, 내국인 432명 도출

〈추진계획〉

❍ 중앙부처 건의(기재부 및 지경부) : 2012. 10월 限

- 외국인학교 설립타당성 및 국비(100억원) 지원

❍ 입지 및 설립, 운영 주체 선정

- 입지․설립주체 : 대기업 비영리법인과 시군 공동추진(가중치 부여)

- 운영주체 : 비영리외국법인 등 공모방식 도입