<5-18-3>	충남산림자원연구소 이전대상지 확정

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	충남산림자원 연구소 이전		타당성조사 (예정지 선정)	이전 대상지 확정	기본계획 수립	기본 및 실시설계	조성공사	조성공사 및 개원
추진실적			연구용역 착수	이전 후보지 공모 용역추진 완료 (’22.11.∼’23. 12.)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	70	0	70	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	70	0	70	0	0	0	0
24년	확보	243	0	243	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2027년(6년간)

○ 사 업 비 : 68,500백만원(도비)

○ 사업내용 : 충남산림자원연구소 도내 이전

- 도내로의 이전계획 수립 및 연구소 조성사업 추진

- 유치희망 시·군 후보지 신청 접수, 입지선정기준에 따른 후보지별 여건, 관련법규 등 종합적으로 분석 및 평가하여 후보지 선정

	▪ 이전기능 : 임업연구(나무병원․포지 등), 산림문화(수목원․ 치유의 숲 등), 산림교육 등 ▪ 이전규모 : 최소면적 90ha이상 * 수목원(10ha), 산림복지단지(80ha, 치유의 숲 등) 등록기준 반영 ▪ 대상지 : 미정(평가위원회 구성을 통한 대상지 선정)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 산림자원연구소 이전 추진계획(안) 수립(’22.7.)

○ 「산림자원연구소 이전 후보지 선정 용역」추진(’22.11.~)

※ (용역사) 한국산업경쟁력연구원, (용역비) 70백만원, (기간) ’22.11.∼’23.12.

○ 「산림자원연구소 이전 후보지 선정 용역」착수보고회(’23.2.)

○ 산림자원연구소 이전 후보지 입지선정기준 자문회의 개최(’23.4.)

○ 산림자원연구소 이전 후보지 공모(’23.5.23.~6.30.)

⇨ 5개 시군 신청 : 공주시, 보령시, 금산군, 청양군, 태안군

○ 산림자원연구소 이전 공모 신청지 현장확인 및 서류 검토(~23. 8.)

- 신청 후보지별 여건, 장·단점 분석, 관련법규 등 입지분석 실시

○ 「산림자원연구소 이전 후보지 선정 용역」중간보고회(23. 10.), 최종보고회(23. 12.)

○ 산림자원연구소 이전 추진을 위한 팀 신설(관리과 내) (24. 1.)

○ 산림자원연구소 이전 대상지 평가위원회 구성운영 계획(안) 수립(24. 3.)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 산림자원연구소 유치를 위한 시군 경쟁 과열예상 등

□ 향후 추진계획

< 단기 > 이전 대상지 평가위원회 구성 및 대상지 최종 선정

- 관련 학식과 경험이 풍부한 분야별 전문가 중심 평가위원회 구성

- 입지선정기준에 따른 후보지별 현지여건, 관련법규 등을 종합평가(정량·정성)하여 이전 대상지 확정

< 중장기 > 기본구상 및 기본계획 수립, 행정절차 이행, 조성사업 추진 등

- (기본계획) 설계 반영 및 타당성 확보를 위한 기본계획 수립

- (행정절차) 지방재정투자심사 및 공공건축 심의 등 관련 행정절차 이행

- (조성사업) 연구소, 연구시설, 산림복지시설 등 조성 추진

산림자원연구소 관리과 연구소이전팀   팀장 서상운   담당자 오영환(☎7422)